11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 남원시에서 ′13년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

‣ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2013년에 추진한 사업

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)	비고
요천 생태습지 조성사업	8,700	5,251	3,449	-	2014	2009	45%	도 심사
백두대간 생태.문화공원 조성	40,000	29,650	2,350	8,000	2015	2011	71%	중앙심사
춘향골 체육공원 확장	13,200	2,984	2,900	7,316	2016	2011	30%	도 심사
광한루원 주변 관광타운조성	27,254	13,692	7,146	6,416	2015	2011	20%	도 심사
허브식품 클러스터 육성사업	7,954	6,650	1,304	-	2014	2011	88%	도 심사
생활폐기물 가스화시설 R&D 연구사업	14,160	14,160	-	-	2014	2011	35%	도 심사
광치천 도심하천 생태복원사업	18,000	845	5,822	11,333	2015	2012	15%	도 심사
소리문화 체험마을 조성	9,000	5,340	1,920	1,740	2015	2012	10%	도 심사
대강 농어촌 생활용수 개발사업	7,600	1,140	1,496	4,964	2016	2012	26%	도 심사
산동 농어촌 생활용수 개발사업	6,000	1,140	2,530	2,330	2017	2012	50%	도 심사
일반산업단지 조성	70,000	2,000	1,700	66,300	2020	2012	5.3%	자체심사
안전한 보행환경 조성사업	4,000	2,000	2,000	-	2014	2012	65%	자체심사
남원 문화의 거리 조성	4,000	2,000	2,000	-	2016	2012	50%	자체심사
남원 하수처리장 노후시설물 개선사업	3,000	3,000	-	-	2013	2012	100%	자체심사
남원 하수처리장 슬러지 감량화 사업	6,000	714	3,172	2,114	2015	2013	9%	도 심사
씨감자 생산기반 구축사업	4,000	100	3,900	-	2014	2013	60%	도 심사

사업명	총 사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)	비고
남원 애향장학숙 건립	6,075	4,902	1,173	-	2014	2013	100%	도 심사
시립미술관 건립	3,500	-	1,750	1,750	2016	2013	5%	자체심사
시설원예 품질개선사업(오이)	12,292	4,292	2,000	6,000	2017	2013	74.6%	자체심사
시설원예 품질개선사업 (파프리카)	14,459	9,659	1,600	3,200	2016	2013	100%	자체심사
시설원예 품질개선사업(딸기)	12,990	4,990	2,000	6,000	2017	2013	42.5%	자체심사
농식품 6차 산업	3,183	502	2,529	152	2015	2013	40%	자체심사

사업명

요천 생태습지공원 조성사업

담당자

환경과 최은주(☎620-6232)

□ 필요성 및 기대효과

○ 하수처리장 방류수를 이용 수질개선 도모 및 수생태 건강성 회복

○ 생태습지 조성으로 자연과 사람이 함께하는 친환경 친수 공간 제공

□ 사업개요

○ 기간 : 2010년 ~ 2014년

○ 위치 : 전북 남원시 주생면 중동리 1275번지 일원

○ 시공사 : ㈜동일종합건설

○ 사업규모 : 75,502㎡(매립장 75,562㎡ 별도)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,700백만원(국비 6,090, 시비 2,610)

○ 2013년까지 집행액 : 5,251백만원(연도별, 재원별 등)

○ 향후 소요액 : 3,449백만원(연도별, 재원별 등)

구 분	합 계	기투자	2012년	2013년	2014년
합 계	8,700	2,486	1,333	1,432	3,449
국 비	6,090	2,300	373	1,342	2,075
시 비	2,610	186	960	90	1,374

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 공유재산 관리계획 의회 의결 및 토지매입 : 2011. 6월 ~

○ 도시계획시설(유수지) 결정 고시 : 2011. 9월

○ 환경부 및 전라북도 설계(안) 기술검토 : 2012. 2. 28. / 4. 30.

○ 1차분 공사추진(준공 : 2013. 6. 24.) : 2012. 8월~ 2013. 6월

○ 2차분 공사추진(착공 : 2013. 6. 21.) : 2013. 6월~

□ 향후계획

○ 2차분 공사 마무리 추진 : 2014. 12월한

○ 요천 생태습지공원 준공 : 2014. 12월

사업명

백두대간 생태문화공원 조성

담당자

산림과 강정주(☎620-6444)

□ 필요성 및 기대효과

○ 백두대간지역의 문화․역사 ․생태자원의 홍보 및 체험을 위한 관련시설을              조성하여 백두대간보호에 대한 범국민적 인식제고와 국민휴식 공간 및 청소년        생태체험 교육장으로 활용

□ 사업개요

○ 기  간 : 2010～2015

○ 위치 : 남원시 운봉읍 공안리, 주촌리 일원

○ 시공사 : 체험휴양시설 ⇒ (주)장안, 전시관 ⇒ (유)한미종합건설

○ 사업규모 : 24.3ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 40,000백만원(국비 20,000 도비 4,000  시비 16,000)

○ 2013년까지 집행액 : 29,650백만원

구 분	합 계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년
합 계	40,000	11,655	14,345	3,650	2,350	8,000
국 비	20,000	9,000	7,000	-	-	4,000
도 비	4,000	1,800	-	1,400	-	800
시 비	16,000	855	7,345	2,250	2,350	3,200

○ 향후 소요액 : 10,350백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 71%)

[체험･휴양시설]

○ 사업 준공 : ′13. 12. 30

○ 수탁대상자 선정(심사위원회) : ′14. 5. 30 / 수탁계약서 협의  : ′14. 7. 7

○ 개장 운영 : ′14. 7. 15.  ~

[전시관]

○ 전시관 건축공사 1차분 준공 : ′14. 2월

○ 기계, 전기, 통신, 소방 닥트 및 트레이 설치작업   : ′14. 3월

○ 외부치장 벽돌쌓기, 징크 판넬 구조틀 설치 완료   : ′14. 7월

□ 향후계획

[전시관]

◦ 건축공사, 부대공사, 전시모형물 설치 등 사업 완료     : ‘14. 12. 13

사업명

춘향골 체육공원 확장

담당자

교육체육과 김덕곤(☎620-5617)

□ 필요성 및 기대효과

○ 체육시설 집중화로 종합적인 체육의 장을 확보함으로 시민과 생활 체육인의          편의 도모와 건강증진 기여

○ 전국대회 개최 경기장 확보로 각종 대회 및 전지훈련팀 유치하여 지역           경제 활성화와 스포츠메카 이미지 제고

□ 사업개요(3차사업 중 1차사업)

○ 기간 : 2009 〜 2016년(8개년)

○ 위치 : 남원시 월락동 춘향골 체육공원 인접부지

○ 시공사 : 예안종합건설 최진규

○ 사업규모 : 부지면적 106,575㎡(157,047㎡ ⇒ 263,622㎡ : 도시관리계획)

※ 도시계획시설(운동장) 62,880㎡, 공원 43,695㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  13,200백만원(국비 1,000 도비 1,600 시비 10,600 기타 )

○ 2013년까지 집행액 : 2,984백만원(연도별, 재원별 등)

구 분	합 계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015이후
합 계	13,200	584	1,200	1,200	2,900	7,316
국 비	1,000	-	-	-	1,000	-
도 비	1,600	-	800	800	-	-
시 비	10,600	584	400	400	1,900	7,316

○ 향후 소요액 : 10,216백만원(연도별, 재원별 등)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

○ 1차사업 : 춘향골 다목적구장 건축 1-2차분 완료  : ‘2013. 11. 30

○ 1차사업 춘향골 다목적구장 3차분 추진중 : ‘14. 3. 3 ~ ’14. 11. 27

□ 향후계획

○ 춘향골 다목적구장(실내 4면) 3차분 완료 : ‘14. 11. 27. 준공

○ 춘향골 체육공원 확장 2차사업 부지 확보( 총 106,575㎡부지를 매입)

현재 9,906㎡을 매입 잔여부지는 예산확보에 따라 매입

□ 사업변경(연도) 내역

○ 1차 사업 실외 테니스장 8면과, 운동장 1면 등은 금후 예산확보 후 추진

사업명

광한루원 주변 관광타운조성

담당자

문화관광과 유종상(☎620-6179)

□ 필요성 및 기대효과

○ 전통문화의 창조적 재생산을 통한 적극적인 관광상품 개발

○ 한(韓)스타일을 테마로하는 관광타운 조성으로 지속가능한 도시발전 도모

□ 사업개요

○ 기간 : 2011 ~ 2015년

○ 위치 : 남원시 광한북로 23 일원

○ 시공사 : (유)세호종합건설

○ 사업규모 : 전통문화체험단지 9,606㎡, 남원한국의집 6,321㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,254백만원(국비 8,535, 도비 4,807, 시비 13,912)

○ 2013년까지 집행액 : 13,692백만원(연도별, 재원별 등)

○ 향후 소요액 : 13,562백만원(연도별, 재원별 등)

구 분	합 계	기 투자	2012년	2013년	2014년	2015년
합 계	27,254	563	8,458	4,671	7,146	6,416
국 비	8,535	-	2,550	3,150	2,835	-
도 비	4,807	300	1,898	1,298	1,311	-
시 비	13,912	263	4,010	223	3,000	6,416

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20%)

○ 타당성조사 연구용역	: 2010. 9 ~ 2011. 3

○ 전통문화체험단지 추진

- 토지보상 실시(23필지중 23필지 완료)    : 2012. 5 ~ 2013. 12

- 실시설계 및 문화시설지구 결정           : 2012. 1 ~ 2013. 2

- 사업착공(건축, 감리용역)                : 2013. 5

○ 남원한국의 집 토지매입 추진

- 토지보상 실시(40필지중 16필지 완료)     : 2012. 7 ~

□ 향후계획

○ 전통문화체험단지 추진

- 공사(건축․토목․조경) 시설공사 완공	: 2015. 12월

○ 남원한국의 집 토지매입 추진

- 토지 및 지장물 보상	: 2013. 7 ~ 계속

- 기본 및 실시설계(건축, 도시계획시설변경)  : 2014. 7 ~ 2014. 12

- 사업 발주시행	: 2014. 12 ~ 2015. 12

사업명

남원허브식품클러스터

담당자

원예허브과 박경열 (☎620-6253)

□ 필요성 및 기대효과

○ 허브자원의 브랜드 창출과 기능성식품을 통한 허브산업의 중심지로 발전

○ 허브를 통한 미래 신성장산업의 메카로 부상을 위한 인프라구축

○ 지리산 허브벨리와 인근 관광자원을 연계한 사계절 체류형 허브종합체험관광 실현

□ 사업개요

○ 기간 : 2010 ～ 2014

○ 위치 : 남원시 일원

○ 시공사 : 남원시

○ 사업규모 : 4개 분야 12개 사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,954백만원(국비 3,647, 시도비 2,236, 시군구비 218, 기타 1,853)

○ 2013년까지 집행액 : 6,650백만원(국비 2,995, 시도비 1,834, 시군구비 218, 기타 1,603)

구 분	합 계	기투자	2013년	2014년	비 고
합 계	7,954	5,308	1,342	1,304
국 비	3,647	2,195	800	652
도 비	2,236	1,432	402	402
시 비	218	78	140	-
기 타	1,853	1,603	-	250

○ 향후 소요액 : 1,304백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 88%)

○ 혁신체계구축 및 네트워킹 : 3개 사업, 495백만원

○ 생산 및 유통가공 기반구축 : 3개 사업, 3,043백만원

○ 산업화 및 마케팅 : 6개 사업, 2,415백만원

○ 체험관광 활성화 : 2개 사업, 1,097백만원

□ 향후계획

○ 이월사업 최소화를 위한 사업독려 및 지도감독

○ 허브소비 촉진 계약재배 및 제품판매 홍보지원

□ 사업변경 내역

○ 사업비 변경 : 2013년 사업비 인센티브 수령 및 2014년도 지역농식품클러스터사업 예산 변동(당초 8,390백만원, 변경 7,954백만원)

사업명

생활폐기물 가스화시설 R&D 연구사업

담당자

환경과 김형준(☎620-6242)

□ 필요성 및 기대효과

○ 생활폐기물 연소를 통한 매립량 감소로 매립량 사용연한 증가

○ 생활폐기물 연소로 발생된 전기 매전으로 시 세외수입 증대

□ 사업개요

○ 기  간 : 2010. 10. 1. ∼ 2014. 10. 31.

○ 위  치 : 남원시 대산면 대곡리 311번지 일원(대산매립장)

○ 시공사 : 포스코플랜택

○ 사업규모 : 전처리시설 50톤/일 , 가스에너지 30톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,160백만원(국비6,400, 시비 6,600, 공단 1,160)

○ 2013년까지 집행액 : 14,160백만원(연도별, 재원별 등)

○ 향후 소요액 :  0백만원(연도별, 재원별 등)

구 분	합 계	2010년	2011년	2012년	2013년	비 고
합 계	14,160	1,067	1,316	4,446	7,331
국 비	6,400	800	710	1,350	3,540
시 비	6,600	30	240	3,000	3,330
기 타	1,160	237	366	96	461

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 전처리시설 건물 완료

□ 향후계획

○ 가스화시설 시운전 : 2014. 5. 12 ∼ 2014. 10. 31

○ 가스화발전시설 준공(시운전 포함)    : 2014. 10. 31

사업명

광치천 도심하천 생태복원사업

담당자

건설과 서지호(☎620-6543)

□ 필요성 및 기대효과

○ 광치천 상류 신생․보성마을의 축사, 농경지 및 생활공간에서 발생 유하되는 지표수 등 각종 비점오염원에 의한 수질악화 초래

○ 수질개선과 수생태계 보전을 위한 생태습지 조성으로 인간과 자연이 공존하는 하천문화 조성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013 ～ 2015(3년간)

○ 위    치 : 남원시 향교동 ～ 용정동 지내

○ 시 공 사 : 실시설계 용역 중

○ 사업규모 : 하천유지수 확보 및 수질개선 L= 1.2km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총 사 업 비 : 18,000백만원(국비10,800, 시비7,200)

○ 2013년까지 집행액 : 845백만원

○ 향후 소요액 : 17,155백만원

구 분	합 계	2013년	2014년	2015년	비 고
합 계	18,000	845	5,822	11,333
국 비	10,800	842	3,158	6,800
시 비	7,200	3	2,664	4,533

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 공모사업선정, 협약식 개최(환경부)            : ‘12.  5. 29

○ 지방재정 투․융자심사 완료                  : ‘12. 10. 29

○ 실시설계 및 하천기본계획(변경) 용역 추진         : ‘13.  4. 30 ~ ’13. 11. 25

□ 향후계획

○ 지방건설기술 심의(도 물환경관리과)               : 2014.  8월

○ 시설사업 발주 및 착공예정                      : 2014. 9월

사업명

섬진강 소리문화 체험마을 조성

담당자

문화관광과 채윤호(☎620-6463)

□ 필요성 및 기대효과

○ 교육과 재미가 공존하는 복합공간이자 지역민이 함께하는 문화공간을 조성하       여 대중 누구나 쉽게 소리자원을 체험하고 즐길 수 있는 환경조성으로 섬진강       을 중심으로 한 강변 문화 공간 조성

□ 사업개요

○ 기간 : 2011 ~ 2015

○ 위치 : 남원시 노암동 320번지 일원

○ 시공사 : ㈜원광건설

○ 사업규모 : 소리아카이브관, 숙박동, 관리동, 연결도로(L=510m, B=12m),

소리명상길 조성 (L=500m, B=1.5~2.0m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원(국비 4,500, 시군구비 4,500)

○ 2013년까지 집행액 : 5,340백만원(연도별, 재원별 등)

○ 향후 소요액 : 3,660백만원(연도별, 재원별 등)

구 분	합 계	기투자	2013년	2014년	2015년이후	비 고
합 계	9,000	1,200	4,140	1,920	1,740
국 비	4,500	600	2,070	960	870
시 비	4,500	600	2,070	960	870

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ 강변문화관광개발 기본계획 수립 완료              : ‘11.  2. 16.

○ 유원지 조성계획 변경(소리마을․도예촌․미술관 등) 고시      : ‘13. 10. 29.

○ 사업계획(안) 변경(문체부)                        : ‘13. 12. 10.

○ 조달청 시설공사 계약의뢰(원가심사 및 낙찰자 선정)        : ‘14.  3.  6.

○ 시설공사 착수(건축+토목+조경+소방)              : ‘14.  5. 12.

□ 향후계획

○ 시설공사 시행(1차분) - 남산골 진입도로(L=110m, B=12m), 소리명상관, 숙박동, 실개천 조성

○ 시설공사 시행(2차분) - 유원지내 연결도로(L=520m, B=12m)개설, 소리명상길 등

□ 사업변경 내역

○ 문체부 사업계획 변경 승인 : 2014.12.10.

-  총사업비 변경(95억→90억), 유원지내 연결도로(걷고 싶은 거리조성) 반영

사업명

대강 농어촌 생활용수개발사업

담당자

상수도사업소 김상규(☎620-6882)

□ 필요성 및 기대효과

○ 농촌지역에 도시수준의 깨끗하고 풍부한 양질의 수돗물을 공급하여 농촌         지역 보건위생 및 생활환경 개선을 통한 주민 복지 증진

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013 ~ 2016(4개년)

○ 위    치 : 남원시 대강면 일원

○ 시 공 사 : (유)태림종합건설

○ 사업규모 : 송·배수관로 58km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,600백만원(국비 5,320, 시군구비 2,280)

○ 2013년까지 집행액 : 1,140백만원(국비800, 시비340)

구 분	합 계	2013년	2014년	2015년 이후	비 고
합 계	7,600	1,140	1,496	4,964
국 비	5,320	800	1,047	3,473
시 비	2,280	340	449	1,491

○ 향후 소요액 : 6,460백만원(국비 4,520, 시군구비 1,940)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 26%)

○ 대강배수지계통 상수도공사(1차분) 추진

- 관로매설 L=5.8km 완료○ 실시설계 용역 완료 : 2013. 5월

□ 향후계획

○ 상수도관로 부설사업 지속추진  : 2014.1 ~ 12월

○ 이중굴착 방지를 위해 사업우선순위 설정 운영

사업명

산동 농어촌 생활용수개발사업

담당자

상수도사업소 김상규(☎620-6882)

□ 필요성 및 기대효과

○ 농촌지역에 도시수준의 깨끗하고 풍부한 양질의 수돗물을 공급하여 농촌         지역 보건위생 및 생활환경 개선을 통한 주민 복지 증진

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013 ~ 2017(5개년)

○ 위    치 : 산동, 이백면

○ 시 공 사 : 고려종합건설

○ 사업규모 : 송·배수관로 38km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원(국비 4,200, 시군구비 1,800)

○ 2013년까지 집행액 : 1,140백만원(국비800, 시비340)

○ 향후 소요액 : 4,860백만원(국비3,402, 시군구비 1,458)

구 분	합 계	2013년	2014년	2015년 이후	비 고
합 계	6,000	1,140	2,530	2,330
국 비	4,200	800	1,771	1,629
시 비	1,800	340	759	701

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 산동배수지계통 상수도공사(1차분) 추진

- 관로매설 L=6.1km 완료

□ 향후계획

○ 상수도관로 부설사업 지속추진  : 2014. 1 ~ 12월

○ 이중굴착 방지를 위해 사업우선순위 설정 운영

사업명

남원 일반산업단지 조성사업

담당자

도시과 이현석(☎620-6468)

□ 필요성 및 기대효과

○ 지리산권 중추도시로 경제기반 확충을 위해 기존산업과 연계한 전략산업 육성

○ 전북도 배후의 향상된 입지 조건을 갖춘 동부권 최고의 기업맞춤형 일반산업단지 조성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013 ~ 2020년(8년)

○ 위    치 : 남원시 사매면 월평리 산37-3번지 일원

○ 사업규모 : 단지 조성 776천㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 70,000백만원(시비 70,000)

○ 2013년까지 집행액 : 2,000백만원

구 분	합 계	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
합 계	70,000	2,000	1,700	10,000	10,000	10,000	36,300
시 비	70,000	2,000	1,700	10,000	10,000	10,000	36,300

○ 향후 소요액 : 68,000백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5.3%)

○ 남원 일반산업단지 조성 추진계획 수립	: ‘12.10.

○ 지방재정 투·융자사업 심사 및 중기 지방재정 계획 반영  : ‘12.11.

○ 개발행위허가 제한지역 지정 고시	: ‘13.01.

○ 제반 용역(개발계획 및 실시설계, 환경·교통 등) 착수      : ‘13.05.

○ 산업단지계획 승인(보완) 신청                           : ‘14.06.

○ 합동설명회 개최                                        : ‘14.07.

□ 향후계획

○ 전북도 및 중앙부처 협의                             : ‘14.08.～

○ 전라북도 지방 산업단지 계획 심의위원회 심의         : ‘14.09.

○ 산업단지계획 승인·고시(예정)                         : ‘14.09.~10.

○ 보상 및 공사 추진                                   : ‘15.～’20.

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 1,082천㎡(당초)→776천㎡(현재) [사업 규모 조정으로 면적 변경]

○ 사업기간 : ′13～′17년(5년,당초) → ′13～′20년(8년,현재)[중기지방재정계획 시 변경]

사업명

안전한 보행환경 조성사업

담당자

도시과 김건중(☎620-6463)

□ 필요성 및 기대효과

○ 기본보행 환경을 개선하여 교통사고 요인을 제거함으로써 시민의 안전한        생활공간 제공 및 보행자의 편안하고 쾌적한 이동, 휴식 등을 위한 제       반시설 확충

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013.1. ~ 2014. 12.

○ 위    치 : 남원시 죽항동 지내

○ 시 공 사 : ㈜동광종합건설

○ 사업규모 : 보행자도로 L= 1.12km B=2~6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,000백만원(국비 2,000, 시비 2,000)

○ 2013년까지 집행액 : 2,000백만원(연도별, 재원별 등)

○ 향후 소요액 : 2,000백만원(연도별, 재원별 등)

구 분	합 계	2013년	2014년	비 고
합 계	4,000	2,000	2,000
국 비	2,000	1,000	1,000
시 비	2,000	1,000	1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  65 %)

○ 남문로(보행자연결 도로) L=350m, B=6m 완료

○ 동헌길(보행자 전용길) 1차분 L=770m B=6m 공사중

□ 향후계획

○ 동헌길 일부구간 (L= 200m B=6m) 포장 및 보행자 도로 설치

(추석명절 전까지 완료 예정)

○ 전체구간 2014년 까지 완료 예정

사업명

남원 문화 예술의 거리 조성

담당자

문화관광과 전용남(☎620-6153)

□ 필요성 및 기대효과

○ 지역주민의 문화예술 활동과 여가선용에 필요한 문화공간을 조성을 통한 문화       활동과 젊은 층의 놀이문화 장소로 기능할 수 있는 공간마련

○ 예술의 혼이 살아 숨 쉬는 예술인 창작마을 조성과 예술가들의 창작             여건 개선으로 문화관광 활성화를 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 :  2012년 ～ 2016년

○ 위 치 : 구군청 및 광한루원 북문 일원

○ 사업규모 : 문화예술 프로그램운영, 예술인 창작공간 조성,

사랑의 테마 조형물 전시사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원(도비 2,000, 시비 2,000)

○ 2013년까지 집행액 : 2,000백만원

○ 향후 소요액 : 2,000백만원(연도별, 재원별 등)

구 분	합 계	기투자	2013년	2014년이후	비 고
합 계	4,000	600	1,400	2,000
도 비	2,000	300	700	1,000
시 비	2,000	300	700	1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  50 %)

○ 예술의 거리 조례 등 운영규정 9개 제정

○ 문화예술 창작공간 매입(398㎡ 3층)  : 2013. 03.

○ 문화예술의거리 지원사업 지원       : 48개소(리모델링 20, 임대료 22, 간판 6)

○ 방문자센터 및 창작공간 내부 리모델링 공사  : 2013.11. ～ 2014.02

○ 창작공간 및 방문자센터 외관 리모델링 공사  : 2014.02 ~ 05.

○ 보행환경 조성사업 연계한 한전지중화 및 상․하수도 정비 : 2014.01 ~12

□ 향후계획

○ 예가람길 작은 미술관 운영 및 창작공간 임대 : 2014. 8~

○ 토요상시 거리공연, 문화예술체험시장 운영 등 : 2014. 10

사업명

남원하수처리장 노후시설물 개선사업

담당자

환경사업소 장서익(☎620-5808)

□ 필요성 및 기대효과

○ 1995년부터 운영된 각종 처리시설의 노후로 잦은 고장이 발생되어 정상적인        하수처리장 운영이 어렵고, 안전사고 우려 상존

○ 하수도법 개정으로 2012년 수질기준 강화에 따른 하수처리설비 보강 및 개량 필요

○ 노후처리시설 개선 등으로 하수처리장이 혐오, 기피시설 인식 불식 및 근무여건 개선 필요

□ 사업개요

○ 기간 : 2012. 3월 ~ 2013. 12월

○ 위치 : 남원시 주생면 요천로 1036-207(환경사업소 내)

○ 시공사 : ㈜에취켓 외 8개사

○ 사업내용 : 슬러지수집기, 침사제거기 등 노후시설물 개량

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원(국비 1,500, 도비 750, 시비 750)

○ 2013년까지 집행액 : 3,000백만원

구 분	합 계	2012년	2013년	비고
합 계	3,000	1,400	1,600
국 비	1,500	700	800
도 비	750	350	400
시 비	750	350	400

○ 향후 소요액 : 0백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업계획 수립 : 2011. 4

○ 실시설계      : 2011. 12

○ 공사시행      : 2012. 10 ~ 2013. 12

□ 향후계획

○ 국비 보조금 정산 : 2014. 12월

사업명

남원하수처리장 슬러지 감량화사업

담당자

환경사업소 장서익(☎620-5808)

□ 필요성 및 기대효과

○ 소화조설비 개선 및 농축슬러지 효율개선을 통한 슬러지 감량

○ 탈수 슬러지 발생량 감소에 따른 처리비용 절감

○ 소화가스를 이용한 탄화설비 에너지 사용으로 대체에너지 활용

□ 사업개요

○ 기간 : 2012. 12월 ~ 2015. 10월

○ 위치 : 남원시 주생면 요천로 1036-207(환경사업소 내)

○ 시공사 : (유)한백종합건설 컨소시엄

○ 사업내용 : 소화조(∅16.0m × H8.3m × 2대) 개선 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원(국비 4,200, 시비 1,800)

○ 2013년까지 집행액 : 714백만원(국비 500, 시비 214)

구 분	합 계	2013년	2014년	2015년	비고
합 계	6,000	714	3,172	2,114
국 비	4,200	500	2,220	1,480
시 비	1,800	214	952	634

○ 향후 소요액 : 5,458백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 9%)

○ 업체선정 및 총액계약 : 2013. 8

○ 1차분 공사 시행      : 2013. 12 ~ 2014. 7

○ 2차분 공사 시행      : 2014. 5 ~ 2014. 12

□ 향후계획

○ 3차분 공사 시행       : 2015. 1

○ 시운전 및 공사 준공   : 2015. 10

사업명

씨감자 생산기반 구축사업

담당자

현장지원과 최진호(☎620-8051)

□ 필요성 및 기대효과

○ 씨감자 생산․공급 민간 및 지자체 이전에 따른 공급량 감소 및 씨감자가격

상승으로 경영비 가중

○ 부족한 남원 씨감자 자급화 및 불량 씨감자 공급에 의한 농업인 피해 최소화

○ 씨감자 생산 새 소득원 개발로 농업인 소득증대 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기간 : 2013 ~ 2014년

○ 위치 : 남원시 농업기술센터 내, 남원시 고랭지역(운봉읍, 주천면, 인월면, 아영면)

○ 사업규모

- 씨감자 생산기반 시설 : 저온큐어링시설(1,020㎡), 조직배양실(280㎡)

- 씨감자 생산시설 : 22ha(노지통망사 및 가을 씨감자 생산시설)

- 씨감자 생산 생력화 장비구입 : 5종(수확기, 선별기 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원(국비 2,000, 시도비 600, 시군구비 1,400)

○ 2013년까지 집행액 : 100백만원

○ 향후 소요액 : 3,900백만원

구 분	합 계	2013년	2014년	비 고
합 계	2,460	100	3,900
국 비	1,230	50	1,180
도 비	369	15	354
시 비	861	35	826

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 씨감자 생산기반 시설 완공 : 저온큐어링시설(1,000㎡), 조직배양실(280㎡)

○ 씨감자 생산시설 구축완료 : 9.4ha(노지통망사 생산시설)

○ 씨감자 생산 생력화 장비구입 : 4종(지게차, 수확기, 승용관리기, 볏짚절단기)

□ 향후계획

○ 씨감자 생산시설 구축 : 12.6ha(노지통망사 및 가을 씨감자 생산시설)

○ 씨감자 생산 생력화 장비구입 : 1종(씨감자 선별기)

사업명

남원 애향장학숙 건립

담당자

교육체육과 오영택(☎620-5603)

□ 필요성 및 기대효과

○ 서울로 진학하는 남원 출신 대학생 등을 위해 실익적 면학 여건 지원

○ 타 지역과의 경쟁력 강화와 미래 남원을 이끌어 갈 인재 육성

□ 사업개요

○ 기    간 :  2013. 4. ~ 2014. 2

○ 위    치 : 서울시 성북구 지봉로 23길 13-6

○ 시 공 사 : ㈜태지종합건설(대표 박원석)

○ 사업규모 : 건축면적 366㎡  연면적 1,964㎡-지하1층, 지상5층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,525백만원(시군구비 2,000백만원, 기타 4,525백만원)

○ 2013년까지 집행액 : 4,902백만원(연도별, 재원별 등)

○ 향후 소요액 : 1,173백만원(연도별, 재원별 등)

구 분	합 계	기투자	2013년	2014년
합 계	6,075	3,325	1,577	1,173
시 비	2,000	2,000	-	-
기 타	4,075	1,325	1,577	1,173

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 부지매입(면적 966.6㎡ / 3,325백만원 → 시비 2,000, 재단 1,325)    : 09. 1월/7월

○ 건축허가                                         : 13. 3월

○ 기공/준공                                        : 13. 4월~14. 2월

○ 입사생 모집 및 선발                             : 14. 1~2월

○ 입소식                                           : 14. 3. 2

□ 사업변경 내역

변경내역	당초	현재	증감액	사유
건축공사 (전기, 소방 등)	3,200	2,750	∇450	지명경쟁입찰을 통한 공사 단가 인하 계약

(단위 : 백만원)

사업명

남원 시립미술관 건립

담당자

문화관광과 이강철(☎620-6154)

□ 필요성 및 기대효과

○ 지역 출신 유명 예술인의 예술적 가치가 높은 작품을 전시하여 시민들에게 문화시민으로서의 자긍심과 함께 좋은 작품을 볼 수 있는 기회를 제공

□ 사업개요

○ 기간 : 2013 ~ 2016

○ 위치 : 남원시 어현동 273번지 일원(함파우 유원지 내)

○ 시공사 : 시기 미도래

○ 사업규모 : 부지 8,000㎡, 건물 1,425㎡(지하1층, 지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원(국비 1,900, 시군구비 1,600)

○ 2013년까지 집행액 : 0백만원(연도별, 재원별 등)

○ 향후 소요액 : 3,500백만원(연도별, 재원별 등)

구 분	합 계	2013년	2014년	2015년	비 고
합 계	3,500	-	1,750	1,750
국 비	1,900	-	700	1,200
시 비	1,600	-	1,050	550

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계 용역중

□ 향후계획

○ 건축공사 착공 : 2014. 11월

○ 건축공사 준공 : 2016. 3월

사업명

시설원예 품질개선사업(오이)

담당자

원예허브과 이우재 (☎620-6237)

□ 필요성 및 기대효과

○ 일반원예재배시설의 현대화, 규모화(증․개축)전문화를 지원함으로써 품질         향상 및 생산량 증대로 농업 농촌 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기간 : 2013 ~ 2014년(2년)

○ 위치 : 남원시 일원

○ 시공사 : 보조사업자 사업시행

○ 사업규모 : 일반원예시설 17.8ha

- 시설현대화 14.4, 시설현대화 및 증개축 3.4

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,292백만원(국비2,458, 시도비1,106, 시군구비2,582, 기타6,146)

○ 2013년까지 집행액 : 4,292백만원

구 분	합 계	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
합 계	12,292	4,292	2,000	2,000	2,000	2,000
국 비	2,458	858	400	400	400	400
도 비	1,106	386	180	180	180	180
시 비	2,582	902	420	420	420	420
기 타	6,146	2,146	1,000	1,000	1,000	1,000

○ 향후 소요액 : 8,000백만원(국비1,600, 도비1,600, 시비1,680, 기타4,000)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 74.6%)

○ 사업대상자 선정 및 확정

○ 보조결정 및 세부 사업추진

□ 향후계획

○ 미진사업 독려, 조기완공으로 하반기 시설을 이용 소득을 도모하도록

사업추진

○ 완공사업에 대한 시설물 점검관리

사업명

시설원예 품질개선사업(파프리카)

담당자

원예허브과 이우재 (☎620-6237)

□ 필요성 및 기대효과

○ 일반원예재배시설의 현대화, 규모화(증․개축)전문화를 지원함으로써 품질향상       및 생산량 증대로 농업 농촌 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기간 : 2013 ~ 2014년(2년)

○ 위치 : 남원시 일원

○ 시공사 : 보조사업자 사업시행

○ 사업규모 : 일반원예시설 3.2ha

- 시설현대화 0.3, 시설현대화 및 증개축 2.9

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,459백만원(국비2,891, 시도비1,301, 시군구비3,037, 기타7,230)

○ 2013년까지 집행액 : 9,659백만원

구 분	합 계	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
합 계	14,459	6,477	3,182	1,600	1,600	1,600
국 비	2,891	1,295	636	320	320	320
도 비	1,301	583	286	144	144	144
시 비	3,037	1,360	669	336	336	336
기 타	7,230	3,239	1,591	800	800	800

○ 향후 소요액 : 4,800백만원(국비960, 도비432, 시비1,008, 기타2,400)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업대상자 선정 및 확정

○ 보조결정 및 세부 사업추진(정산완료)

□ 향후계획

○ 완공사업에 대한 시설물 점검관리

사업명

시설원예 품질개선사업(딸기)

담당자

원예허브과 이우재 (☎620-6237)

□ 필요성 및 기대효과

○ 일반원예재배시설의 현대화, 규모화(증․개축)전문화를 지원함으로써 품질향상       및 생산량 증대로 농업 농촌 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기간 : 2013 ~ 2014년(2년)

○ 위치 : 남원시 일원

○ 시공사 : 보조사업자 사업시행

○ 사업규모 : 일반원예시설 4.5ha

- 시설현대화 1.0, 시설현대화 및 증개축 3.5

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,990백만원(국비2,598, 시도비1,169, 시군구비2,728, 기타6,495)

○ 2013년까지 집행액 : 4,990백만원

구 분	합 계	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
합 계	12,990	4,990	2,000	2,000	2,000	2,000
국 비	2,598	998	400	400	400	400
도 비	1,169	449	180	180	180	180
시 비	2,728	1,048	420	420	420	420
기 타	6,495	2,495	1,000	1,000	1,000	1,000

○ 향후 소요액 : 8,000백만원(국비1,600, 도비720 시비1,680, 기타4,000)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42.56%)

○ 사업대상자 선정 및 확정

○ 보조결정 및 세부 사업추진

□ 향후계획

○ 미진사업 독려, 조기완공으로 하반기 시설을 이용 농가소득을 도모하도록          사업추진

○ 완공사업에 대한 시설물 점검관리

○ 완공사업에 대한 시설물 점검관리

사업명

농식품 6차산업화 사업

담당자

농정과 김맹수(☎620-6393)

□ 필요성 및 기대효과

○ 지역 농업특성을 기반으로 가공-판매-체험이 연계된 “복합자원화 농가

소득모델”을 육성하여 지역 농축산물 안정적 판매로 소득증대 기여

□ 사업개요

○ 기  간 :  2013 ~ 2015(3년)

○ 위  치 :  남원시 운봉읍 준향리 913

○ 시공사 :  금오건설 등

○ 사업규모

- S/W : 6개사업 (주민역량강화, 컨설팅 1식, 웹기반구축 운영1식

홍보마케팅 2식, 브랜드 콘텐츠 1식, 사무국 1식)

- H/W : 4개사업 (농가레스토랑 246㎡, 농산물직판장 592㎡, 체험장 및

축산가공시설 200㎡, 꾸러미사업장 860㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,183백만원(국비 1,500, 시비 890, 기타 793)

○ 2013년까지 집행액 : 502백만원

구 분	합 계	2013년	2014년	2015년	비 고
합 계	3,183	502	2,529	152
국 비	1,500	352	1,072	76
시 비	890	-	814	76
기 타	793	150	643	-

○ 향후 소요액 : 2,681백만원(연도별, 재원별 등)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 꾸러미사업장 400㎡(준공), 꾸러미 저온저장고 460㎡(골조 조립중)

○ 체험장 및 축사가공시설 200㎡(준공), 농가레스토랑 및 직판장(착공)

□ 향후계획

○ S/W분야 : 컨설팅 등 6개사업 추진

○ H/W분야 : 농가레스토랑 및 직판장 착공(12월 개장)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 당초 3,000백만원, 변경 3,183백만원(자부담 증)

11-2. 지방채 발행사업

우리 남원시에서 ′13년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
노암 제3 농공단지 조성사업	28,600	3,500	5,000	2,500	17,600		3,500	74%
상수관망 최적화 시스템 구축사업	18,000	15,000	-	-	3,000	-	2,000	20%

사업명

노암 제3농공단지 조성사업

담당자

도시과 노경록(☎620-6459)

□ 필요성 및 기대효과

○ 기 개발되어 있는 6개 농공단지 77만㎡를 모두 분양하여 수요자의 요구에 맞는        공장용지 공급에 어려움을 겪고 있어 신규 농공단지의 연내 완공이 시급한 실정임.

□ 사업개요

○ 기  간 : 2009~2015

○ 위치 :남원시 노암동 산48번지 일원

○ 시공사 : 남원시 직영 / (유)범한

○ 사업규모 : 농공단지 조성 323,467㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,600백만원 (지방채 3,500, 국비5,000, 도비2,500, 시비17,600)

○ 2013년까지 집행액 : 18,989백만원

○ 향후 소요액 : 9,611백만원

구 분	합 계	기투자	2013년	2014년	2015년	비고
합 계	28,600	11,642	7,347	5,000	4,611
지방채	3,500	-	3,500	-	-
국 비	5,000	4,153	847	-	-
도 비	2,500	1,500	1,000	-	-
시 비	17,600	5,989	2,000	5,000	4,611

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 74%)

○ ‘08.  7.  2. : 타당성 조사(한국농어촌공사 전북지사)

○ ‘10.  5.  6. : 2011년 신규농공단지 대상지 선정(농수산식품부)

○ ‘11.  5. 20. : 노암 제3농공단지계획 승인

○ ‘11. 12. 14. : 노암제3농공단지 조성공사 착공(토목, 조경)

○ ‘13. 6. 20.  : 분양공고 시행(분양금액: 248,000원/3.3㎡)

- 5개 화장품업체 등 MOU 체결(5필지 48,122㎡ / ‘14. 5월말 현재)

○ ‘13. 6. 28. : 화장품단지 3개블럭중 2개블럭 조성완료

○ ‘14. 3. 25 : 지방재정 투·융자 재심산(전북도 / 조건부 승인)

□ 향후계획

○ 토공 정리 및 발파 추진 완료                         : ‘14. 9월

○ 지하매설물(상하수도관, 도시가스관 등) 매설 완료       : ‘14. 12월

※ 예산 상황에 따라 ‘14년 단계(블록)별 공사 완료 계획으로 추진

○ 사업 완료                                           : ‘15. 상반기

사업명

상수관망 최적화시스템 구축공사

담당자

상수도사업소 최재영 (☎620-6874)

□ 필요성 및 기대효과

○ 상수도 운영관리의 현대화 및 정보화 통합운영체계 구축

○ 노후 상수도관 개량으로 유수율 제고 및 깨끗한 수돗물 공급

□ 사업개요

○ 기간 : 2013~2017년

○ 위치 : 남원시 동지역 급수지역

○ 사업규모 : 17개 블록, 135km 노후상수관로 교체

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원 (지방채 15,000, 시비 3,000)

○ 2013년까지 집행액 : 2,750백만원

○ 향후 소요액 : 15,250백만원

구 분	합 계	2013년	2014년	2015년	2015년 이후	비고
합 계	18,000	2,750	2,750	3,500	9,000
시 비	3,000	750	750	500	1,000
지방채	15,000	2,000	2,000	3,000	8,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 남원 3, 4, 5블록 완료 : '13. 12.

○ 남원 6블록, 도시가스 중복구간(월락1블록, 왕정동), 하수관로 중복구간(동충동지구) 추진 : '14. 12월까지

□ 향후계획

○ '14년 공사 완료 : '14. 12.

○ 13개 블록 공사 추진 : '17년까지