11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투자심사 대상사업

우리 남원시에서 ‘14년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투 자 심사연도	현재까지진척률(%)
백두대간 생태교육장 조성사업	32,000	28,614	2,350	1,036	2015	2011	94%
요천 생태습지 조성사업	8,700	5,251	3,449	-	2014	2009	100%
광한루원 주변 관광타운조성	27,254	14,683	12,571	-	2016	2011	60%
춘향골 체육공원 확장	13,200	2,984	2,900	7,316	2020	2011	30%
생활폐기물 가스화시설 R&D 연구사업	16,375	14,175	2,200	-	2015	2011	96%
허브식품 클러스터 육성사업	7,964	6,650	1,304	-	2015	2011	90%
섬진강 소리문화 체험마을 조성	9,000	5,340	1,920	1,740	2015	2012	53%
광치천 도심하천 생태복원사업	18,000	3,536	3,131	11,333	2017	2012	19.6%
대강 농어촌 생활용수 개발사업	7,600	1,140	1,496	4,964	2017	2012	45%
산동 농어촌 생활용수 개발사업	6,000	1,140	2,530	2,330	2017	2012	71%
상수관망 최적화 시스템 구축	18,000	2,750	2,750	12,500	2017	2012	37%
남원 애향장학숙 건립	5,611	4,902	709	-	2014	2013	100%
청소년 수련관 건립	6,000	-	-	6,000	2018	2013	5%
친환경 화장품 클러스터 조성	20,000	5,000	3,150	11,850	2018	2013	30%
씨감자 생산기반 구축사업	4,000	100	2,768	1,132	2015	2013	80%
광한루원 춘향관 이전 건립	6,000	300	2,766	2,934	2016	2013	40%
남원 하수처리장 슬러지 감량화 사업	6,140	692	3,320	2,128	2015	2013	98%
제84회 춘향제	1,548	-	1,548	-	2014	2014	100%

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투 자 심사연도	현재까지진척률(%)
본정통 재현사업	5,100	-	100	5,000	2016	2014	5%
남원 노암 산업단지 조성사업	28,600	18,989	8,500	1,111	2015	2008	93%
허브식품 융복합사업 클러스터	6,600	-	-	6,600	2020	2014	15%
태평지구 마을하수도 설치사업	5,200	-	141	5,059	2017	2014	5%
남원 문화 예술의 거리 조성	4,000	2,000	280	1,720	2016	2012	60%
남원 일반산업단지 조성	66,000	2,000	1,700	62,300	2020	2012	5.6%
안전한 보행환경 조성사업	4,000	2,000	1,554	446	2015	2012	100%
남원 문화도시 조성사업	3,750	-	750	3,000	2018	2013	30%
남원시립 김병종 미술관 건립	3,800	-	-	3,800	2016	2013	10%
김주열 열사 추모 공원화 사업	3,500	1,400	100	2,000	2015	2013	25%
음식물 바이오 가스화 설치	3,785	-	1,057	2,728	2016	2013	28%
시설원예 품질개선사업(오이)	4,292	1,318	2,974	-	2014	2013	100%
신파지구 마을하수도 설치사업	4,009	2,953	1,056	-	2014	2013	100%
원천지구 마을하수도 설치사업	2,500	-	259	2,241	2016	2013	5%
시설원예품질개선사업(파프리카)	2,101	-	2,101	-	2014	2014	100%
시설원예품질개선사업(남원원협 딸기)	3,091	-	1,013	2,078	2015	2014	35%
시설원예품질개선사업(운봉농협 화훼)	2,750	-	2,032	718	2015	2014	74%
교룡대로 개설사업	19,500	-	-	19,500	2020	2014	10.2%

‣ (대상사업) 투융자심사(중앙·도 의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2014년에 추진한 사업

11-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황 (중앙의뢰심사 : 1건)

사업명

남원 백두대간생태교육장 조성사업

담당자

산림과 강정주(☎ 620-6944)

□ 사업목적 및 필요성

□ 백두 대간지역의 자연생태・인문지리・문화의 홍보 및 체험을 위한 교육시설 조성

□ 백두대간 보호에 관한 국민의 인식을 높이는 한편 청소년 수련장으로 활용하기 위한        조성 사업

□ 사업개요

□ 기 간 : 2011년 ~ 2015년(5년)

□ 위 치 : 남원 운봉읍 주촌리 594번지(전시관), 공안리 산 32-1(체험・휴양시설)

□ 규 모 : 백두대간 테마 전시관, 산림휴양․체험학습 공간

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 32,000백만원(국비 16,000, 도비 3,200, 시비 12,800)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	32,000	28,614	2,350	1,036
국 비	16,000	16,000	-	-
시 도 비	3,200	3,200	-	-
시군구비	12,800	9,414	2,350	1,036
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 94%)

【체험・휴양시설】

□ 체험・휴양시설 사업 완료                        : ‘13. 12. 31.

□ 체험・휴양시설 개장                             : ‘14.  7. 15.

□ 체험・휴양시설 보강사업 실시                    : ‘15. 5. 1 ~ 9. 30.

【전   시   관】

□ 전기․통신․소방공사 완료                           : ‘15. 2. 10

□ 조경, 주차장조성, 산책로 황토포장                 : ‘15. 4월 ~ 6월

□ 백두대간 생태교육장 전시관 설치 및 운영관리조례 제정  : ‘15. 6. 19

□ 향후계획

【전  시  관】

□ 추가사업(편의시설, 잔디식재, 성토 등)              : ‘15. 7월

□ 사업완료                                         : ‘15. 7월

□ 전시관 개관                                      : ‘15. 8월 이후

□ 사업변경 내역

당 초	변 경
□ 총사업비 : 400억원(국200 도40 시160) □ 사업규모 : 24.3ha (전시관3.3, 체험휴양시설21) □ 사업기간 : 2010년 ~ 2014년 □ 사업내용 : 전시관, 체험・휴양시설, 오토캠핑장, 인공암벽장 방갈로	□ 총사업비 : 320억원(국160 도32 시128) □ 사업규모 : 24.3ha (전시관3.3, 체험휴양시설21) □ 사업기간 : 2010년 ~ 2015년 □ 사업내용 : 전시관, 체험・휴양시설

개별 투자심사 사업 추진현황 (도심사 : 21건)

사업명

요천생태습지조성사업

담당자

환경과 최은주(☎620-6232)

□ 사업목적 및 필요성

□ 하수처리장 방류수를 이용 수질개선 도모 및 수생태 건강성 회복

□ 생태습지 조성으로 자연과 사람이 함께한 친환경 친수공간 제공

□ 사업개요

□ 기 간 : 2010 ~ 2014년

□ 위 치 : 남원시 주생면 중동리 1275번지 일원

□ 규 모 : 75,502㎡ (단지부(매립장) 75,562㎡ 별도)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 8,700백만원 (국비 6,090 / 시비 2,610)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	8,700	5,251	3,449
국 비	6,090	4,015	2,075
시 도 비
시군구비	2,610	1,236	1,374
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 100%)

□ 기본 및 실시설계 용역 추진	: 2010. 12 ~ 2012. 2

□ 도시계획시설(유수지) 결정 고시	: 2011. 9

□ 실시설계 기술검토 (환경부, 전라북도)	: 2012. 2. 28 / 4. 30

□ 공사(1차분) 추진 (준공 : 2013. 6. 24)	: 2012. 8 ~ 2013. 6

- 토공부지조성, 관로공, 습지내 징검여울․소․하중도 기반 및 호안공 조성

□ 공사(2차분) 추진	: 2013. 6 ~ 2014. 12

- 생태체험원(하중도□소□여울), 관찰□전망데크, 분수대 및 수생관찰시설 설치

- 야구장, 체육마당, 생태탐방로, 태양광가로등, 화장실 및 생태주차장, 편의시설 설치

- 조경식재 (수생식물, 초본류, 잔디(평떼), 교목류, 관목류 등) 등

□ 요천생태습지공원 준공	: 2014. 12. 1

□ 사업변경 내역

□ 해당없음

사업명

광한루원 주변 관광타운 조성

담당자

문화관광과 유종상(☎620-6179)

□ 사업목적 및 필요성

□ 전통문화의 창조적 재생산을 통한 적극적인 관광상품 개발

□ 한(韓)스타일을 테마로 하는 관광타운 조성으로 지속가능한 도시발전 도모

□ 사업개요

□ 기 간 : 2011 ~ 2016년

□ 위 치 : 남원시 광한북로 23일원

□ 규 모 : 전통문화체험단지 11,079㎡, 남원한국의집 6,321㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 27,254백만원(국비 8,535, 도비 4,807, 시비 13,912)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	27,254	14,683	12,571
국 비	8,535	5,700	2,835
시 도 비	4,807	3,496	1,311
시군구비	13,912	5,487	8,425
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

《 전통문화체험단지 》

□ 건축물 철거 (전체 19동 철거 완료)	: ‘12. 12 ~ ‘14. 4

□ 도시계획시설(도로,문화시설)변경 결정 용역  : ‘13. 12 ~ ‘14. 6

□ 공사(건축․토목․조경) 시설공사 착수	: ‘13. 5 ~

□ 남원예촌 연계도로 정비공사 시행           : ‘15. 4 ~ ‘15. 12

《 남원한국의 집 》

□ 토지보상 실시(40필지 중 30필지 완료)	: ‘13. 7 ~

□ 기본 및 실시설계(건축, 도시계획시설변경)	: ‘14. 12 ~ ‘15.  9

□ 향후계획

《 전통문화체험단지 》

□ 공사(건축․토목․조경) 시설공사 완공	: ‘15. 12

□ 사업 발주시행	: ‘15. 10 ~ ‘16. 12

□ 사업변경 내역

□ 해당없음

사업명

춘향골 체육공원 확장

담당자

교육체육과 노치호(☎620-5617)

□ 사업목적 및 필요성

□ 체육시설 집중화로 종합적인 체육의 장을 확보함으로써 시민과 생활 체육

인의 편의도모 및 건강증진에 기여

□ 전국대회를 개최할 수 있는 경기장 확보로 각종 대회 및 전지훈련팀을 유       치하여 지역경제 활성화에 기여 및 스포츠 메카 이미지 제고

□ 사업개요

□ 기 간 : 2009 ~ 2016년(8개년)

□ 위 치 : 춘향골 체육공원 인접부지

□ 규 모 : 부지면적 106,575㎡ (실내테니스장 4면, 실외 테니스장 8면,

축구장 1면, 간이체련시설 및 부대시설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 13,200백만원(국비 1,000, 도비 1,600, 시비 10,600)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	13,200	2,984	2,900		7,316
국 비	1,000	-	1,000		-
시 도 비	1,600	1,600	-		-
시군구비	10,600	1,384	1,900		7,316
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

□ 1차사업 → 춘향골 다목적구장(실내테니스장 4면) 공사완료 : ‘14.12.8

□ 2차사업 → 총 106,575㎡ 중 9,906㎡(9.3%) 매입완료

□ 향후계획

□ 2차사업에 소요되는 잔여부지(96,669㎡) 매입

□ 2차사업(실외 테니스장 8면, 축구장 1면 등) 시행

□ 사업변경 내역

□ 소요예산의 적시 확보에 어려움으로 전체 사업기간 변경계획

(당초 : 2009년 ~ 2016년(8년) → 변경 : 2009년 ~ 2020년(12년))

사업명

생활폐기물 가스화시설 R＆D 연구사업

담당자

환경과 김성철(☎620-6244)

□ 사업목적 및 필요성

□ 생활폐기물 가스화시설을 통한 매립량 감소로 매립장 사용연한 증가

□ 생활폐기물 가스화시설로 발생된 전기 매전으로 시 세외수입 증대

□ 사업개요

□ 기   간 : 2010. 10. 1 ~ 2015. 1. 31

□ 위   치 : 남원시 대산면 대곡리 311번지 일원(대산매립장)

□ 규   모 : 전처리시설 50톤/일, 가스에너지 30톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 16,375백만원 (국비 8,600 / 시비 6,600 / 환경공단 1,175)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	16,375	14,175	2,200
국 비	8,600	6,400	2,200
시 비	6,600	6,600	-
시군구비
지 방 채
민간자본	1,175	1,175	-
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 96%)

□ 1차공사 준공완료

□ 2차공사 지체 및 3차공사 정지중

□ 향후계획

□ 가스화시설 2차공사 시운전 진행

□ 사업변경 내역

□ 3차공사  : 당초 2015. 01. 30 ~ 2015. 04. 30

- 1차중지 : 2015. 05. 27 ~ 06. 30 / 2차중지 : 2015. 05. 27 ~ 07. 24

※ 중지사유 : 2차공사 시운전 지체로 3차공사 중지연장

사업명

허브식품 클러스터 육성사업

담당자

원예허브과 박경열(☎620-6253)

□ 사업목적 및 필요성

□ 허브자원의 브랜드 창출과 기능성식품을 통한 허브산업의 중심지로 발전

□ 허브를 통한 미래 신성장산업의 메카로 부상을 위한 인프라 구축

□ 지리산 허브밸리와 인근 관광자원을 연계한 사계절 체류형 허브종합체험관광 실현

□ 사업개요

□ 기 간 : 2010 ~ 2014 (5개년)

□ 위 치 : 남원시 일원

□ 규 모 : 사업단 운영 외 13식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 7,954백만원(국비 3,647, 도비 2,236, 시비 218, 자담 1,853)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	7,954	6,650	1,304
국 비	3,647	2995	652
시 도 비	2,236	1834	402
시군구비	218	218
지 방 채
민간자본	1,853	1603	250
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

□ 허브식품클러스터 사업단의 경상보조 사업 완료(허브교실, 허브제품개발, 기       능성검증, 홍보마케팅, 장소마케팅, 허브종합체험 등)

□ 허브가공기업 시설현대화 2개소 공사 진행 중

□ 향후계획

□ 허브가공기업 시설현대화 공모사업 진행 : 2015. 7월

□ 허브가공기업 시설현대화 공모사업 완료 : 2015. 12월

□ 사업변경 내역

□ 사업비 변경 (당초 8,390백만원 → 변경 7,954백만원)

- 2013년 사업비 인센티브 수령 및 2014년도 지역농식품클러스터사업 예산 변동

사업명

섬진강 소리문화 체험마을 조성

담당자

문화관광과 채윤호(☎620-6177)

□ 사업목적 및 필요성

□ 교육과 재미가 공존하는 복합공간이자 지역민이 함께하는 문화공간을

조성하여 대중 누구나 쉽게 소리자원을 체험하고 즐길 수 있는 환경조성

으로 섬진강을 중심으로 한 강변 문화공간 조성

□ 사업개요

□ 기 간 : 2011 ~ 2015년

□ 위 치 : 남원시 노암동 320번지 일원

□ 규 모 : 소리명상관, 숙박동4동, 관리동, 생명의노래길(L=510m, B=12m),

소리명상길 조성 (L=370m, B=1.5~2.0m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 9,000백만원(국비 4,500, 시비 4,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	9,000	5,340	1,920	1,740
국 비	4,500	2,670	960	870
시 도 비
시군구비	4,500	2,670	960	870
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 53%)

□ 강변문화관광개발 기본계획 수립 완료                : ‘11.  2. 16

□ 유원지 조성계획 변경(소리마을․도예촌․미술관 등) 고시 : ‘13. 10. 29

□ 사업계획(안) 변경(문체부)                            : ‘13. 12. 10

□ 조달청 시설공사 계약의뢰(원가심사 및 낙찰자 선정)   : ‘14.  3.  6

□ 시설공사 착수(건축+토목+조경+소방)	: ‘14.  5. 12

□ 향후계획

□ 사업시행                                            : 2015. 7 ~ 12

- 본관동 및 전통한옥 숙박동 건축공사

- 생명의 노래길, 소리명상길

□ 사업변경 내역

□ 문체부 사업계획 변경 승인                           : 2014. 12. 10

-  총사업비 변경(95억→90억), 생명의노래길(걷고 싶은 거리조성) 반영

사업명

광치천 생태하천 복원사업

담당자

건설과 박준기(☎620-6543)

□ 사업목적 및 필요성

□ 광치천 상류 신생마을 축사, 농경지 및 생활공간에서 발생·유하되는

지표수 등 각종 비점오염원에 의한 하천 수질개선에 기여

□ 사업개요

□ 기 간 : 2013 ~ 2017(5개년)

□ 위 치 : 남원시 향교동 ~ 용정동

□ 규 모 : 생태하천 정비 L=2.3㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 18,000백만원(국비 10,800, 시비 7,200)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	18,000	3,536	3,131	3,500	7,833
국 비	10,800	2,500	1,500	2,100	4,700
시 도 비
시군구비	7,200	1,036	1,631	1,400	3,133
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 19.6%)

□ 실시설계 및 하천기본계획(변경) 용역 추진  : ‘13. 4.30 ~ ’14.9.30

□ 광치천 생태복원공사 착수                 : ‘14.12.15

□ 신생마을 오염원 철거공사 착수            : ‘14.12.26

□ 향후계획

□ 생태복원공사 추진 및 완공                : 2014.12.15. ~ 2017.12.13.

□ 사업변경 내역

□ 해당없음

사업명

대강 농어촌 생활용수 개발사업

담당자

상수도사업소 김상규

(☎620-6882)

□ 사업목적 및 필요성

□ 수질이 열악한 마을상수도 및 지하수, 계곡수, 개인우물 이용으로 보건위       생이 우려되는 농촌지역에 도시수준의 깨끗하고 풍부한 양질의 수돗물을 공급

□ 사업개요

□ 기 간 :  2013 ~ 2017

□ 위 치 : 남원시 대강면 일원

□ 규 모 : 상수도관 부설 L=58.0km, 배수지 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 7,600백만원(국비 5,320, 시비 2,280)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	7,600	1,140	1,496	2,715	2,249
국 비	5,320	798	1,047	1,900	1,575
시 도 비
시군구비	2,280	342	449	815	674
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

□ 대강배수지계통 상수도공사(3차분) 시행중

□ 향후계획

□ 2017년 말까지 전체공사 완료를 목표로 추진

□ 사업변경 내역

□ 해당없음

사업명

산동 농어촌 생활용수 개발사업

담당자

상수도사업소 김상규

(☎620-6882)

□ 사업목적 및 필요성

□ 마을상수도에 대한 수질검사결과, 해당사업 지구의 방사능물질이 권고치 이상       으로 검출되어 주민들의 불안감이 고조되고 있으며, 주민들의 건강을 위하여       사업시행이 시급함.

□ 사업개요

□ 기 간 :  2015 ~ 2017

□ 위 치 : 남원시 일원(4개지구 6개 마을)

□ 규 모 : 상수도관 부설 L=14.9km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 6,000백만원(국비 4,198, 시비 1,802)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	6,000	1,140	2,530	1,285	1,045
국 비	4,198	798	1,771	900	729
시 도 비
시군구비	1,802	342	759	385	316
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 71%)

□ 산동배수지계통 상수도공사(3차분) 시행중

□ 향후계획

□ 2017년 말까지 전체공사 완료를 목표로 추진

□ 사업변경 내역

□ 해당없음

사업명

상수관망 최적화 시스템 구축

담당자

상수도사업소 최재영

(☎620-6874)

□ 사업목적 및 필요성

□ 노후 상수도관 개량으로 유수율 제고 및 깨끗한 수돗물 공급

□ 사업개요

□ 기 간 :  2013년 ∼ 2017년(5개년)

□ 위 치 : 남원시 동지역 급수구역

□ 규 모

- 블록구축 및 노후관 정비 : 17개 블록

- 통합관리시스템 운영(정보화시스템)

- 노후관 정비 : 135km(20년이상)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 18,000백만원(시비 18,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	18,000	2,750	2,750	1,000	11,500
국 비
시 도 비
시군구비	3,000	750	750	1,000	500
지 방 채	15,000	2,000	2,000	-	11,000
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)

□ 2013년 사업 완료지구 : 남원3･4･5블록 완료

□ 2014년 사업 완료지구 : 남원6블록 완료

□ 향후계획

□ 2015년 사업 시행지구 : 남원7블록

□ 사업변경 내역

□ 노후 상수도시설 개량사업(상수관망) 국비 확보를 위해 2015년 사업비

축소시행으로 재원별 투자 사업비와 사업기간 변경 예정

구 분		당 초		변 경
		‘15연도	‘16연도 이후	‘15연도	‘16연도 이후
총 계		3,500	9,000	1,000	11,500
재원별	지방채	3,000	8,000	-	11,000
	시 비	500	1,000	1,000	500

※ 변경 사업기간 : 2013년 ~ 2020년(8개년)

사업명

남원 애향장학숙 건립

담당자

교육체육과 오영택(☎620-5603)

□ 사업목적 및 필요성

□ 서울로 진학하는 남원출신 대학생들의 경제적 부담 완화 및 면학여건 지원

□ 타 지역과의 경쟁력 강화와 미래 남원을 이끌어갈 인재육성을 위함

□ 사업개요

□ 기 간 : 2013. 4월 ~ 2014. 2월

□ 위 치 : 서울시 성북구 지봉로 23길 13-16(보문동 2가)

□ 규 모

- 수용인원 : 68명(34실 - 2인실 33, 장애인실 1)

- 면    적 : 부지 966.6㎡,  연면적 1,964.5㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 5,611백만원(시비 2,000, 기타 3,611)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,611	4,902	709
국 비
시 도 비
시군구비	2,000	2,000	-
지 방 채
민간자본
기타(기금)	3,611	2,902	709

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

□ 부지매입(면적966.6㎡)                       : 09. 1월/7월

□ 건축허가                                   : 13. 3월

□ 기공/준공                                  : 13. 4월 ~ 14. 2월

□ 장학숙 입·소식                             : 14. 3. 2

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

변경내역	당초	현재	증감액	사유
건축공사	3,200	2,286	∇914	□ 지명경쟁입찰을 통한 공사 단가 인하 계약 □ 재능기부(설계, 소방, 전기 설계 감리 대행)

사업명

청소년 수련관 건립

담당자

여성가족과 박생희(☎620-6217)

□ 사업목적 및 필요성

□ 청소년 문회복지 향상 및 활동 진흥을 위한 기반시설 확충을 통해

청소년 건전육성 기반 마련

□ 사업개요

□ 기 간 : 2015년~2018년

□ 위 치 : 남원시 동충동 197-177(중앙공원 내)

□ 규 모 : 3층 규모(연면적2,506㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 6,000백만원(국비 4,800, 시비 1,200)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	6,000	-	-	870	5,130
국 비	4,800	-	-	700	4,100
시 도 비
시군구비	1,200	-	-	170	1,030
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

□ 건립 예정부지 분할 측량 및 감정 평가 중

□ 향후계획

□ 부지 매입 계약체결 및 보상금 지급            : 2015. 8.

□ 건축설계 공모                                : 2015. 8.~11.

□ 기본 및 실시설계 용역                        : 2015. 11. ~ 2016. 4.

□ 공사 착공                                    : 2016. 5.

□ 사업변경 내역

당 초	변 경
□ 위치 : 남원시 향교동 232-8번지 □ 부지면적 : 3,426㎡ □ 사업기간 : 2013년~2015년	□ 위치 : 남원시 동충동 197-177번지 (중앙공원 내) □ 부지면적 : 7,500㎡ □ 사업기간 : 2015년~2018년

사업명

친환경 화장품 클러스터 조성

담당자

원예허브과 장석재(☎620-6377)

□ 사업목적 및 필요성

□ 남원의 청정 자연환경과 허브산업 등과 연계한 화장품산업을 신성장동력       산업으로 육성하여 취약한 제조업기반의 체질개선과 산업고도화 도모

□ 사업개요

□ 기 간 : 2009 ~ 2018

□ 위 치 : 남원시 노암동 노암산업단지(노암동 산48번지 일원)

□ 규 모 : 72,399㎡(5필지)

(단위 : 억원)

단위사업명	사업기간	사업비	사업내용
화장품 집적화단지 조성	‘09~’13	50 (국 10, 도 20, 시 20)	단지 조성 및 기반시설
화장품 산업기반 구축	‘14~’15	60 (국 20, 도 20, 시 20)	CGMP생산시설 구축
화장품산업 6차 산업화	‘16~’18	90 (국 30, 도 30, 시 30)	글로벌코스메틱컨버전스센터 건립 유통・물류시스템 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 20,000백만원(국비 6,000, 도비 7,000, 시비 7,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	20,000	5,000	3,150	2,950	8,900
국 비	6,000	1,000	1,000	1,000	3,000
시 도 비	7,000	2,000	1,150	700	3,150
시군구비	7,000	2,000	1,000	1,250	2,750
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2단계 30%)

□ 친환경화장품집적화단지 조성 완료(100%)

□ 친환경 화장품 GMP생산시설 구축 중(‘15. 4.20. 착공, 10월 준공 예정)

□ 향후계획

□ 글로벌코스메틱컨버전스센터 건립

□ 유통・뮬류시스템 구축

□ 사업변경 내역

구 분	사업규모	총사업비	사업내용
당초(변경 전)	37,639㎡	200(국40, 도70, 시90)	화장품집적화단지 면적 증가
현재(변경 후)	72,399㎡	200(국60, 도70, 시70)	공동 전시‧체험판매장을 전시판매장이 포함된 글로벌코스메틱컨버전스센터 건립으로 변경

사업명

씨감자 생산기반 구축사업

담당자

현장지원과 김재원(☎620-8051)

□ 사업목적 및 필요성

□ 씨감자 생산·공급 민간 및 지자체 이전에 따른 공급량 감소 및 씨감자 가격

상승으로 경영비 가중

□ 부족한 남원 씨감자 자급화 및 불량 씨감자 공급에 의한 농업인 피해 최소화

□ 씨감자 생산 새 소득원 개발로 농업인 소득증대 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

□ 기 간 : 2013 ~ 2015

□ 위 치 : 남원시 농업기술센터 내, 남원시 고랭지역(운봉읍, 주천면, 인월면, 아영면)

□ 규 모

- 씨감자 생산기반 시설 : 저온큐어링시설(1,020㎡), 조직배양실(280㎡)

- 씨감자 생산시설 : 18ha(노지통망사 및 가을 씨감자 생산시설)

- 씨감자 생산 생력화 장비구입 : 수확기, 선별기 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 4,000백만원(국비 2,000, 시도비 600, 시군구비 1,400)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,000	100	2,768	1,132
국 비	2,000	50	1,384	566
시 도 비	600	15	415	170
시군구비	1,400	35	969	396

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

□ 씨감자 생산기반 시설 완공 : 저온큐어링시설(1,020㎡), 조직배양실(280㎡)

□ 씨감자 생산시설 구축완료 : 15ha(노지통망사 및 가을 씨감자 생산시설)

□ 씨감자 생산 생력화 장비구입 : 지게차, 수확기, 승용관리기, 볏짚절단기, 선별기 등

□ 향후계획

□ 저온큐어링시설 관리실 및 주변정비공사 완공 : 2015.  9.

□ 사업변경 내역

□ 씨감자 생산기반 구축사업 계획변경 : 5회(2013년 1회,  2014년 4회)

- 사업량 및 사업비 조정, 신규사업 추가 등

사업명

광한루원 춘향관 이전 건립공사

담당자

시설사업소 심규성(620-8911)

□ 사업목적 및 필요성

□ 광한루원 공간의 특성과 성격 구분을 위해 관아원림지역에 건립된

춘향관을 선취각 자리로 이전하여 전통공간에 대한 복원 필요

□ 사업개요

□ 기 간 : 2013. 1. ~ 2016. 1.

□ 위 치 : 남원시 요천로 1447(광한루원 내)

□ 규 모 : 총 689.62㎡(전시관 495㎡, 영상관 123.12㎡, 회랑 71.5㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 6,000백만원(국비 1,800, 도비 2,100, 시비 2,100)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	6,000	300	2,766	2,934
국 비	1,800	90	980	730
시 도 비	2,100	105	1,143	852
시군구비	2,100	105	643	1,352
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

□ 춘향관 이전 건립공사 감리용역 착수 : 2014. 8. 11.

□ 춘향관 이전 건립공사 착공          : 2014. 8. 18.

□ 향후계획

□ 춘향 전시관 전시 자료 수집 추진    : 2015. 7. ~

□ 춘향관 이전 건립공사 추진          : ~ 2016. 1.

□ 사업변경 내역

□ 사업기간 : 동절기 공사 중지로 인한 공사기간 변경

- 당초 : 2014. 8. 18. ~ 2015. 10. 11.  →  변경 : 2014. 8. 18. ~ 2016. 1. 12.

사업명

남원하수처리장 슬러지감량화 사업

담당자

환경사업소 이용택(☎620-5807)

□ 사업목적 및 필요성

□ 소화조 설비 개선 및 농축슬러지 효율개선을 통한 슬러지 감량

□ 탈수 슬러지 발생량 감소에 따른 처리비용 절감

□ 소화가스를 이용한 탈화설비 에너지사용으로 대체에너지 활용

□ 사업개요

□ 기 간 : 2013 ~ 2015(3개년)

□ 위 치 : 남원시 주생면 요천로 1036-207 환경사업소 내

□ 규 모 : 소화조 개선 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 :  6,140백만원(국비 4,200, 시비 1,940)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	6,140	692	3,320	2,128
국 비	4,200	500	2,220	1,480
시 도 비
시군구비	1,940	192	1,100	648
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

□ 2차분 공사 준공 : 2015. 01. 30.

□ 3차분 공사 착공 : 2015. 02. 01.

- 소화조 준설, 가스저장탱크·소화조 가온용 보일러 설치 및 시운전

□ 향후계획

□ 시운전 및 공사 최종 준공 : 2015. 10. 02.

□ 사업변경 내역

□ 해당없음

사업명

제84회 춘향제(매년 추진 사업)

담당자

문화관광과 류영목(☎620-5773)

□ 사업목적 및 필요성

□ 84년의 역사를 이어온 춘향문화의 선양, 전통 계승과 함께 문화 관광형

축제 개최를 통한 지역소득 창출, 지역화합과 지역 이미지 홍보마케팅

□ 사업개요

□ 기 간 : 2014. 6. 12. ~ 6. 17

□ 위 치 : 광한루원, 요천 일원

□ 규 모 : 4개 분야 23종목

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 1,548백만원(국비 300, 도비 45, 시비 800, 기타 403)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,928	-	1,548	1,690	1,690
국 비	1,100	-	300	400	400
시 도 비	225	-	45	90	90
시군구비	2,400	-	800	800	800
지 방 채
민간자본
기 타	1,203	-	403	400	400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

□ 행사추진 : 2014. 3 ~ 2014. 6. 17

□ 행사완료(결과보고회 개최) : 2014. 8. 6

□ 향후계획

□ 춘향제전위원회 구성 : 2015. 8

□ 행사 평가 및 토론회 : 2015. 9

□ 사업변경 내역

□ 해당 없음

사업명

본정통 재현사업

담당자

문화관광과 유종상(☎620-6179)

□ 사업목적 및 필요성

□ 광한루원 북문에서 남원읍성 남문터까지 밀집해 있는 일식장옥 및 근대

건축물 등 근대역사자원을 활용하여, 광한루원·남원예촌과 예가람길을

연결축으로 걷기 좋은 도로 개설로 침체되어 있는 구도심권 활성화 및

체류형 관광도시 조성

□ 사업개요

□ 기 간 : 2015 ~ 2016년

□ 위 치 : 남원시 북문 ~ 제일은행 사거리 일원

□ 규 모 : 걷고 싶은 도로 개설(L=230m, B=6~15m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 5,100백만원(국비 2,500, 도비 1,300, 시비 1,300)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,100	-	100	5,000
국 비	2,500			2,500
시 도 비	1,300			1,300
시군구비	1,300	-	100	1,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

□ 전라북도 동부권 발전사업 2단계 사업 반영	: ‘14. 5. 8.

□ 전라북도 지방재정투자 심사(가결-조건부)      : ‘14. 7. 25.

□ 중기지방재정계획 반영                          : ‘14. 11. 14

□ 기본 및 실시설계 용역 발주 및 시행             : ‘14. 11. 6.

- 업체 적격심사 미충족으로(유찰) 재공고 등 ‘15. 4. 2(용역업체 선정)

□ 기본 및 실시설계 용역 추진	: ‘15. 4. ~ ‘15. 8.

- 용역 착수보고회 개최(‘15.6.10)

□ 향후계획

□ 기본 및 실시설계 용역 추진 및 설계서 납품      : ‘15. 4. ~ ‘15. 8.

□ 시설공사 시행(토목+건축)	: ‘15. 9. ~ ‘16. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

남원 노암 산업단지 조성사업

담당자

도시과 노경록(☎620-6459)

□ 사업목적 및 필요성

□ 새로운 공업기반 구축을 통한 기업유치 촉진으로 지역경제 활성화 및

고용기회 창출을 통한 주민소득 증대

□ 사업개요

□ 기    간 : 2011. 12. 14. ～ 2015. 11. 14.

□ 위    치 : 남원시 노암동 산48번지 일원

□ 시 공 사 : (유)범한 대표 안대순

□ 사업규모 : 단지 조성 A=323,467㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 28,600백만원 (국비 5,000 / 도비 2,500 / 시비 21,100)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	28,600	18,989	8,500	1,111
지 방 채	7,000	3,500	3,500	-
국 비	5,000	5,000	-	-
시 도 비	2,500	2,500	-	-
시군구비	14,100	7,989	5,000	1,111
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 93%)

□ 토목공사(5차분) 시행중

□ 화장품 클러스터부지 조성 완료

□ 암 발파 완료 및 매각 토사석 반출 중

□ 향후계획

□ 기반시설공사 마무리                                : ‘15. 7월까지

- 토공 정리, 지하구조물(상하수도관, 통신선로 등)

□ 기타 공사(조경, 전기, 환경) 마무리 및 사업 완료      : ‘15. 8월까지

□ 사업변경 내역

□  사업계획 수정에 따른 총 사업비 변경

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증가
총 계	25,500	28,600	3,100
공사비	16,300	19,138	2,838
용지보상비	7,800	7,910	110
기 타	1,400	1,552	152

사업명

허브식품 융복합사업 클러스터

담당자

원예허브과 박경열(☎620-6253)

□ 사업목적 및 필요성

□ 허브제품의 홍보 마케팅 강화로 유통망 확충을 통한 허브산업의 활성화

□ 1, 2차 허브산업과 연계한 융복합산업화로 허브종합체험관광 실현

□ 사업개요

□ 기 간 : 2015 ~ 2020 (6년간)

□ 위 치 : 남원시 일원

□ 규 모 : 사업단 운영 외 6식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 6,600백만원(국비 3,300, 도비 1,800, 시비 970, 자담 530)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	6,600	-	-	1,600	5,000
국 비	3,300	-	-	800	2,500
시 도 비	1,800	-	-	400	1,400
시군구비	970	-	-	250	720
지 방 채
민간자본	530	-	-	150	380
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

□ 허브식품 융복합 산업화 사업단 경상보조 사업 추진

(허브교실, 홍보마케팅, 허브제품개발 등)

□ 허브경관지구 조경 실시설계 용역 진행

□ 향후계획

□ 허브경관지구 조경 사업 착공 : 2015. 9월

□ 허브체험장 및 사계절 축제장 착공 : 2015. 9월

□ 사업변경 내역

□ 당초 : 6,600백만원(국비 3,300, 도비 1,900, 시비 600, 자담 800)

□ 변경 : 6,600백만원(국비 3,300, 도비 1,800, 시비 970, 자담 530)

- 변경내용 : 민간자본보조 사업(허브가공기업 시설현대화)의 시설비 변경

(허브경관지구 조경 및 체험장 조성)

사업명

태평지구 마을하수도 설치사업

담당자

환경사업소 황재호(☎620-5840)

□ 사업목적 및 필요성

□ 낙후된 농촌지역의 주민주거환경 개선 및 복지향상

□ 오·우수분류화로 수질오염방지와 여름철 집중호우 침수 피해 최소화

□ 사업개요

□ 기 간 : 2014. 03. ~ 2017. 12.

□ 위 치 : 산동면 태평리, 대기리 일원

□ 규 모 : 오수관로 L=8.7km, 하수처리시설 1개소(Q=150㎥/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 5,200백만원(국비 3,640, 시비 1,560)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,200	-	141	858	4,201
국 비	3,640	-		600	3,040
시 도 비
시군구비	1,560	-	141	258	1,161
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

□ 기본 및 실시설계용역 완료 : 2014. 03. ~ 2015. 05월

□ 하수처리공법 선정 완료 : 2015. 01월

□ 설치인가 및 재원협의 완료 : 2015. 06월

□ 향후계획

□ 공사 착수 : 2015. 08월

□ 공사 완료 : 2017. 12월

□ 사업변경 내역

□ 새만금지방환경청 재원협의 결과

(총사업비 5,200백만원 → 5,959백만원 예산 확정)

개별 융자심사 사업 추진현황 (자체심사 : 14건)

사업명

남원 문화 예술의 거리 조성

담당자

문화관광과 고예원(☎620-6158)

□ 사업목적 및 필요성

□ 지역주민의 문화예술 활동과 여가선용에 필요한 문화공간 조성을 통한        문화 활동과 젊은 층의 놀이문화 장소로 기능할 수 있는 공간마련

□ 예술의 혼이 살아 숨 쉬는 예술인 창작마을 조성과 예술가들의 창작 여건       개선으로 문화관광 활성화를 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

□ 기 간 :  2012 ~ 2016년(5년간)

□ 위 치 : 구군청 및 광한루 북문 일원

□ 규 모 : 문화예술 프로그램운영, 예술인 창작공간 조성,  사랑의 테마 조형물 전시사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 4,000백만원(도비 2,000, 시비 2,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,000	2,000	280	250	1,470
국 비
시 도 비	2,000	1,000	140	75	785
시군구비	2,000	1,000	140	175	685
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

□ 문체부 꿈다락 토요문화학교 ‘토요 문화예술 감상교육’ 운영 : ‘15. 3 ~

□ 토요상시 거리공연, 문화예술체험시장 운영(문화예술festival) : ‘15. 4 ~

□ 예가람길 방문자센터 운영 : ‘14. 7 ~

□ 예가람길 지원사업(시설비, 임대료, 간판제작비)

□ 예가람길 작은 미술과 운영 및 창작공간 임대 : ‘14. 8 ~

□ 향후계획

□ 예가람길 청소년 예술단 육성 : ‘15. 7~

□ 생활밀착형 문화프로그램(문화가 있는 날) 운영       : ‘15. 7 ~

□ 거리구성원 텃밭 가꾸기[도시농법] 프로그램 운영     : ‘15. 7 ~

□ 청소년 문화예술 진흥교육사업[날개] 운영            : ‘15. 7 ~

□ 예가람길 상인 방송국 조성 및 육성 프로그램 운영   : ‘15. 7 ~

□ 남원교육지원 연계 교육체험 ‘미션을 찾아라’운영     : ‘15. 10 ~

사업명

남원 일반산업단지 조성사업

담당자

도시과 이현석(☎620-6468)

□ 사업목적 및 필요성

□ 열악한 전북 동부권의 산업기반을 육성하고, 우리 시의 장래를 유도할

수 있는 신성장 동력사업을 유치할 기반 조성 절실

□ 전북 동부권의 중심도시로 산업용지 안정적 공급 및 산업 집적화로

인구 유입 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

□ 기    간 : 2013 ～ 2020년(8년)

□ 위    치 : 사매면 월평리 산37-3번지 일원

□ 사업규모 : 단지 조성 776천㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 66,000백만원(시비 66,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도이후
계	66,000	2,000	1,700	7,000	55,300
국 비
시 도 비
시군구비	66,000	2,000	1,700	7,000	55,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5.6%)

□ 남원 일반산업단지 조성 추진계획 수립	: ‘12.10.24.

□ 개발행위허가 제한지역 지정 고시	: ‘13.01.18.

□ 산업단지계획 승인 신청	: ‘14.03.10.

□ 합동설명회 개최	: ‘14.07.09.

□ 산업단지계획 승인고시(전라북도)	: ‘15.05.01.

□ 보상계획 공고열람/개별 통지	: ‘15.05.22.

□ 감정평가 완료 및 보상액 산정 작업 중	: ‘15.07.~

□ 향후계획

□ 보상액 산정 및 협의 요청	: ‘15.08.~

□ 용지 보상 추진(토지, 지장물)	: ‘15.08.~‘16.12.

□ 공사 추진	: ‘17.~‘20.

□ 사업변경 내역

□ 사업규모 : 1,006천㎡(당초) → 776천㎡(현재) [규모 조정]

□ 사 업 비 : 70,000백만원 → 66,000백만원[규모 조정에 따른 사업비 감액]

사업명

안전한 보행환경 조성사업(공모)

담당자

도시과 김건중 (☎620-6463)

□ 사업목적 및 필요성

□ 교통사고로 인한 보행자의 사고율을 감소시키고, 사고위험요소를

근원적으로 제거하여 편안하고 쾌적한 보행자도로 개설 확충

□ 사업개요

□ 기 간 : 2013 ～ 2015년

□ 위 치 : 남원시 죽항동 동헌길

□ 규 모 : 보행자 연결도로 (남문로) 개설 L=500m, B=2.0m

보행자 전용도로 개설 L=620m, B=6.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 4,000백만원(국비 2,000, 시비 2,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도이후
계	4,000	2,000	1,554	446
국 비	2,000	1,000	1,000	-
시 도 비
시군구비	2,000	1,000	554	446
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

□ 구도심 재생 보행환경개선사업(남문로) 완공 :  2013. 1. 1. ~ 2014. 4. 30.

□ 구도심 재생 보행환경개선사업(동헌길) 완공 :  2014. 1. 1. ~ 2015. 6. 30.

□ 향후계획

□ 추가사업 지구 선정 및 공모 신청

□ 사업변경 내역

□ 해당 없음

사업명

남원문화도시 조성사업

담당자

문화관광과 고예원(☎620-6158)

□ 사업목적 및 필요성

□ 문화예술․문화산업․관광․전통․역사․영상 등 지역별 특색있는 문화자원을 효과       적으로 활용하여 문화 창조력 강화

□ 사업개요

□ 기 간 :  2014 ~ 2018년(5년간)

□ 위 치 : 남원시 관내(유•무형자원 주변)

□ 규 모 : 도시문화 4개 부문(경영, 활성화, 연결, 장소) 프로그램 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 3,750백만원(국비 1,500, 도비 540, 시비 1,710)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,750	-	750	750	2,250
국 비	1,500	-	300	300	900
시 도 비	540			135	405
시군구비	1,710	-	450	315	945
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

□ 문화버스 ‘구석구석’운영          : ‘14. 11 ~

□ 남원 문화비전 2020 연구용역     : ‘14. 11 ~ ’15. 10

□ 지리산 소극장 생활고수 상설공연 : ‘15. 4 ~

□ 문화 기획프로그램 광한루원 상설 국악공연 ‘광한루의 밤풍경’ 지원

□ 도시기억 기록구축사업 ‘남원메모리즈’ 수집 : ‘15. 1 ~

□ 향후계획

□ 2차 문화전문인력 양성프로그램 ‘꾼’프로그램 운영 : ‘15. 7 ~

□ 남원ROO(무대 및 문화공간) 프로젝트 5개소 설치  : ‘15. 7 ~

□ 문화도시 판 페스티벌 ‘문화가 있는 날’에서 2015년 결과물발표

사업명

남원시립 김병종 미술관 건립

담당자

문화관광과 이강철(☎620-6152)

□ 사업목적 및 필요성

□ 지역 주민의 문화예술 향유를 통한 삶의 질 향상과 문화시민으로서 자긍심 고취

□ 문화예술인들에게 창작공간 제공을 통하여 지역문화 예술 진흥

□ 사업개요

□ 기 간 : 2013 ~ 2017

□ 위 치 : 남원시 어현동 273번지 일원(함파우 유원지 내)

□ 규 모 : 부지 7,819㎡, 건물 1,460㎡정도

- 전시실, 수장고, 세니마실, 북카페 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 3,800백만원(국비 1,400, 시비2,400(특별교부세 500포함) )

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,800	-	-	28	3,772
국 비	1,400	-	-		1,400
시 도 비
시군구비	2,400	-	-	28	2,372
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10 %)

□ 미술관 건립 실시설계 용역           : 2013. 03 ~ 2014. 05

□ 남원시와 김병종교수 협약 체결       : 2014. 01. 16

□ 공용건축물 협의 처리(건축허가 완료)  : 2014. 12. 17 ~ 2015. 02.03

□ 미술관 설계변경 용역                : 2015. 06 ~ 09

□ 향후계획

□ 미술관 행정절차 이행      : 2015. 10 ~ 11

□ 건축공사 착공             : 2015. 12

□ 건축공사 준공             : 2016. 12

□ 시립미술관 개관           : 2017. 03

□ 사업변경 내역

□ 총사업비 : 당초 35억원  ⇒ 변경 38억원

□ 규    모 : 건물 1,300㎡ ⇒ 1,460㎡

사업명

김주열 열사 추모공원화 사업

담당자

주민복지과 황지연(☎620-6979)

□ 사업목적 및 필요성

□ 열사의 자유.민주이념을 기리고 후세대의 산 교육장으로 활용

□ 열사의 생가와 묘역을 찾는 추모객 및 관광객에게 편의제공

□ 사업개요

□ 기 간 :  2006 ∼ 2015(10년)

□  위 치 : 남원시 금지면 산 6-1번지

□ 규 모 : 31,760㎡(편익, 휴양, 조경, 도로시설 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 3,500백만원(국비 1,440 , 도비 800, 시비 1,260)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,500	1,400	100	2,000
국 비	1,440	540	100	800
시 도 비	800	200		600
시군구비	1,260	660		600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

□ 생가복원, 주차장, 묘역정비완료(14억)

□ 실시설계 및 원가심사 완료

□ 도시계획 시설사업(공원조성)실시계획 인가신청

□ 향후계획

□ 김주열 열사 추모공원화 사업 발주

□ 미 확보된 예산 총력 : 국비(4.5억), 도비(3억)

□ 사업변경 내역

□ 해당 없음

사업명

음식물 바이오 가스화시설 설치사업

담당자

환경과 김경수 (☎620-6243)

□ 사업목적 및 필요성

□ 음식물쓰레기 공공시설 설치로 안정적인 음식물류 폐기물 처리 및 주민       생활환경 개선

□ 남원 공공하수처리시설 하수슬러지 연계처리로 바이오가스 생산 및 하수       슬러지 열원으로 활용

□ 사업개요

□ 기   간 : 2014 ~ 2016. 12 (3개년)

□ 위   치 : 남원시 주생면 요천로 1036-207 (환경사업소 내)

□ 규   모 : 전처리시설 1식 (음식물처리용량 20톤/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 3,785백만원 (국비 1,116 / 시비 2,669)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,785	-	1,057	1,507	1,221
국 비	1,116	-	500	250	366
시 도 비
시군구비	2,669	-	557	1,257	855
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 28%)

□ 총액발주             : 2014. 05. 23.

□ 공사계약 및 공사착공 : 2014. 05. 30.

□ 공사중지             : 2014. 07. 01.

□ 공사 재착공          : 2015. 06. 19.

□ 건축 증축 및 공작물 변경신고(건축과) : 2015. 07. 10.

□ 향후계획

□ 설계변경계약           : 2015. 07.

□ 감리계약               : 2015. 07.

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
총사업비	2,500백만원	3,785백만원	설계변경: 국비366(증)
사업기간	2014년 ~ 2015년	2014년 ~ 2016년

사업명

시설원예품질개선사업(오이)

담당자

원예허브과 박경수(☎620-6237)

□ 사업목적 및 필요성

□ FTA‧DDA 등 개방화에 대응하여 원예전문생산단지 및 일반원예시설의 시설

증·개축 및 현대화를 지원하여 원예작물의 품질개선 및 안정적인 수출기반 구축

□ 사업개요

□ 기 간 : 2013. 8. 5 ~ 2014. 12. 31

□ 위 치 : 남원시 일원

□ 규 모 : 108,840㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 4,292백만원(국비858, 도비386, 시비902, 융자1,288, 자담858 )

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,292	1,318	2,974
국 비	858	264	594
시 도 비	1,288	395	893
시군구비
지 방 채
민간자본	858	264	594
기 타	1,288	395	893

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

□ 시설하우스 증·개축 사업 완료(이용문 외 12명)

□ 시설하우스 현대화 사업 완료(최성안 외 31명)

□ 향후계획

□ 5년간 사후관리 실시

□ 사업변경 내역

□ 해당 없음

사업명

신파지구 마을하수도 설치사업

담당자

환경사업소 황재호

(☎620-5840)

□ 사업목적 및 필요성

□ 낙후된 농촌지역의 주민주거환경 개선 및 복지향상

□ 오·우수분류화로 수질오염방지와 여름철 집중호우 침수 피해 최소화

□ 사업개요

□ 기 간 : 2012. 03. ~ 2014. 12.

□ 위 치 : 보절면 신파리, 덕과면 신양리 및 만도리 일원

□ 규 모 : 오수관로 L=8.2km, 하수처리시설 1개소(Q=100㎥/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 4,009백만원(국비 2,806, 시비 1,203)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,009	2,953	1,056
국 비	2,806	2,067	739
시 도 비
시군구비	1,203	886	317
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

□ 오수관로 매설 공사 완료 : 2014. 09월

□ 하수처리시설 공사 완료 : 2014. 12월

□ 향후계획

□ 해당 없음

□ 사업변경 내역

□ 해당 없음

사업명

원천지구 마을하수도 설치사업

담당자

환경사업소 황재호

(☎620-5840)

□ 사업목적 및 필요성

□ 낙후된 농촌지역의 주민주거환경 개선 및 복지향상

□ 오·우수분류화로 수질오염방지와 여름철 집중호우 침수 피해 최소화

□ 사업개요

□ 기 간 : 2014. 03. ~ 2016. 12.

□ 위 치 : 산내면 내령리, 장항리, 대정리 일원

□ 규 모 : 오수관로 L=5.0km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 2,500백만원(국비 1,750, 시비 750)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,500	-	259	893	1,348
국 비	1,750	-	45	625	1,080
시 도 비
시군구비	750	-	214	268	268
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

□ 기본 및 실시설계용역 착수 : 2014. 03월

□ 하수도기본계획 부분변경 승인 : 2015. 06월

□ 하수처리공법 선정 완료 : 2015. 07월

□ 향후계획

□ 인가신청 및 재원협의 추진 : 2015. 09월까지

□ 공사 착수 : 2015. 10월까지

□ 공사 완료 : 2017. 12월까지

□ 사업변경 내역

□ 오수관로 : L=5.0km → L=8.15km, 하수처리시설 1개소(250㎥/일)

□ 총사업비 : 2,500백만원(국비 1,750 시비 750) → 5,702백만원(국비 3,991 시비 1,711)

□ 사업기간 : 2013. 03 ~ 2016. 12월 → 2013. 03. ~ 2017. 12월

사업명

시설원예품질개선사업(파프리카)

담당자

원예허브과 박경수(☎620-6237)

□ 사업목적 및 필요성

□ FTA‧DDA 등 개방화에 대응하여 원예전문생산단지 및 일반원예시설의 시설

증·개축 및 현대화를 지원하여 원예작물의 품질개선 및 안정적인 수출기반 구축

□ 사업개요

□ 기 간 : 2014. 10. 16 ~ 2015. 6. 30

□ 위 치 : 남원시 일원

□ 규 모 : 40,120㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 2,101백만원(국비420, 도비189, 시비441, 융자630, 자담421)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,101	-	2,101
국 비	420	-	420
시 도 비	630	-	630
시군구비
지 방 채
민간자본	421	-	421
기 타	630	-	630

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

□ 시설하우스 증·개축 사업 완료 (박상영 외 5명)

□ 시설하우스 현대화 사업 완료 (윤명복 외 29명)

□ 향후계획

□ 5년간 사후관리 실시

□ 사업변경 내역

□ 해당 없음

사업명

시설원예품질개선사업(원협딸기)

담당자

원예허브과 박경수(☎620-6237)

□ 사업목적 및 필요성

□ FTA‧DDA 등 개방화에 대응하여 원예전문생산단지 및 일반원예시설의 시설

증·개축 및 현대화를 지원하여 원예작물의 품질개선 및 안정적인 수출기반 구축

□ 사업개요

□ 기 간 : 2014. 10. 1 ~ 2015. 12. 31.

□ 위 치 : 남원시 일원

□ 규 모 : 31,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 3,091백만원(국비618, 도비278, 시비649, 융자927, 자담619)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,091	-	1,013	2,078
국 비	618	-	203	415
시 도 비	927	-	303	624
시군구비
지 방 채
민간자본	619	-	204	415
기 타	927	-	303	624

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 33%)

□ 1,013백만원 - 2014년도에 사업 완료 (강진호 외 24명)

□ 2,078백만원 - 2015년 명시이월 사업으로 추진 중

□ 향후계획

□ 2015년 말까지 사업완료 목표로 추진 중

□ 사업 완료 후 5년간 사후관리 실시

□ 사업변경 내역

□ 해당 없음

사업명

시설원예품질개선사업(운봉화훼)

담당자

원예허브과 박경수(☎620-6237)

□ 사업목적 및 필요성

□ FTA‧DDA 등 개방화에 대응하여 원예전문생산단지 및 일반원예시설의 시설

증·개축 및 현대화를 지원하여 원예작물의 품질개선 및 안정적인 수출기반 구축

□ 사업개요

□ 기 간 : 2014. 11 . 4 ~ 2015. 12. 31

□ 위 치 : 남원시 일원

□ 규 모 : 35,020㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 2,750백만원(국비550, 도비247, 시비578, 융자825, 자담550)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,750	-	2,032	718
국 비	550	-	407	143
시 도 비	825	-	609	216
시군구비
지 방 채
민간자본	550	-	407	143
기 타	825	-	609	216

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 74%)

□ 2,032백만원 - 2014년도에 사업 완료 (윤순애 외 13명)

□  718백만원 - 2015년 명시이월 사업으로 추진 중

□ 향후계획

□ 2015년 말까지 사업완료 목표로 추진 중

□ 사업 완료 후 5년간 사후관리 실시

□ 사업변경 내역

□ 해당 없음

사업명

교룡대로 개설공사

담당자

도시과 김현호(☎620-6462)

□ 사업목적 및 필요성

□ 교룡대로 L=1.3km 구간은 40~50년 이상된 장기미집행 도시계획 도로로

토지보상과 도로개설 요청 민원이 지속 제기되고 있으며, 우리시 관문이

될 북남원 나들목 진입도로가 2016년 상반기중 개통시 시청등 시가지

동부지역으로 원할한 진입을 위해 교룡대로 조기개설 필요

□ 사업개요

□ 기 간 : 2014 ~ 2020년

□ 위 치 : 향교동 의총로3가 ~ 향교동 신협 ~ 시청로 3가

□ 규 모 : L=1.3km, B=25~35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 :  19,500백만원(시비 19,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	19,500	-	-	2,000	17,500
국 비
시 도 비
시군구비	19,500	-	-	2,000	17,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10.2%)

□ 용지보상 시행중

□ 향후계획

□ 1구간(의총로3가~향교동신협) L=0.8km 우선 사업시행 2018년 개통목표

□ 2구간(향교동신협~시청로3가) L=0.5km 사업시행 및 2020년 전체 사업완료

□ 사업변경 내역

□ 해당 없음

11-2. 지방채 발행사업

우리 남원시에서 ‘14년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	지방채 발행액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
남원 노암 산업단지 조성	28,600	7,000	5,000	2,500	14,100	-	7,000	7,000	93%
상수관망 최적화 시스템 구축	18,000	15,000	-	-	3,000	-	15,000	4,000	37%

☞ 차입선 : 전라북도지역개발기금(발행이율 2.5%)

┌ 노암산업단지 : 2013년 35억원, 2014년 35억원 발행

└ 상수관망 최적화 시스템 구축 : 2013년 20억원, 2014년 20억원 발행

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2014년에 추진한 사업

▸ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

▸ 총사업비 = 지방채 + 국비 + 시도비

11-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

남원 노암 산업단지 조성

담당자

도시과 노경록(☎620-6459)

□ 사업목적 및 필요성

□ 새로운 공업기반 구축을 통한 기업유치 촉진으로 지역경제 활성화 및

고용기회 창출을 통한 주민소득 증대

□ 사업개요

□ 기    간 : 2011. 12. 14. ～ 2015. 11. 14.

□ 위    치 : 남원시 노암동 산48번지 일원

□ 시 공 사 : (유)범한 대표 안대순

□ 사업규모 : 단지 조성 A=323,467㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 28,600백만원 (국비 5,000 / 도비 2,500 / 시비 21,100)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	28,600	18,989	8,500	1,111
지 방 채	7,000	3,500	3,500	-
국 비	5,000	5,000	-	-
시 도 비	2,500	2,500	-	-
시군구비	14,100	7,989	5,000	1,111
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 93%)

□ 토목공사(5차분) 시행중

□ 화장품 클러스터부지 조성 완료

□ 암 발파 완료 및 매각 토사석 반출 중

□ 향후계획

□ 기반시설공사 마무리                                : ‘15. 7월까지

- 토공 정리, 지하구조물(상하수도관, 통신선로 등)

□ 기타 공사(조경, 전기, 환경) 마무리 및 사업 완료      : ‘15. 8월까지

□ 사업변경 내역

□ 사업계획 수정에 따른 총 사업비 변경

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증가
총 계	25,500	28,600	3,100
공사비	16,300	19,138	2,838
용지보상비	7,800	7,910	110
기 타	1,400	1,552	152

사업명

상수관망 최적화 시스템 구축

담당자

상수도사업소 최재영(☎620-6874)

□ 사업목적 및 필요성

□ 노후 상수도관 개량으로 유수율 제고 및 깨끗한 수돗물 공급

□ 사업개요

□ 기 간 : 2013년 ∼ 2017년(5개년)

□ 위 치 : 남원시 동지역 급수구역

□ 규 모 : 블록구축 및 노후관 정비 17개 블록, 통합관리시스템 운영,

노후관 정비 135km(20년이상)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

□ 총사업비 : 18,000백만원 (지방채 15,000 / 시비 3,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	18,000	2,750	2,750	1,000	11,500
지 방 채	15,000	2,000	2,000	-	11,000
국 비
시 도 비
시군구비	3,000	750	750	1,000	500
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)

□ 2013년 사업 완료지구 : 남원 3･4･5블록 완료

□ 2014년 사업 완료지구 : 남원 6블록 완료

□ 향후계획

□ 2016년 사업 시행지구 : 남원7블록

□ 2020년까지 : 12개 블록 완료

□ 사업변경 내역

□ 노후 상수도시설 개량사업(상수관망) 국비 확보를 위해 2015년 사업비

축소시행으로 재원별 투자 사업비와 사업기간 변경 예정

구 분		당 초		변 경
		‘15연도	‘16연도 이후	‘15연도	‘16연도 이후
총 계		3,500	9,000	1,000	11,500
재원별	지방채	3,000	8,000	-	11,000
	시 비	500	1,000	1,000	500

※ 변경 사업기간 : 2013년 ~ 2020년(8개년)

11-3. 민간투자사업

우리 남원시에서 ‘14년에 추진한 민간투자사업 해당사항 없습니다.