9

주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

우리 남원시에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

연번	사업명	총 사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척률(%)
1	광한루원 주변 관광타운조성	27,254	14,683	9,490	3,081	2016	2011	80
2	소리체험관 조성	9,000	7,260	1,740	-	2016	2012	100
3	남원시립 김병종 미술관건립	3,800	-	35	3,765	2017	2013	20
4	고샘지구 추억의거리 조성	9,500	-	-	9,500	2017	2015	10
5	광한루원 대표관광지 육성	5,000	-	385	4,615	2019	2015	20
6	예촌길 조성(2단계)	5,100	-	804	4,296	2016	2015	30
7	김주열 열사 추모공원화 사업	2,950	1,466	108	1,376	2016	2013년	35
8	음식물바이오가스화시설설치사업	4,070	662	488	2,920	2016	2013	30
9	백두대간 생태관관벨트조성	7,300	-	100	7,200	2024	2015	7
10	남원시 청사(의회) 증축	6,354	-	-	6,354	2017	2015	5
11	노암 제3농공단지 조성사업	28,600	27,489	1,111	-	2015	2008	100
12	지리산 구룡계곡 흙탕물 저감사업	5,000	0	0	5,000	2018	2015	5
13	친환경 화장품 클러스터 조성	18,100	8,150	2,950	7,000	2018	2013	61
14	허브식품 융복합사업 클러스터	6,600	0	1,600	5,000	2020	2014	25
15	백두대간 생태문화공원 조성	40,000	32,000	8,000	0	2015	2011	0
16	남원 일반산업단지 조성	66,000	3,700	7,000	55,300	2020	2012	25
17	흑송~장국간 도로 확포장공사	4,200	-	-	4,200	2018	2015	25
18	화물 공영차고지 조성	4,800	1,422	847	2,531	2016	2013	10
19	비행장 대체지 조성	2,500	-	500	2,000	2016	2015	30
20	춘향관 이전 건립 공사	6,000	3,066	2,934	-	2016	2013	100
21	상수관망 최적화 시스템구축	18,000	5,500	1,000	11,500	2020	2012	43

(단위 : 백만원, %)

‣ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에 추진한 사업

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

광한루원 주변 관광타운조성

담당자

문화관광과

이석선(620-6179)

□ 사업목적 및 필요성

○ 광한루원 주변에 전통관광자원을 연계·활용한 관광 타운을 조성하여 구도심

관광산업 활성화와 지속가능한 도시발전

○ 전통문화도시 남원의 유무형 전통문화자원을 기반으로 관광과 산업을 연계

하여 고부가가치의 문화관광 산업 육성

□ 사업개요

○ 위    치 : 전북 남원시 금동․쌍교동 일원

○ 사업기간 : 2011. 1. ~ 2016. 12.

○ 사 업 비 : 27,254백만원(국비 8,535, 도비 4,807, 시비 13,912)

○ 사업규모 : 17,400㎡(1지구 11,079㎡ / 2지구 6,321㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,254백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	27,254	14,683	9,490	3,081
국 비	8,535	5,700	2,103	732
시 도 비	4,807	3,496	979	332
시군구비	13,912	5,487	6,408	2,017
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

《1지구 전통한옥숙박단지》

○ 시설공사 시행                      : 2013. 5. 16. ~ 2016. 5. 13.

- 전통한옥 15동 건축완료(공정률 100%) / 2016. 7. 15. 개관

《2지구 전통문화체험단지》

○ 시설공사 시행                      : 2015. 12. 28. ~ 2016. 12월

- 목공사중(공정률 40%)

□ 향후계획

○ 2지구 시설공사 완료                : 2016. 12월

사업명

소리체험관 조성

담당자

문화관광과

채윤호 (☎620-6177)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교육과 재미가 공존하는 복합공간이자 지역민이 함께하는 문화공간을

조성하여 대중 누구나 쉽게 소리자원을 체험하고 즐길 수 있는 환경조성

으로 섬진강을 중심으로 한 강변문화공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2016년

○ 위 치 : 남원시 노암동 320번지 일원

○ 규 모 : 소리명상관, 숙박동4동, 관리동, 생명의노래길(L=510m, B=12m),

소리명상길 조성 (L=370m, B=1.5~2.0m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원(국비 4,500, 시비 4,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	9,000	7,260	1,740
국 비	4,500	3,630	870
시 도 비
시군구비	4,500	3,630	870
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 강변문화관광개발 기본계획 수립 완료                   : ‘11.  2. 16

○ 유원지 조성계획 변경(소리마을․도예촌․미술관 등) 고시 : ‘13. 10. 29

○ 사업계획(안) 변경(문체부)                               : ‘13. 12. 10

○ 조달청 시설공사 계약의뢰(원가심사 및 낙찰자 선정)     : ‘14.  3.  6

○ 시설공사 착수(건축+토목+조경+소방)	: ‘14.  5. 12

○ 공사준공                                              : ‘16.  2. 28

○ 소리체험관 개관                                       : ‘16.  5. 12

□ 향후계획

○ 소리체험관 운영                                       : ‘16.  5. ~

- 소리체험, 판소리 공연, 한옥 숙박 체험 등

□ 사업변경 내역

○ 문체부 사업계획 변경 승인                             : ‘14. 12. 10

-  총사업비 변경(95억→90억), 생명의노래길(걷고 싶은 거리조성) 반영

사업명

남원시립 김병종 미술관 건립

담당자

문화관광과

황정연(☎620-6837)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 주민의 문화예술 향유를 통한 삶의 질 향상과 문화시민으로서 자긍심 고취

○ 문화예술인들에게 창작공간 제공을 통하여 지역문화 예술 진흥

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2017년(5개년)

○ 위 치 : 남원시 어현동 273번지 일원(함파우 유원지 내)

○ 규 모 : 부지 7,819㎡, 건물 1,442㎡(지상 2층)

- 전시실, 수장고, 세니마실, 북카페 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,800백만원(국비 1,400, 시비 2,400(특별교부세 500포함))

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,800		35	3,765
국 비	1,400			1,400
시 도 비
시군구비	2,400		35	2,365

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20%)

○ 미술관 건립 실시설계 용역            : 2013. 03 ~ 2014. 05

○ 남원시와 김병종교수 협약 체결        : 2014. 01. 16

○ 공용건축물 협의 처리(건축허가 완료)  : 2014. 12. 17 ~ 2015. 02.03

○ 미술관 설계변경 용역                 : 2015. 06 ~ 09

○ 미술관 행정절차 이행                 : 2015. 10 ~ 11

○ 건축공사 착공                        : 2015. 12. 29(재착공 2016. 2. 25)

□ 향후계획

○ 학예사 채용                          : 2016. 08.

○ 미술관 운영에 관한 세부계획 수립 및 조례 제정  : 2016. 11.

○ 건축공사 준공                        : 2017. 02.

○ 시립미술관 개관                      : 2017. 07.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 규    모 : 건물 1,460㎡ ⇒ 1,442㎡

사업명

고샘지구 추억의거리 조성

담당자

문화관광과

채윤호(620-6177)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남원예촌(전통한옥 숙박체험단지)과 전통시장인 공설시장을 연결하는 축으로        대장간, 목공예, 방앗간, 소금집, 점집, 막걸리 등 옛 70 ~ 80년대 추억의         상점들이 위치하고 있는 지역으로 역사적 지역의 자원을 소재로 하여 침체 된       구도심권을 활성화하는 도시재생 문화관광형 거점시설로 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 남원시 광한루 서문 ~ 공설시장

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2017년(2년)

○ 사 업 비 : 9,500백만원(지특4,700, 도비2,500, 시비2,300)

○ 사업규모 : A=28,000㎡

○ 사업내용 : 고샘지구 추억의길, 고샘지구 추억의거리 테마공원, 옛물길 복원

(은하천 조성), 노닐마당조성, 명인ㆍ명창 전수관

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	9,500			5,000	4,500
국 비	4,700			2,500	2,200
시 도 비	2,500			1,200	1,300
시군구비	2,300			1,300	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ 남원 구도심권 관광개발 기본계획 수립	: 2013. 3.

○ 동부권 발전사업(2단계) 추진계획 보고	: 2014.5.14.

○ 2015년도 지방재정투자심사 완료	: 2015.7.20.

- 조건부 추진 : 중기지방재정계획 반영

○ 2016년도 중기지방재정계획 반영(남원시)	: 2015.11.5.

○ 기본 및 실시설계용역 착수	: 2016.3.23.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계용역 시행	: ‘16. 03~10.

○ 고샘지구 추억의거리 조성사업 시행	: 2016.11. ~ 2017.12.

사업명

광한루원 대표관광지 육성

담당자

문화관광과

이유림(☎620-6159)

□ 사업목적 및 필요성

○ 광한루원 일원(주거점)과 함파우 유원지 일원(부거점) 관광개발사업 연계 및 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2019 (5년)

○ 위 치 : 남원시 광한루원(주거점), 남원관광지(부거점)

○ 규 모 : 50억원(도비/매년 10억원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,000		385	1,615	3,000
국 비
시 도 비	5,000		385	1,615	3,000
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20%)

○ 관광 상설공연 및 이벤트(S/W) 시행                      : 연중

○ 광한루원 일원 전통정원 조성사업 공사 준공               : 2016. 5. 30.

○  기본 및 실시설계 용역 시행 및 주민공청회 실시          : 2016. 1. ~

- 남원관광지 관문 설치사업

- 요천로 걷고싶은도로 조성사업

□ 향후계획

○  기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 시행               : 2016. / 2017.

- 남원관광지 관문 설치사업

- 요천로 걷고싶은도로 조성사업

○ 관광 상설공연 및 이벤트(S/W) 시행                      : ~ 2019.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된

상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

예촌길 조성(2단계)

담당자

문화관광과

이석선(620-6179)

□ 사업목적 및 필요성

○ 광한루원과 남원예촌을 연결축으로 걷고 싶은 보행공간을 조성하여

침체되어 있는 구도심권 활성화 유도

□ 사업개요

○ 위    치 : 남원시 광한루원 북문 ~ 제일은행 사거리 일원

○ 사업기간 : 2015 ~ 2016(2년)

○ 사 업 비 : 5,100백만원(국비2,500, 도비1,300, 시비1,300)

○ 사업내용

-  걷고 싶은 거리(일방통행) : 실개천, 조경수목, 조형물, 석재포장 등

-  물레방아 갤러리(전통한옥 381㎡) : 방앗간 재현, 갤러리, 찻집 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,100		804	4,296
국 비	2,500		475	2,025
시 도 비	1,300		166	1,134
시군구비	1,300		163	1,137
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

◦ 시설공사 착수(토목, 건축 등)                   : 2015. 12. 30

□ 향후계획

◦ 시설공사 완료(토목, 건축 등)                   : 2016. 12.

사업명

김주열 열사 추모공원화 사업

담당자

주민복지과

한국희(☎620-6825)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자유민주수호를 위해 불의에 항거한 고 김주열 열사의 민족이념을 지속적으로 계승 발전시키며,

○ 묘역을 찾는 추모객들에게 편의를 제공함은 물론 후손들을 위한 자유․민주․정의의 산 교육장을 마련하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2006 ~ 2016

○ 위 치 : 전북 남원시 금지면 옹정리 산6-1번지 일원

○ 규 모 : 31,760㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,950백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,950	1,466	108	1,376
국 비	990	580	26	384
시 도 비	700	226	17	457
시군구비	1260	660	65	535
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 토공사 및 배수공사 / 35%)

○ 토지․지장물 매입, 생가복원, 묘역정비, 주차장 성토 등 : ‘07 ~ ’11

○ 설계 및 원가심사 완료                           : ‘15. 3. 3.

○ 도시계획시설사업(공원조성)실시계획인가          : ‘15. 10. 30.

○ 김주열 열사 추모공원화 사업 착공                : ‘15. 12. 7.

○ 토사 평탄화 작업, 배수시설 설치 및 연못 조성    : ‘15. 12. 8. ~ ’16. 8.

□ 향후계획

○ 도비 확보에 따른 실시설계                       : ‘16. 7. ~ ’16. 8.

○ 광장, 가․감속차로 설치                          : ‘16. 8. ~ ’16. 10.

○ 녹지조성, 주차장, 산책로 및 기타 시설물 설치     : ‘16. 10. ~ ’16. 12

○ 사업 완공                                       : ’16. 12

□ 사업변경 내역

○ 사업비 변경 : 당초(3,500백만원) ➣ 현재(2,950백만원)

○ 사업기간변경 : 당초(2014~2015) ➣ 현재(2015~2016)

○ 사업내용변경

NO.	구 분	사 업 내 용		비 고
		당초	현재
1	편의시설	·주차장, 화장실 : 광장 기준 좌측 설치	·주차장, 화장실 : 광장 기준 우측 설치
2	편의시설	·가․감속차선 및 진입로 : 주차장 인접 설치	·가․감속차선 및 진입로 : 주차장 위치 변경으로 광장 중앙(현위치) 설치
3	광 장	·점토블럭 시공 및 잔디 식재	·아스콘, 인조화강석 포장
4	주 차 장 녹지조성	·주차장 설치 및 녹지 조성	·연못과 산책로, 녹지조성
5	배수시설	·토사 사면	·개거 설치

사업명

음식물 바이오 가스화시설 설치사업

담당자

환경과

유홍규(☎620-6243)

□ 사업목적 및 필요성

○ 음폐수 해양투기 금지 등으로 처리비 부담 가중 및 민간처리시설 처리에 따른 안정성 결여로 안정화된 공공처리시설 확보 시급

○ 음식물류폐기물 안정적 처리 및 바이오가스를 연계사업인 하수슬러지 감량화사업의 탄화설비 열원으로 사용함으로써 경제성 확보

□ 사업개요

○ 기   간 : 2014 ~ 2016

○ 위   치 : 남원시 주생면 중동리 1249번지 외 1

○ 규   모 : 음식물류폐기물 전처리 20톤/일 /(유한백종합건설 외 2개사)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,070백만원 (국비 1,116 / 시비 2,954)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,070	662	488	2,920
국 비	1,116	381.4	145.2	589.4
시군구비	2,954	280.6	342.8	2330.6

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 29.38%)

○ 시설부지(도유지) 취득 및 실시설계용역실시 완료 : 2014. 6.

○ 공사계약 및 공사책임 감리단 선정              : 2014. 5. 30. ~ 2014. 9.

○ 사업비(국비증액)조정 및 주민반대 시위 공사중지 : 2014. 9. ~ 2015. 11.

○ 공사착공 및 터파기공사, 지하2층기초시설 추진   : 2016. 3. 2. ~ 2016. 7.

□ 향후계획

○ 지하2층 방수공사 및 되메우기, 슬라브 동바리 설치 : 2016. 8. 2. ~ 8. 29.

○ 건축마감, 전기, 기계장비, 계측제어 설비공사       : 2016. 9. ~2016. 12.

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

백두대간 생태관광 벨트 조성

담당자

환경과

최은주 (☎620-6232)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남원 운봉읍 백두대간 일대 우수한 생태자원을 현명하게 이용하여 지속가능하고 차별화된 생태자원 개발로 지역브랜드 가치 향상과 지역경제 도움이 되는 환경, 주민, 관광객이 행복한 매력 넘치는 생태관광지 조성 필요

□ 사업개요

○ 기   간 : 2015 ~ 2024 (10년)

○ 위   치 : 남원시 운봉읍 주촌리 일원

○ 규   모 : 181,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,300		100	800	6,400
국 비	3,600			400	3,200
시 도 비	1,900		100	200	1,600
시군구비	1,800			200	1,600

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 7%)

○ 1시군 1생태관광지 조성계획 발표 (전북도 )  : 2015. 4. 24.

○ 용역과제심의 완료	(시)	: 2015. 5. 28.

○ 지방재정투자 심사 완료 (전라북도)	: 2015. 7. 20.

○ 생태관광지 조성 종합기본계획 용역 추진    : 2015. 8. ~ 2016. 5.

○ 중기지방재정계획 심의 완료 (시)	: 2015. 11. 17.

○ 2016년 사업 용역과제 심의 완료	: 2015. 12. 29

○ 생태관광지 조성 전문가 자문 및 관련부서 협의	: 2016. 2. ~ 3.

○ 2016년 사업 실시설계 용역 추진	: 2016. 3. 7. ~ 5.

□ 향후계획

○ 2016년 사업추진 (에코롯지 조성)             : 2016. 7. ~ 12.

○ 생태관광지 홍보, 콘텐츠발굴, 주민교육 추진  : 2016. 7. ~ 12.

○ 생태관광지 조성사업 연차별 추진            : 2017. ~ 2024.

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

남원시 청사(의회) 증축

담당자

재정과

김영주(☎620-6319)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1992년 현 남원시 청사 건립 이후 건물의 공간 활용이 포화 상태이며 남원시 청사 4층을 남원시 의회에서 사용함에 따라 청사 사무공간이 부족하여 시청사 부지 내 의회청사를 증축하여 부족한 사무실을 확보해 근무환경개선 및 양질의 행정서비스를 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2017년

○ 위 치 : 남원시 시청로 60

○ 규 모 : 증축 연면적 2,352㎡, 지상4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,354백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,354			3,350	3,004
국 비
시 도 비
시군구비	6,354			3,350	3,004
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   5%)

○ 공공건축 사업계획 사전검토 완료 : 2015. 12.  3.

○ 건축설계 제안공모               : 2016.  3. 16. ~ 4. 28.

○ 기본 및 실시설계 용역           : 2016.  5. ~ 10.

□ 향후계획

○ 설계용역 완료                   : 2016. 10.

○ 공사 착공 및 준공               : 2016. 11. ~ 2017. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

노암 제3농공단지 조성사업

담당자

경제과

복성문(☎620-6353)

□ 사업목적 및 필요성

○ 새로운 공업기반 구축을 통한 기업유치 촉진으로 지역경제 활성화 및

고용기회 창출을 통한 주민소득 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009 ~ 2015년(7년)

○ 위 치 : 전라북도 남원시 노암동 산48-5번지 일원

○ 규 모 : 단지조상  A = 325,396.4㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,600백만원 (국비 5,000 / 도비 2,500 / 시비 21,100)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	28,600	27,489	1,111
국 비	5,000	5,000
시 도 비	2,500	5,000
시군구비	21,000	2,500	1,111
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 노암 제3농공단지 조성사업 사업완료

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경(사업비 증감내역)                       (단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증△감
총 계	25,500	28,600	3,100
공사비	16,300	19,138	2,838
용지보상비	7,800	7,910	110
기 타	1,400	1,552	152

▶ 사업계획 수정에 따라 사업비 변경

사업명

지리산 구룡계곡 흙탕물

저감사업(비점오염저감사업)

담당자

농정과

김성빈 (☎063-620-6388)

□ 사업목적 및 필요성

○ 강우시 원천천 상류 경작농지로부터 흙탕물 유입으로 수질악화 및 불쾌감

초래로 생태계 파괴 현상 발생으로 구룡계곡 상류지역에 흙탕물 저감사업을       통하여 비점오염원 관리 및 수질개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 6월 ∼ 2018년 12월

○ 위 치 : 남원시 주천면 덕치리일원

○ 규 모 : 침사시설 34,700톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원(국비 50%, 시비 50%)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,000			166	4,834
국 비	2,500			83	2,417
시 도 비
시군구비	2,500			83	2,417
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 한국환경공단 위수탁 계약 체결 : 2016년 3월 21일

○ 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2016년 6월 20일(용역 진행중)

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2016년 6월 20일 ∼ 2017년 2월 14일

○ 공사추진 : 2017년 3월 ∼ 2018년 12월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

친환경화장품클러스터 조성

담당자

원예허브과

장석재(☎620-6377)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 관광·허브산업과 연계 가능한 신성장 동력사업 발굴·육성

○ 화장품기업 해외시장 진출 지원, 전후방산업 견인, 고품질·고부가가치 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009~2018

○ 위 치 : 남원시 노암산업단지 내 화장품집적화단지(노암동 867-1 일원)

○ 규 모

사업기간	단위사업명	총사업비	사 업 내 용
‘09 ~‘13	화장품 집적화단지 조성	50억 원 (국10, 도20, 시20)	∘단지조성 및 기반시설 (완료) (도로, 상하수도 등)
‘14 ~‘15	화장품 산업 기반 구축	61억 원 (국20, 도18.5, 시22.5)	∘CGMP생산시설 구축 (완료)
‘16 ~‘18	화장품산업 6차 산업화	70억 원 (국40, 도15, 시15)	∘글로벌 코스메틱컨버전스센터 건립 (기업지원․전시체험판매․홍보실 포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	18,100	8,150	2,950	2,000	5,000
국 비	7,000	2,000	1,000	1,000	3,000
시 도 비	5,350	3,150	700	500	1,000
시군구비	5,750	3,000	1,250	500	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 61%)

○ 화장품집적화단지(72,399㎡, 8개 블록) 조성 완료(2015. 12.)_50억 원

○ 친환경 화장품GMP생산시설(연면적 3,006㎡ 지상2층) 구축 완료_61억 원

○ 글로벌코스메틱컨버전스센터 기본 및 실시설계(용역착수 ‘16. 7. 1.)

□ 향후계획

○ 글로벌코스메틱컨버전스센터 건립 착공(‘16. 10월)

○ 시험·연구용 장비 도입 심의(‘16. 11월)

○ 글로벌코스메틱컨버전스센터 건립 준공(‘16. 9월)

○ 장비 도입 완료(‘16. 10월)

사업명

허브식품 융복합사업 클러스터

담당자

원예허브과

박경열 (☎620-6253)

□ 사업목적 및 필요성

○ 허브제품의 홍보 마케팅 강화로 유통망 확충을 통한 허브산업의 활성화

○ 1, 2차 허브산업과 연계한 융복합산업화로 허브종합체험관광 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2020 (6년간)

○ 위 치 : 남원시 일원

○ 규 모 : 사업단 운영 외 6식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,600백만원(국비 3,300, 도비 1,800, 시비 970, 자담 530)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,600		1,600	1,600	5,000
국 비	3,300		800	800	2,500
시 도 비	1,800		400	500	1,400
시군구비	970		250	200	720
지 방 채
민간자본	530		150	100	380
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 허브식품 융복합 산업화 사업단 경상보조 사업 추진

(허브교실, 홍보마케팅, 허브제품개발 등)

○ 허브체험농원 및 축제거점단지 조성사업 추진

○ 허브경관지구 허브체험농원 조경공사 추진

○ 기업 및 농특산물 홍보 판매장, 허브체험장 실시설계용역 추진

□ 향후계획

○ 허브체험농원 및 축제거점단지 조성사업 완공 : 2016. 8월

○ 허브경관지구 허브체험농원 조경공사 완공 : 2016. 11월

○ 기업 및 농특산물 홍보 판매장, 허브체험장 착공 : 2016. 10월

사업명

백두대간 생태문화공원 조성

담당자

산림과

이순권 (☎620-5751)

□ 사업목적 및 필요성

○ 백두대간지역의 문화․역사 ․생태자원의 홍보 및 체험을 위한 관련시설을  조성하여 백두대간보호에 대한 범국민적 인식제고와 국민휴식 공간 및   청소년 생태체험 교육장으로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2015년

○ 위 치 : 남원시 운봉읍 운봉로 151, 공안리 산 32-1번지 일원

○ 규 모 : 24.3ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 40,000백만원(국비 20,000, 도비 4,000, 시비 16,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	40,000	32,000	8,000
국 비	20,000	16,000	4,000
시 도 비	4,000	3,200	800
시군구비	16,000	12,800	3,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

[체험･휴양시설]

○ 사업준공         : ‘13. 12. 30

○ 민간위탁         : ‘14.  7. 15 / 수탁 해지 : ’15.  3. 27

○ 재 개 장         : ‘16.  4. 26

[전 시 관]

○ 전시관 준공      : ′15. 7. 30

○ 전시관 사전 운영 : ′15. 9 ~ ′16. 4. 25

○ 정식 개장        : ′16. 4. 26

□ 향후계획

[세계 희귀동물 특별전]

○ 일  시 : ‘16.  7. 30 ~ ’16.  8. 28

○ 내  용 : 희귀동물 전시 체험,  희귀곤충 전시 체험 등

사업명

남원 일반산업단지 조성사업

담당자

도시과

이현석 (☎620-6468)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지리산권 중추도시로 경제기반 확충을 위해 기존산업과 연계한 전략산업 육성

○ 전북도 배후의 향상된 입지 조건을 갖춘 동부권 최고의 기업맞춤형 일반

산업단지 조성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013 ~ 2020년(8년)

○ 위    치 : 남원시 사매면 월평리 산37-3번지 일원

○ 시 공 사 : -

○ 사업규모 : 단지 조성 776천㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 66,000백만원(시비 66,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
시 비	66,000	3,700	7,000	11,500	43,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 보상단계 / 25.3%)

○ 남원 일반산업단지 조성 추진계획 수립	: ‘12. 10.

○ 지방재정 투·융자사업 심사 및 중기 지방재정 계획 반영  : ‘12. 11.

○ 개발행위허가 제한지역 지정 고시	: ‘13. 01.

○ 산업단지계획 승인 신청                                  : ‘14. 03.

○ 합동설명회 개최                                         : ‘14. 07.

○ 산업단지계획 승인·고시(전북도)                         : ‘15. 05. 01.

○ 전라북도지방건설기술심의위원회 심의 완료              : ‘15. 12. 04.

□ 향후계획

○ 용지 보상 추진(토지, 지장물)                           : ‘16. 07.~

○ 토지 수용 재결 절차 이행                              : ‘16. 08.~12.

○ 사업 발주 준비(일반산단 조성)                          : ‘16. 10.~12.

○ 공사 추진                                              : ‘17.～’20.

사업명

흑송~장국간 도로 확포장공사

담당자

건설과

오진호 (☎620-6532)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서남원IC 개통에 따른 물동량 증가 및 기존 도로를 확포장하여 노암

산업단지의 접근성을 향상하고,

○ 원활한 노선연결로 수송과 공장유치에 기여하며, 주변 지역주민의 통행불편 해소 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 3. 21 ~ 2018. 12. 30

○ 위 치 : 남원시 송동면 장국리 ~ 흑송리

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.76km, B=12.0 ~ 15.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,200			2,500	1,700
국 비
시 도 비
시군구비	4,200			2,500	1,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 지방재정 투자심사 승인 : ‘15. 11. 27

○ 흑송~장국간 도로 확포장 공사 총괄분 시행 : ‘16. 2. 19

○ 흑송~장국간 도로 확포장 공사 1차분 착공 : ‘16. 3. 21

□ 향후계획

○ 1차분 공사 완료 : ‘16. 12. 17

○ 2차분 공사 시행 : ‘17. 2. 1

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

화물공영차고지 조성사업

담당자

교통과

은현귀 (☎620-6565)

□ 사업목적 및 필요성

○ 차고지 조성을 통해 주택가, 도로에 화물자동차 불법 주·정차 및 밤샘주차로

인한 주민 불편 해소 및 교통사고 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년

○ 위 치 : 남원시 주생면 상동리 75번지 일원

○ 규 모 : 24,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,800	1,422	847	2,531
국 비	1,653	560	593	500
시 도 비
시군구비	3,147	862	254	2,031
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 문화재 시굴조사                                 : ‘15.  9.  3.

○ 도시관리계획 수립                               : ‘15. 11. 27.

○ 실시계획 인가                                   : ‘16.  6. 24.

○ 공사착공                                        : ‘16.  6. 30.

□ 향후계획

○ 공사준공                                        : ‘16. 12. 30

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

비행장 대체지 조성사업

담당자

교통과

은현귀 (☎620-6565)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 비행장 폐쇄(비행장대체지 조성)를 통해 서남권 지역발전 교두보 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년

○ 위 치 : 남원시 대산면 수덕리 51번지 일원

○ 규 모 : 49,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,500		500	2,000
국 비
시 도 비
시군구비	2,500		500	2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 비행장 이전협의 승인                             : ‘14.  2. 26.

○ 합의각서체결(남원시장+국방시설본부장)             : ‘14. 12. 26.

○ 기본설계심의(국방부)                              : ‘15.  9.  3.

○ 공사착공                                         : ‘16.  3. 28.

□ 향후계획

○ 공사준공                                         : ‘16.  9.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

춘향관 이전 건립공사

담당자

시설사업소

심규성(☎620-8911)

□ 사업목적 및 필요성

○ 춘향관 신축을 통해 확보된 전시관에 춘향문화와 관련된 자료를 전시하여       춘향문화 선양 및 교육의 장으로 활용

○ 광한루원을 찾는 연간 100만 명 관광객의 체류 시간을 늘려 지역경제

활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 1월 ~ 2016. 4월

○ 위 치 : 남원시 요천로 1147 광한루원 경내

○ 규 모 : 총 689.62㎡(전시관 495㎡, 영상관 123.12㎡, 회랑 71.5㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,000	3,066	2,934
국 비	1,800	1,070	730
시 도 비	2,100	1,248	852
시군구비	2,100	748	1,352
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 춘향관 이전 건립공사 완료 : 2016. 4. 5.

□ 향후계획

○ 춘향관 운영, 유지관리 만전

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

상수관망 최적화 시스템 구축

담당자

상수도사업소

정병욱(☎620-6874)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 상수도관 개량으로 유수율 제고 및 깨끗한 수돗물 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ∼ 2020년(8개년)

○ 위 치 : 남원시 동지역 급수구역

○ 규 모 : 블록구축 및 노후관 정비 17개 블록, 통합관리시스템 운영, 노후관 정비 135km(20년이상)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	18,000	5,500	1,000	1,300	10,200
국 비
시 도 비
시군구비	18,000	1,500	1,000	5,300	10,200
지 방 채		4,000		-4,000
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 43%)

○ 2013년 사업 완료지구 : 남원3･4･5블록 완료

○ 2014년 사업 완료지구 : 남원6블록 완료

□ 향후계획

○ 2016년 사업 시행지구 : 남원7블록

○ 2020년까지 : 12개 블록 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 노후 상수도시설 개량사업(상수관망) 전액 시비로 시행으로 재원별 투자 사업비 변경 예정

구 분		총 계		2013년	2014년	2015년	2016년		‘17년이후
		당초	변경				당초	변경	당초	변경
총 계		18,000	18,000	2,750	2,750	1,000	500	-2,700	11,000	10,200
재원별	지방채	15,000		2,000	2,000			-4,000	11,000
	시 비	3,000	18,000	750	750	1,000	500	1,300		10,200

9-2. 지방채 발행사업

우리 남원시에서 ‘15년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
노암 제3농공단지 조성사업	28,600	7,000	5,000	2,500	14,100		7,000	100%
상수관망 최적화 시스템 구축사업	18,000	15,000			3,000		15,000	43%

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2015년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

9-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

노암 제3농공단지 조성사업

담당자

도시과

노경록(☎620-6459)

□ 사업목적 및 필요성

○ 새로운 공업기반 구축을 통한 기업유치 촉진으로 지역경제 활성화

및 고용기회 창출을 통한 주민소득 증대

○ 인근 농공단지와 농공단지 벨트화를 통한 시너지효과 창출로 서남권

거점도시 육성 필요

□ 사업개요

○ 기   간 : 2009년 ~ 2015년(7년)

○ 위   치 : 남원시 노암동 874번지 일원

○ 규   모 : 325,396.34㎡

○ 유치업종: 식료, 음료, 금속가공, 전자․컴퓨터․통신, 화장품 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	28,600	27,489	1,111
지 방 채	7,000	7,000
국 비	5,000	5,000
시 도 비	2,500	2,500
시군구비	14,100	12,989	1,111
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 지방재정 투융자 심사(전북도 / 적정)	: ‘08.10.28.

○ 2011년 신규농공단지 대상지 선정(농수산식품부)	: ‘10. 5. 6.

○ 노암 제3농공단지계획 승인․고시	: ‘11. 5.20.

○ 토목공사 착공	: ‘11.12.14.

○ 준공인가	: ‘15. 12. 10.

□ 향후계획

○ 지속적인 기업유치 활동 전개

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

상수관망 최적화 시스템 구축

담당자

상수도사업소

정병욱(☎620-6874)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 상수도관 개량으로 유수율 제고 및 깨끗한 수돗물 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ∼ 2020년(8개년)

○ 위 치 : 남원시 동지역 급수구역

○ 규 모 : 블록구축 및 노후관 정비 17개 블록, 통합관리시스템 운영, 노후관 정비 135km(20년이상)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	18,000	5,500	1,000	1,300	10,200
국 비
시 도 비
시군구비	18,000	1,500	1,000	5,300	10,200
지 방 채	0	4,000		-4,000
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 43%)

○ 2013년 사업 완료지구 : 남원3･4･5블록 완료

○ 2014년 사업 완료지구 : 남원6블록 완료

□ 향후계획

○ 2016년 사업 시행지구 : 남원7블록

○ 2020년까지 : 12개 블록 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 노후 상수도시설 개량사업(상수관망) 전액 시비로 시행으로 재원별 투자 사업비 변경 예정

구 분		총 계		2013년	2014년	2015년	2016년		‘17년이후
		당초	변경				당초	변경	당초	변경
총 계		18,000	18,000	2,750	2,750	1,000	500	-2,700	11,000	10,200
재원별	지방채	15,000		2,000	2,000			-4,000	11,000
	시 비	3,000	18,000	750	750	1,000	500	1,300		10,200