109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 남원시에서 ‘16년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위:백만원, %)

연번	사업명	총 사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척률(%)
1	광한루원 주변 관광타운조성	27,254	24,173	3,081		2016	2011	100
2	상수관망 최적화 시스템구축	18,000	8,100	1,996	7,904	2020	2012	46
3	남원시립 김병종 미술관건립	3,800	35	3,765		2017	2013	100
4	김주열 열사 추모공원화 사업	2,950	1,574	1,376		2016	2013	100
5	허브식품융복합 사업클러스터	6,600	1,600	1,600	3,400	2020	2014	25
6	광한루원 대표관광지 육성	5,000	1,000	459	3,541	2019	2015	20
7	예촌길 조성 (2단계)	5,100	804	3,191	1,105	2017	2015	90
8	백두대간생태 관광 벨트조성	7,300	100	800	6,400	2024	2015	17
9	남원시 청사(의회) 증축	7,294		3,350	3,944	2017	2015	20
10	지리산 구룡계곡 흙탕물 저감사업	5,000	166	2,000	2,834	2018	2015	10
11	남원 아트센터 조성	5,124		2,292	2,832	2018	2016	30
12	남원도시재생사업	10,200	200	236	9,764	2020	2016	6
13	중앙공원 조성 사업	12,780			12,780	2026	2016	10
14	노암산업단지 연결도로 개설	2,300		500	1,800	2018	2016	30
15	전북형 농촌관광 거점마을 육성	3,000	362	1,106	1,532	2018	2016	10
16	건지~갈계 농어촌도로 확포장공사	2,500		1,100	1,400	2018	2016	30
17	화정~대율 도로 확포장공사	2,500		1,100	1,400	2018	2016	20

☞ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여          2016년에 추진한사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

광한루원 주변 관광타운 조성

담당자

관광과 채윤호(☎620-6177)

□ 사업목적 및 필요성

○ 광한루원 주변에 전통관광자원을 연계·활용한 관광 타운을 조성하여 구도심 관광산업 활성화와 지속가능한 도시발전

○ 전통문화도시 남원의 유무형 전통문화자원을 기반으로 관광과 산업을 연계하여 고부가가치의 문화관광 산업 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 1. ~ 2016. 12.

○ 위 치 : 남원시 광한루원 북문 일원

○ 규 모 : 17,400㎡(1지구 11,079㎡ / 2지구 6,321㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,254백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	27,254	24,173	3,081
국 비	8,535	7,803	732
시 도 비	4,807	4,475	332
시군구비	13,912	11,895	2,017
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

《1지구 전통한옥숙박단지》

○ 시설공사 시행                      : 2013.5.16. ~ 2016.5.13.

- 2016. 7. 15. 개관

《2지구 전통문화체험단지》

○ 시설공사 시행                      : 2015.12.28. ~ 2016.12.31.

□ 향후계획

《1지구 전통한옥숙박단지》

○ 이랜드파크 위탁 운영

《2지구 전통문화체험단지》

○ 운영계획 수립중

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

상수관망 최적화 시스템 구축

담당자

상수도사업소

정병욱(☎620-6874)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 상수도관 개량으로 유수율 제고 및 깨끗한 수돗물 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ∼ 2020년(8개년)

○ 위 치 : 남원시 동지역 급수구역

○ 규 모 : 블록구축 및 노후관 정비 17개 블록, 통합관리시스템 운영, 노후관 정비 135km(20년이상)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년이후
계	18,000	8,100	1,996	2,200	5,704
국 비
시 도 비
시군구비	18,000	8,100	1,996	2,200	5,704
지 방 채	-
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 46%)

○ 2015년까지 완료 : 4개지구(남원3･4･5･6)

- 노후관 교체 : 68.9km(교체율 51%)

□ 향후계획

○ 2016년 사업 시행지구 : 남원7블록

○ 2020년까지 : 12개 블록 완료

사업명

남원시립 김병종 미술관 건립

담당자

문화관광과

조병남(☎620-6836)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 주민의 문화예술 향유를 통한 삶의 질 향상과 문화시민으로서 자긍심 고취

○ 문화예술인들에게 창작공간 제공을 통하여 지역문화 예술 진흥

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2017년(5개년)

○ 위 치 : 남원시 어현동 273번지 일원(함파우 유원지 내)

○ 규 모 : 부지 7,819㎡, 건물 1,442㎡(지상 2층)

- 전시실, 수장고, 세니마실, 북카페 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,800백만원(국비 1,400, 시비 2,400(특별교부세 500포함))

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,800	35	3,765
국 비	1,400		1,400
시 도 비
시군구비	2,400	35	2,365

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 미술관 건립 실시설계 용역            : 2013. 03 ~ 2014. 05

○ 남원시와 김병종교수 협약 체결        : 2014. 01. 16

○ 공용건축물 협의 처리(건축허가 완료)  : 2014. 12. 17 ~ 2015. 02.03

○ 미술관 설계변경 용역                 : 2015. 06 ~ 09

○ 미술관 행정절차 이행                 : 2015. 10 ~ 11

○ 건축공사 착공                        : 2015. 12. 29(재착공 2016. 2. 25)

○ 건축공사 준공                        : 2017. 06. 21

□ 향후계획

○ 시립미술관 등록                      : 2017. 10.

○ 시립미술관 개관                      : 2017. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

김주열 열사 추모공원화 사업

담당자

주민복지과 오성권 (☎620-6825)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자유민주주의를 위해 불의에 항거한 고 김주열 열사의 민족이념을 지속       적으로 계승 발전시키며

○ 묘역을 찾는 추모객 및 방문객들에게 편의 제공과 자유민주주의 정신을

널리 알리는 교육의 장을 마련하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2006 ~ 2016

○ 위 치 : 전북 남원시 금지면 옹정리 산6-1번지 일원

○ 규 모 : 31,760㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,950백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,950	1,574	1,376
국 비	990	606	384
시 도 비	700	243	457
시군구비	1,260	725	535
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 토지․지장물 매입, 생가복원, 묘역정비, 주차장 성토 등 : ‘07 ~ ’11

○ 설계 및 원가심사 완료                              : ‘15. 3. 3.

○ 도시계획시설사업(공원조성)실시계획인가             : ‘15. 10. 30.

○ 김주열 열사 추모공원화 사업 착공                   : ‘15. 12. 7.

○ 토사 평탄화 작업, 배수시설 설치 및 연못 조성       : ‘15. 12. 8. ~ ’16. 8.

○ 도비 확보에 따른 실시설계                          : ‘16. 7. ~ ’16. 8.

○ 광장, 가․감속차로 설치                             : ‘16. 8. ~ ’16. 10.

○ 녹지조성, 주차장, 산책로 및 기타 시설물 설치        : ‘16. 10. ~ ’16. 12

○ 갓꽃 파종                                          : ’16. 10.

○ 사업 완공                                          : ’16. 12

□ 향후계획

○ 추모공원 지속적인 관리

사업명

허브식품 융복합사업 클러스터

담당자

원예허브과

이미례 (☎620-6253)

□ 사업목적 및 필요성

○ 허브제품의 홍보 마케팅 강화로 유통망 확충을 통한 허브산업의 활성화

○ 1, 2차 허브산업과 연계한 융복합산업화로 허브종합체험관광 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2020 (6년간)

○ 위 치 : 남원시 일원

○ 규 모 : 사업단 운영 외 6식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,600백만원(국비 3,300, 도비 1,800, 시비 1,040, 자담 460)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,600	1,600	1,600	1,000	2,400
국 비	3,300	800	800	500	1200
시 도 비	1,800	500	500	300	500
시군구비	1,040	200	200	200	440
지 방 채
민간자본
기 타	460	100	100		260

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 허브식품 융복합 산업화 사업단 경상보조 사업 추진

(허브교실, 홍보마케팅, 허브제품개발 등)

○ 허브체험농원 및 축제거점단지 조성사업 완공

○ 허브경관지구 허브체험농원 조경공사 완공 : 2017. 9월

□ 향후계획

○ 기업 및 농특산물 홍보 판매장, 허브체험장 착공 : 2017. 9월

사업명

광한루원 대표관광지 육성

담당자

관광과 이유림(☎620-6159)

□ 사업목적 및 필요성

○ 광한루원 일원(주거점)과 함파우 유원지 일원(부거점) 관광개발사업 연계 및 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2019 (5년)

○ 위 치 : 남원시 광한루원(주거점), 남원관광지(부거점)

○ 규 모 : 50억원(도비/매년 10억원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,000	1,000	459	1,000	2,541
국 비
시 도 비	5,000	1,000	459	1,000	2,541
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 대표관광지 선정(광한루원-주거점, 남원관광지-부거점)       : ‘14. 11.

○ 착수/ 중간/ 최종보고회 개최 : 3회

○ 전북도 기본계획 승인심사	: ‘15. 08.

○ 지방재정 투자심사 및 현장심사 완료                       : ‘15. 10.

○ 기본계획 및 실시설계 용역 완료	: ‘15. 12.

○ 요천로 걷고싶은도로 조성사업 기본 및 실시설계 용역 시행   : ’16.1. ~12.

○ 남원관광지 관문 설치 공사시행                           : ‘17. 4. 3.

□ 향후계획

○ 요천로 걷고싶은도로 조성사업 착공	: ‘17. 09.

○ 남원관광지 관문 정비사업 공사 완료	: ‘17. 12.

○ 관광 상설공연 및 이벤트(S/W) 시행                         : ~ ‘19.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

예촌길 조성(2단계)

담당자

관광과 채윤호(☎620-6177)

□ 사업목적 및 필요성

○ 광한루원과 남원예촌을 연결축으로 걷고 싶은 보행공간을 조성하여 침체되어 있는 구도심권 활성화 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2017

○ 위 치 : 남원시 광한루원 북문 ~ 제일은행 사거리 일원

○ 규 모 : 걷고 싶은거리 조성, 물레방아 갤러리 신축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,100백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,100	804	3,191	1,105
국 비	2,500	475	1,619	406
시 도 비	1,300	166	833	301
시군구비	1,300	163	739	398
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○남원 구도심권 관광개발 기본계획 수립	: 2013. 3.

○ 기본 및 실시설계 용역 시행	: 2015.4 . ~ 10.

○ 지방재정 투자 재심사(도심사)	: 2015.8.27.

○ 시설공사 시행(토목, 건축)	: 2015.12.30. ~ 2017.4.25.

□ 향후계획

○ 전기공사 시행	: 2016.10. ~ 2017.10.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

백두대간 생태관광 벨트 조성

담당자

환경과 이길수 (☎620-6232)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남원 운봉읍 백두대간 일대 우수한 생태자원을 현명하게 이용하여 지속가능하고 차별화된 생태자원 개발로 지역브랜드 가치 향상과 지역경제 도움이 되는 환경, 주민, 관광객이 행복한 매력 넘치는 생태관광지 조성 필요

□ 사업개요

○ 기   간 : 2015 ~ 2024 (10년)

○ 위   치 : 남원시 운봉읍 주촌리 일원

○ 규   모 : 181,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,300	100	800	800	5,600
국 비	3,600		400	400	2,800
시 도 비	1,900	100	200	200	1,400
시군구비	1,800		200	200	1,400

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 17%)

○ 1시군 1생태관광지 조성계획 발표 (전북도 )  : 2015. 4. 24.

○ 용역과제심의 완료	(시)                   : 2015. 5. 28.

○ 지방재정투자 심사 완료 (전라북도)          : 2015. 7. 20.

○ 생태관광지 조성 종합기본계획 용역 추진    : 2015. 8. ~ 2016. 5.

○ 중기지방재정계획 심의 완료 (시)            : 2015. 11. 17.

○ 생태관광 에코롯지 조성사업 추진           : 2016. 3. ~ 2017. 5.

○ 생태관광 탐방로 실시설계 용역 추진        : 2017. 1. 23. ~ 3. 23.

○ 생태관광 탐방로 조성공사 발주             : 2017. 5. 18.

□ 향후계획

○ 2017년 사업추진 (생태관광 탐방로 조성)      : 2017. 6. ~ 12.

○ 생태관광지 홍보, 콘텐츠발굴, 주민교육 추진  : 2017. 7. ~ 12.

○ 생태관광지 조성사업 연차별 추진            : 2018. ~ 2024.

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

남원시 청사(의회) 증축

담당자

재정과

김창주(☎620-6319)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1992년 현 남원시 청사 건립 이후 건물의 공간 활용이 포화 상태이며 남원시 청사 4층을 남원시 의회에서 사용함에 따라 청사 사무공간이 부족하여 시청사 부지 내 의회청사를 증축하여 부족한 사무실을 확보해 근무환경개선 및 양질의 행정서비스를 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2017년

○ 위 치 : 남원시 시청로 60

○ 규 모 : 증축 연면적 2,352㎡, 지상4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,294백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,294		3,350	3,944
국 비
시 도 비
시군구비	7,294		3,350	3,944
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   20%)

○ 공공건축 사업계획 사전검토 완료 : 2015. 12.  3.

○ 건축설계 제안공모               : 2016.  3. 16. ~ 4. 28.

○ 기본 및 실시설계 용역           : 2016.  5. ~ 10.

□ 향후계획

○ 설계용역 완료                   : 2016. 10.

○ 공사 착공 및 준공               : 2016. 11. ~ 2017. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

지리산 구룡계곡 흙탕물

저감사업(비점오염저감사업)

담당자

농정과

김성빈 (☎063-620-6387)

□ 사업목적 및 필요성

○ 강우시 원천천 상류 경작농지로부터 흙탕물 유입으로 수질악화 및 불쾌감

초래로 생태계 파괴 현상 발생으로 구룡계곡 상류지역에 흙탕물 저감사업을

통하여 비점오염원 관리 및 수질개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 6월 ∼ 2018년 12월

○ 위 치 : 남원시 주천면 덕치리일원

○ 규 모 : 침사시설 34,700톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원(국비 50%, 시비 50%)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년이후
계	5,000	166	2,000	1,000	1,834
국 비	2,500	83	1,000	500	917
시 도 비
시군구비	2,500	83	1,000	500	917
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 한국환경공단 위수탁 계약 체결 : 2016년 3월 21일

○ 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2016년 6월 20일(용역 진행중)

○ 주민설명회 개최(회덕마을) : 2016년 12월

○ 공기관 대행사업비 지급 : 2017년 3월

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2016년 6월 ∼ 2017년 12월

○ 도시계획시설결정(유수지) 추진 : 2017년 7월 ∼ 2018년 5월

- 토지 및 영농보상 등 병행추진

○ 공사추진 : 2018년 5월 ∼ 2018년 12월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

남원 아트센터 조성

담당자

문화예술과 강탁원  (☎ 620-6156)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역내 문화예술 단체와 시민의 소통공감의 문화 플랫폼 구축

○ 폐산업시설(구 KBS 방송국) 문화재생으로 남원의 랜드마크 조성

□ 사업개요

○ 기 간 :  2016년 ~ 2018년(3개년)

○ 위 치 : 남원시 만인로 92(향교동 500번지 외 5필지)

○ 규 모 : 부지면적 12,614㎡ / 연면적 4,585㎡(지하 1, 지상 3)

○ 내 용 :  폐 산업시설(구 방송국) 리모델링 문화예술 거점공간 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,124백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,124		2,292	2,832
국 비	1,416			1,416
시 도 비
시군구비	3,708		2,292	1,416
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 산업단지 및 폐산업시설 문화재생사업 대상지 선정 : 2016. 4. 26.

○ 사업대상지 구) KBS 남원방송국 매입완료 : 2016. 12. 30.(등기 17.1.11.)

○ 건물 안전점검 실시 완료(B등급 / 사용제한 불필요) : 2017. 3. 3.

○ 사전 운영단체(문화도시사업 추진위) 선정 완료 : 2017. 3. 24. ~ 4. 4.

○ 사전 프로그램 운영 공간 환경정비(석면제거) : 2017. 7월한

□ 향후계획

○ 아트센터 공간구성 확정                  : 2017. 6월 이후

○ 리모델링 실시설계용역 추진              : 2017. 6 ~ 10월

○ 리모델링 공사 추진                      : 2017. 10 ~ 2018. 10월

○ 남원 아트센터 개관                      : 2018. 11월 예정

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

남원 도시재생사업

담당자

도시과 박상현(☎620-6472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사업지역 내 최근 30년간 인구 49%감소, 최근 10년간 사업체수 20%

감소 등 최근 도심쇠퇴가 급격하게 진행

○ 1300년 역사 도시로서 문화예술 자원을 활용한 근린 재생형 도심 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2020(5개년)

○ 위 치 : 남원시 동충동․죽항동․금동 일원

○ 사업내용 : 현장지원센터 운영, 주민 역량강화사업, 정주환경 개선,

가로환경 정비, 유휴공간 활용 사업 등(A=1.12㎢)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	10,200	200	236	870	8,894
국 비	5,000		118	435	4,447
시 도 비	1,000		24	87	889
시군구비	4,200	200	94	348	3,558

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)

○ 도시재생 공모사업 선정(일반 근린재생형)              : 2015. 12. 30.

○ 현장지원센터 운영(사업총괄코디, 사무국장, 사무원 2)   : 2016. 9. 1. ~

○ 도시재생 1차 관문심사 승인(국토부)                   : 2016. 9. 19.

○ 도시재생 전략계획 승인(전북도) 및 공고               : 2016. 12. 2.

○ 도시재생 2차 관문심사 승인(국토부)                   : 2017. 4. 7.

□ 향후계획

○ 도시재생 특별위원회 심의(국무총리)                   : 2017. 9.

○ 도시재생 활성화계획(안) 승인(전북도)                  : 2017. 11.

○ 단위사업 실시설계 및 사업시행                        : 2017. 12. ~

사업명

중앙공원 조성사업

담당자

도시과 서상훈(☎620-6476)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2004년 남원역사 이전으로 슬럼화 되어가는 구 역사부지에 대하여 시민들의       삶의 질 향상을 위하여 녹지 휴식공간을 제공

○ 공원 조성을 통하여 광한루원, 도시재생 활성화 사업과 연계하여 문화공간       축을 형성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2026년 (10년)

○ 위 치 : 남원시 동충동 197-1 번지 일원

○ 규 모 : 51,300㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,780백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	12,780			9,780	3,000
국 비
시 도 비
시군구비	12,780			9,780	3,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 한국철도공사 소유부지 매입 : 2017. 6. 5.

- 5필지 38,652㎡ / 97.8억원

□ 향후계획

○ 문화재 시굴조사 등 용역시행 : ‘18년 ~

○ 중앙공원 조성사업 기본계획 및 실시설계용역 추진 : ‘18년 ~

사업명

노암 산업단지 연결도로 개설

담당자

도시과 박상현(☎620-6472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서남원I.C ~ 노암 산업단지 간 원활한 노선 연결로 교통 접근성 제고

및 공장유치에 기여함으로써, 지역 경제 활성화를 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2018(3개년)

○ 위 치 : 남원시 송동면 장국리 일원(도시계획구간)

○ 사업내용 : 도로 확포장 L=700m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,300		500	514	1,286
국 비	257			257	-
시 도 비	500		500	-	-
시군구비	1,543			257	1,286

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 실시설계용역 추진[(유)우성기술공사]               : 2016. 11. ~ 2017. 5.

○ 편입토지 분할 측량                                : 2017. 3.

○ 보상계획 공고                                      : 2017. 3. 24.

○ 공사 착공                                         : 2017. 6. 26.

□ 향후계획

○ 편입토지 용지보상 협의                             : 2017. 6. ~ 12.

○ 공사 추진                                        : 2017. 6. ~ 2018. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 및 재원 변경

(단위 : 백만원)

재 원 별	당 초	변 경	증 감
총사업비	2,300	2,700	증 400
국 비	257	257	-
도 비	500	900	증 400
시 비	1,543	1,543	-

사업명

전북형 농촌관광 거점마을 육성

담당자

농정과 양미영(☎620-6397)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌관광 활성화 기반이 집적화 된 마을을 거점주체로 육성하여 농촌의 차별화된 이미지 창출 및 ‘사람 찾는 농촌 조성’에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2018년(4년간)

○ 위 치 : 남원시 운봉읍 화수리 전촌(동편제)마을 일원

○ 규 모 : 농촌관광 거점센터 조성, 주민역량강화, 마을콘텐츠개발

- 거점센터 1식,  야외공연장 1식, 농촌체험관 1식

- 주민역량강화(체험지도사양성, 실무자격증, 서비스교육, 특성화교육 등)

- 마을콘텐츠 개발(향토음식, 체험프로그램, 마을통합이미지 개발 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000	362	1,106	955.6	576.4
도지특비	1,500	181	553	477.8	288.2
시 비	1,500	181	553	477.8	288.2

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본계획수립 완료 : ’16. 7월

○ 기본 및 실시설계 추진 중 : ’17. 2 ~ 7월 완료 예정

○ 소프트웨어 사업 : 주민역량강화 및 마을콘텐츠개발 연중추진

- 주민역량강화 : 동기화 및 공동체교육, 체험지도사양성교육 3명, 마을특성화교육 1식(마을굿 기초풍물교육, 발표회공연), 선진지 견학 완료

- 마을콘텐츠개발 : 향토음식·체험프로그램·마을통합이미지·마을스토리텔렝콘텐츠 개발 완료, 마을홍보활동[동편제 국악거리 축제(’17.6.16~18) 연계 추진, 마을홍보물 및 기념품 및 패키지개발 추진 중

□ 향후계획

○ 실시설계 완료 후 거점센터 발주 및 착공 : ’17. 8월

○ 소프트웨어(주민역량강화 및 마을콘텐츠개발) 계속 추진

사업명

건지~갈계 농어촌도로 확포장공사

담당자

건설과

최은주 (☎620-6532)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선형이 불량하고 노폭이 협소하여 교통사고의 위험을 초래함에 따라 기존도로를 2차선으로 확장하여 원활한 교통소통과 주변지역의 생활환경 개선 및 안전사고 예방, 지역간의 균형발전 촉진 등 주민편익 도모

○ 농촌지역 주민의 교통편익과 농수산물의 생산, 유통을 향상시켜 농촌지역의 생활환경 개선과 경제 활성화를 도모 및 도로망 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 12. ~ 2018. 11. 30.

○ 위 치 : 남원시 인월면 건지리 ~ 아영면 갈계리

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.4km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,500		1,100	700	700
국 비
시 도 비
시군구비	2,500		1,100	700	700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 지방재정 투자심사 승인 : ‘16. 5. 9.

○ 건지~갈계 농어촌도로 확포장 공사 1차분 착공 : ‘16.12.27. ~ ‘17.12.09.

□ 향후계획

○ 전체분 공사 완료 : ‘18. 11. 30.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

화정~대율 도로 확포장공사

담당자

건설과

최은주 (☎620-6532)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선형이 불량하고 노폭이 협소하여 교통사고의 위험을 초래함에 따라 기존도로를 2차선으로 확장하여 원활한 교통소통과 주변지역의 생활환경 개선 및 안전사고 예방, 지역간의 균형발전 촉진 등 주민편익 도모

○ 농촌지역 주민의 교통편익과 농수산물의 생산, 유통을 향상시켜 농촌지역의 생활환경 개선과 경제 활성화를 도모 및 도로망 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 12. ~ 2018. 11. 30.

○ 위 치 : 남원시 사매면 화정리 ~ 대율리

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.3km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,500		1,100	700	700
국 비
시 도 비
시군구비	2,500		1,100	700	700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 지방재정 투자심사 승인 : ‘16. 5. 9.

○ 화정~대율 도로 확포장 공사 1차분 착공 : ‘16.12.28. ~ ‘17.12.09.

□ 향후계획

○ 전체분 공사 완료 : ‘18. 11. 30.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 남원시에서 ‘16년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 해당없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 남원시에서 ‘16년에 추진한 민간투자사업 현황은 해당없습니다.