109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 남원시에서 ‘18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

연번	사업명	총사 업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사 연도	현재까지진척률 (%)
			기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후
계	21건	128,189	2,450	15,468	32,013	78,258
1	남원전통가 조성사업	8,000	1,400	-	6,600	-	2019	2018	12
2	옛다솜이야기원 조성	17,366	-	2,080	3,000	12,286	2022	2018	15
3	남원 실내수영장 신축사업	8,800	300	200	500	7,800	2021	2018	설계용역 15%
4	전국 태권도 대회	95	-	95	-	-	2018	2018	100%
5	춘향골 롤러 트랙경기장 개보수사업	3,000	-	-	3,000	-	2020	2018	설계용역 25%
6	남원 육아종합지원센터 건립	4,500	-	-	520	3,980	2022	2018	-
7	천연 화장품원료 생산시설 구축	6,250	250	2,000	4,000	-	2019	2018	65
8	제22회 전국 옻칠 목공예 대전	170	-	8	162	-	2019	2018	90
9	지리산허브밸리 전망대 및 짚라인 설치	5,000	-	-	1,512	3,488	2020	2018	10
10	가축분뇨공동자동화시설사업	9,108	-	-	4,554	4,554	2020	2018	-
11	금암길 중로 개설공사	9,000	-	300	500	8,200	2021	2018	5
12	만인로 도로 개설공사	5,800	-	200	500	5,100	2021	2018	10
13	호치길 도로 정비공사	3,500	-	1,100	1,000	1,400	2021	2018	29
14	시청로 정비공사	2,500	-	35	2,465	-	2020	2018	5
15	금암공원 조성	16,400	-	1,300	2,000	13,100	2025	2018	50
16	견두선 농어촌도로 확포장공사	6,000	-	250	300	5,450	2023	2018	5
17	요천 내 수경시설(분수) 설치사업(재심사)	9,300	-	3,500	-	5,800	2020	2019	10
18	도산~서매 도로 확포장공사	3,000	-	-	200	2,800	2022	2018	5
19	고죽교차로~갈치교차로 확포장	2,600	500	600	1,000	500	2020	2018	25
20	배촌선 농어촌 도로 확포장공사	4,000	-	-	200	3,800	2021	2018	10
21	공영주차장 조성	3,800	-	3,800	-	-	2020	2018	20

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

남원전통가 조성사업

담당자

관광과 채윤호(☎620-6177)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기 조성한 예촌 1~4지구와 신규 5지구(전통가 조성사업)의 효과성 제고를

위한 연계시설 및 프로그램 개발 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019

○ 위 치 : 남원시 광한루원 동문 일원

○ 규 모 : 거리예술장터 조성, 돌담길 로맨틱벤치 조성,

광한루원 자동출입 시스템 구축, 포토존 조형물 설치

광한루원(요천변) 야간 경관 조성, 여행트레일 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,000		1,400	6,600
국 비	3,300			3,300
시 도 비	1,350			1,350
시군구비	3,350		1,400	1,950
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

○ 지방재정 투자심사(전라북도-조건부)                 : `18.  6.

○ 기본 및 실시설계용역 추진                         : `18. 10. ~ ‘19. 6

○ 사업 착공                                         : `18.  7. 24.

□ 향후계획

○ 사업 시행 및 완료                                 : ‘19. 8 ~ ’20. 7.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

옛다솜이야기원 조성

담당자

관광과 양진호(☎620-6186)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남원 시내권역 관광자원 및 개발 중인 모든 자원(광한루, 남원예촌, 춘향테마파크, 남원관광지, 김병종 미술관, 섬진강 소리문화체험마을, 도예촌 등)을 포괄할 수 있는 거점 관광지를 조성하는 사업으로 침체되어가는 관광도시의 이미지 제고 및 관광활성화를 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2022년 (5년간)

○ 위 치 : 남원시 함파우유원지 일원(100,000㎡)

○ 규 모 : 옛다솜 이야기원 정원, 사랑체험관, 춘향테마파크 리모델링

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,366백만원(국 8,058 시 9,308)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	17,366	-	2,080	3,000	12,286
국 비	8,058	-	415	1,500	6,143
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,308	-	1,665	1,500	6,143
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 사업시행단계, 15%)

○ 옛다솜 이야기원 실시설계 완료                    : ‘18. 7. ~ ‘19.  6.

○ 옛다솜 이야기원 기반시설 조성공사 시행           : ‘19. 7. ~ ‘21. 12.

□ 향후계획

○ 옛다솜 이야기원 조성공사 시행                    : ‘19. 9. ~ ‘21. 12.

○ 사랑체험관 건립공사 시행                         : ‘19.12. ~ ‘22. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

남원 실내수영장 신축사업

담당자

교육체육과 황진연(☎620-5615)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현재 남원에 운영 중인 수영장은 일반회원, 학생 생존수영수업, 노인 맞춤형 수업, 수영대회 등으로 사용되고 있으나, 시설 사용자 대비 규모가 작아 포화상태로 추가적인 수영장 신설이 시급한 상태이고, 100세 시대에 건강한 삶에 대한 관심 증가로 인한 생활체육 수요 대응 및 접근성 개선을 위해 생활밀착형 체육시설을 확대하여 시민 체육복지를 실현하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 01. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 남원시 월락동 248일원

○ 규 모 : 생활밀착형 국민체육센터(수영장) 건립 (지하1층~지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,800	300	200	500	7,800
국 비	3,000		200		2,800
시 도 비
시군구비	5,800	300		500	5,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 건축설계 용역 15%)

○ 공모사업 심사 및 선정(문체부)	: 2018.09.~10.

○ 공공건축 사업계획 사전검토	: 2019.02.07.~03.15.

○ 건축설계 제안공모 심사위원회 구성	: 2019.03.18.

○ 건축설계 제안공모 추진 및 업체 선정	: 2019.04.~05.09.

○ 기본 및 실시설계 용역                     : 2019.05.29.~12.24.

□ 향후계획

○ 공사 계약심사 및 입찰                       : 2020.01.~02.

○ 공사착공 및 준공                           : 2020.03.~2021.09.

○ 시운전 및 수영장 개관                      : 2021.10.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

전국 태권도 대회

담당자

교육체육과 이영규(☎620-5612)

□ 사업목적 및 필요성

○ 태권도종목 활성화 및 전국 규모 대회 유치를 통한 지역경제 활력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 08. 31 ~ 09. 03

○ 위 치 : 춘향골체육관

○ 규 모 : 110팀 4,230명(선수 2,930명, 임원 500명, 기타 800명)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 95백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	95		95
국 비
시 도 비	15		15
시군구비	80		80
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업 완료

□ 향후계획

○ 태권도종목 전국 규모 대회로서 지역경제 파급효과가 큰 대회 유치

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

춘향골 롤러트랙경기장 개보수사업

담당자

교육체육과 황진연(☎620-5615)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매년 국제롤러 경기대회가 개최되는 춘향골 롤러 트랙경기장이 야외시설로 우천 시 경기가 중단되어 선수 및 관중들이 불편을 겪고 있으며, 동절기 결빙 손상 등으로 매년 트랙 바닥을 보수하고 있어, 경기장 및 관중석 비가림막을 설치하여 `국제대회 면모를 갖추고, 20년도 전북 도민체전 및 국제대회의 성공적인 개최를 하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 04. ~ 2020. 03.

○ 위 치 : 남원시 월락동 248 일원

○ 규 모 : 관람석 증축 및 롤러트랙경기장 비가림시설 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,000			3,000
국 비	900			900
시 도 비
시군구비	2,100			2,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 건축설계 용역 25%)

○ 공모사업 심사 및 선정(문체부)	: 2019.02.~04.

○ 기본 및 실시설계 용역                      : 2019.05.22.~09.18.

□ 향후계획

○ 공사 계약심사 및 입찰                       : 2019.09.

○ 공사착공 및 준공                           : 2019.10.~2020.03.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

남원 육아종합지원센터 건립

담당자

여성가족과 하형호(☎620-6217)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도농복합도시의 특성(인구감소, 지리적 여건)을 반영한 출산·육아·

돌봄 등 통합적 서비스 제공을 위한 육아종합지원센터를 건립하여

시민 욕구에 부응하는 질 높은 보육환경 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2022년

○ 위 치 : 남원시 충정로 72

○ 규 모 : 연면적 2,000㎡ (지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,500	-	-	520	3,980
국 비	400	-	-	400	-
시 도 비	120	-	-	120	-
시군구비	3,980	-	-	-	3,980
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 건립 기본계획 수립                           : 2018. 9

○ 건립부지 재검토                              : 2019. 1 ~ 10

□ 향후계획

○ 건축설계공모                                 : 2020. 3

○ 기본 및 실시설계 용역                        : 2020. 7 ~ 11

○ 공사착공                                     : 2020. 12

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

천연 화장품원료 생산시설 구축

담당자

일자리경제과 장석재(☎620-6352)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남원 화장품산업 경쟁력 제고

- 화장품 원료소재 연구·개발 및 활용을 위한 기업지원 인프라 구축

- 천연 화장품원료산업의 정책적 지원을 통한 생산기반 확보

○ 친환경 화장품클러스터 조성사업 추진

- CGMP생산시설 구축(2015) □ 글로벌코스메틱컨버전스센터(2017) □ 화장품원료생산시설 구축(2019)

□ 사업개요

○ 기   간 : 2018 ~ 2019(2년간)

○ 위   치 : 전북 남원시 노암동 867-1 (노암산업단지 내)

○ 규   모 : 대지 3,416㎡, 건축면적/연면적 1,608㎡

○ 내   용 : 원료제조생산 플랫폼(원료제조생산설비·유틸리티), 원료표준화장비 구축

- 본동(1,317㎡ 지상1층 철골조), 지원동(291㎡ 지상1층 철골조)

- 전처리실, 원료제조실, 품질관리실, 재형실험실, 저장고 등

○ 사업주체 : 남원시(화장품산업지원센터)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,250	250	2,000	4,000
국 비	2,700		1,000	1,700
시 도 비	1,500		500	1,000
시군구비	2,050	250	500	1,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 [추진단계 및 진도 : 건축공사(공정률 85%)]

○ 기본 및 실시설계용역 완료                              : 2018. 11.

○ 제조설비시스템 조달입찰 의뢰                           : 2018. 12.

○ 시설공사 발주(입찰공고) 및 건축허가·착공                : 2019. 02.

○ 제조설비시스템 제안평가 및 물품계약 체결               : 2019. 04.

□ 향후계획

○ 시공 및 설비인입                                       : 2019. 08.

○ 준공                                                   : 2019. 10.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

제22회 남원시 전국 옻칠 목공예대전

담당자

일자리경제과 정보우(☎620-6367)

□ 사업목적 및 필요성

○ 옻칠목공예 문화보급과 전통계승을 위해 우수 옻칠 목공예품 및 제작자를 발굴하여 성장발판의 기회를 제공하고, 가치보상을 통해 지속적인 작업동기를 부여하여 옻칠 목공예산업의 지속적 발전을 도모

□ 사업개요

○ 기   간 : 2018. 7. ~ 2019. 8.

○ 내   용 : 우수 옻칠 목공예품 선정·시상 및 수상자 후속지원

- 공모분야 : 2개 부문 (옻칠목공예, 갈이)

- 시상내역 : 총 42점(옻칠목공예 28, 갈이 14)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  170백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	170		8	162
국 비	70			70
시 도 비
시군구비	100		8	92
지 방 채
민간자본
기 타

※ 국비 70백만원 : 주관단체 직접지원 및 시상금 집행

□ 추진상황 [추진단계 : 수상작 순회전시(80%)]

○ 작품접수 : 2019. 2. 26. ~ 3. 1.

○ 작품심사 : 2019. 3. 6. ~ 3. 7.

○ 시 상 식 : 2019. 3. 22.

○ 수상자 후속지원 : 2019. 6. ~ 8.

○ 수상작 순회전시 : 2019. 3. 26. ~ 8. 23. (서울 □ 완주 □ 남원 □ 전주)

□ 향후계획

○ 수상작 전시회(전북도청 기획전시실)           : 2019. 8. 19. ~ 8. 23.

○ 제22회 남원시 전국 옻칠 목공예대전 추진결과 보고  : 2019. 8월 내

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

지리산허브밸리 전망대 및 짚라인 설치사업

담당자

원예산업과 정병욱(☎ 620-6525)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지리산 허브밸리에 상징적이며 철쭉군락지 및 전체경관을 내려다 볼 수

있는 조망시설 건립, 정적인 볼거리와 더블어 방문객에게 동적인 즐거움      의 공간을 제공하여 다양한 연령층의 방문객 유치도모

□ 사업개요

○ 기   간 : 2019 ~ 2020(2개년)

○ 위   치 : 남원시 운봉읍 바래봉길 211(허브밸리 지내)

○ 규   모 : 전망대 설치 1개소, 관광시설(짚라인 포함), 부대공

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,000	-	-	1,512	3,488
국 비	2,500	-	-	756	1,744
시 도 비
시군구비	2,500	-	-	756	1,744
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 지방재정 투자심사                     : 2018. 7. 3.

○ 용역과제 심의                         : 2018. 11. 9.

○ 중기지방재정계획 수립                 : 2018. 11. 12.

○ 실시설계 및 특구변경용역 계약         : 2019. 3. 8.(개찰 2. 19)

○ 벤치마킹 실시(2회)                     : 2019. 5.15~16, 5.22~23

○ 중간보고회 개최                       : 2019. 6. 26

□ 향후계획

○ 실시설계 및 특구변경용역 시행         : 2019. 3. 11. ~ 9. 6.

○ 총괄계약 및 공사시행(1차분)            : 2019. 9. ~ 12월

○ 공사시행(2차분)                        : 2020. 1. ~ 12월

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

가축분뇨 공동자원화(에너지화)지원사업

담당자

축산과 소태수(☎620-6418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가축분뇨의 자원화 촉진 및 효율적인 관리를 위한 육상처리기반 구축

○ 개별농가의 분뇨처리에 따른 냄새 민원을 해소하고, 공동처리에 의한 퇴액비       생산, 악취저감 등 대책 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2020년(2년)

○ 위 치 : 남원시 수지면 남창리 산115 외 4필지

○ 규 모 : 99톤/일(가축분뇨처리 100%)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,108백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,108			4,554	4,554
국 비	4,554			2,277	2,277
시 도 비	546.48			273.24	273,24
시군구비	1,275.12			637.56	637.56
지 방 채
민간자본
기 타	2,732.4			1,366.2	1,366.2

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0 %)

○ 예비사업자 선정(농림축산식품부) : 2018. 09월

○ 가축분뇨 공동자원화(에너지화)지원사업 공법(사) 신청 및 선정(도) : 2019. 02~03월

○ 가축분뇨 공동자원화(에너지화)지원사업 공법사 선정(위원회) : 2019.03.18.(새한환경기술,케이드)

※ 2개 업체중 사업주체(새남원영농조합법인)가 1개업체 최종 선정 추진

○ 공동자원화(에너지화)시설 공법사 최종 선정(사업주체) : 2019.04.29.(케이드)

□ 향후계획

○ 공동자원화(에너지화)시설 실시 설계서 작성(공법사-케이드) : 2019. 7월~8월

○ 실시 설계서 검토 및 승인(축산환경관리원) : 2019. 9월

○ 일상감사, 보조금 교부결정(시) : 2019. 9월

○ 사업착공 및 추진, 완공, 시운전(사업주체) : 2019. 10월∼2020. 10월

○ 자금집행 및 사업정산(시) : 2020. 11월∼12월

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

금암길 중로 개설공사

담당자

도시과 오진호(☎620-6462)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인근 지역 아파트 건설로 거주 인구 증가가 예상되고, 이로 인한 교통량이 증가되므로 원활한 교통소통과 생활환경개선으로 주민편익 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2021

○ 위 치 : 남원시 노암동 807-3~636-10

○ 규 모 : 도로개설 L=750m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,000	-	300	500	8,200
국 비
시 도 비
시군구비	9,000	-	300	500	8,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계용역 착수	: 2018. 10. 16.

○ 국가하천 점용에 따른 익산청 사전 협의 완료	: 2019. 4. 18

□ 향후계획

○ 실시설계용역 완료	: 2019. 7.

○ 보상계획 공고 등 용지보상 추진	: 2019. 8.~

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 변경 (당초 L=750m, B=15m, 변경 L=750m, B=10m)

- 변경사유 : 하천 유지관리를 위하여 하천제방을 유지해야하므로 도로폭을 변경하여 계획을 수립해야 한다는 익산청 의견 반영

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

만인로 중로 개설공사

담당자

도시과 한국희(☎620-6463)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선형이 불량하고 노폭이 협소하여 교통사고 위험이 높은 도로를 정비하여 쾌적한 교통환경 제공 및 교통소통 원활

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2021

○ 위 치 : 남원시 향교동 일원 (구.KBS방송국 인접)

○ 규 모 : 도로개설 L=1.1km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,800	-	200	500	5,100
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,800	-	200	500	5,100
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계용역 완료	: 2018. 9 ~ 2019. 3

○ 토지 분할 및 보상 추진	: 2019. 4 ~

○ 관련부서 협의 추진	: 2019. 5 ~

□ 향후계획

○ 관련부서 협의 추진	: 2019. 7

○ 공사 발주 및 착공	: 2019. 10

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

호치길 도로 정비공사

담당자

도시과 박경연(☎620-6474)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선형이 불량하고 노폭이 협소하여 교통사고의 위험을 초래함에 따라 기존도로의 선형을 개량하고 노폭을 2차선으로 확장하여 원활한 교통소통과 주변지역의 생활환경개선 및 안전사고 예방, 지역간의 균형발전 촉진 등 주민편익 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2021

○ 위 치 : 남원시 광치동(광치동산업단지~호치마을) 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1.52km, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,500	-	1,100	1,000	1,400
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,500	-	1,100	1,000	1,400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  29%)

○ 실시설계용역 추진	: 2018. 2. ~ 12.

○ 도로구역 결정 지형도면 고시	: 2019. 4.

○ 용지보상 추진 및 공사착공	: 2019. 5.

□ 향후계획

○ 1차분 추진(교량 및 가도설치)	: 2019. 7. ~ 12.

○ 2차분 추진 및 준공	: 2020. 1. ~ 2021. 4.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

시청로 정비공사

담당자

도시과 오진호(☎620-6462)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시가로망 개량으로 도심경관을 개선하고 보행자의 걷고 싶은 거리를 조성하여 쾌적하고 안전한 도로환경 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2020

○ 위 치 : 남원시 시청로 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=700m, B=35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,500	-	35	2,465	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,500	-	35	2,465	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 기본계획수립 완료	: 2018. 9. 7.~ 12. 21.

○ 실시설계용역 착수	: 2019. 2. 28.

○ 경관계획 보고	: 2019. 6. 19.

□ 향후계획

○ 경관 심의	: 2019. 7.

○ 실시설계용역 완료	: 2019. 8.

○ 공사 시행	: 2019. 9.~

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

금암공원 조성사업

담당자

도시과 김인규(☎620-6476)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 시민들에게 휴식공간 제공 등 삶의 질 향상과 정서함양 도모

◦ 광한루원, 남원예촌, 함파우예술촌으로 연계되는 남원 중심부 문화 관광축을

구성함으로써 구도심 활성화 및 지역발전에 기여

□ 사업개요

◦ 기 간 : 2017 ~ 2025년

◦ 위 치 : 남원시 노암동 566-1번지 일원

◦ 규 모 : 40,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

◦ 총사업비 : 16,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	16,400		1,300	2,000	13,100
국 비
시 도 비
시군구비	16,400		1,300	2,000	13,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

◦ 도시계획시설(금암공원) 결정(건설부 고시 제520호)       : ‘1963. 8. 26.

◦ 금암공원 기본계획수립 연구용역              : ‘18. 3. 20. ~ ‘19. 1. 13.

◦ 기본계획을 반영한 실시설계 및 제반용역 시행       : ‘19. 5. 13. ~ 12. 8.

□ 향후계획

◦ 용역 완료 및 공사시행                       : ‘19. ~  ‘25.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

견두선 농어촌도로 확포장공사

담당자

건설과 김건중(☎620-6532)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 도로 폭이 협소하고 선형이 불량한 구간을 개선함으로써 교통소통을 원활히 하여 쾌적하고 안전한 도로 환경조성에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2023

○ 위 치 : 남원시 수지면 유암리 ~ 고평리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=4.0km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,000	0	250	300	5,450
국 비
시 도 비
시군구비	6,000	0	250	300	5,450
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계 용역 시행                        : 2018. 11월 ~

○ 주민설명회 개최(4회)                       : 2019. 1.  ~ 7.

□ 향후계획

○ 실시설계 용역 완료                        : 2019. 10월

○ 용지보상 및 공사 발주                     : 2019. 10월 ~

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

요천 내 수경시설(분수) 설치사업

담당자

건설과 유종상(☎620-6543)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 요천 고수부지를 활용한 수변 관광자원 개발시설[음악분수, 체험   바닥분수, 물놀이 시설]을 도입하여 볼거리 + 물놀이 체험으로 남원 관광단지와 연계한 관광인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2020

○ 위 치 : 남원시 어현동 741번지 일원 / 요천 국가하천[천변친수시설]

○ 규 모 : 물놀이 분수광장 조성

(음악분수 L=42.0m, 바닥분수(2) 및 광장, 물놀이시설 A=1,170㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,300	0	3,500	0	5,800
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	4,300	0	0	0	4,300
시군구비	5,000	0	3,500	0	1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본 및 실시설계 용역 시행                : 2017. 10월

○ 사업계획 변경 추진보고(시장)               : 2018. 11. 28.

○ 음악분수디자인 공업선정 심의 개최         : 2019.  6. 17.

○ 2019년 제2회 지방재정투자 심의(전북도)     : 2019.  6. 28.

□ 향후계획

○ 조달청 원가심사 및 공사발주 의뢰           : 2019. 8월

○ 음악분수 및 분수광장 운영                  : 2020. 6월 ~

□ 사업변경 내역

○ 사업규모

-  당초: 음악분수(L=75m,B=10m) ⇒ 변경: 음악분수 L=42m, 바닥분수(2), 물놀이 시설A=1,170㎡)

○ 사업비 : 당초 72억원 ⇒ 변경 93억원

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

도산~서매 도로 확포장공사

담당자

건설과 김건중(☎620-6532)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 도로 폭이 협소하고 선형이 불량한 구간을 개선함으로써 교통소통을 원활히 하여 쾌적하고 안전한 도로 환경조성에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2022

○ 위 치 : 남원시 주생면 도산리 ~ 금지면 서매리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.9km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,000	0	-	200	2,800
국 비
시 도 비
시군구비	3,000	0	-	200	2,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계 용역 시행                        : 2019. 1월 ~

○ 주민설명회 개최(2회)                       : 2019. 1.  ~ 7.

□ 향후계획

○ 실시설계 용역 완료                        : 2019. 10월

○ 용지보상 및 공사 발주                     : 2019. 10월 ~

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고죽교차로 ~갈치교차로 도로 확포장공사

담당자

건설과 김건중(☎620-6532)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 도로 폭이 협소하고 선형이 불량한 구간을 개선함으로써 교통소통을 원활히 하여 쾌적하고 안전한 도로 환경조성에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2020

○ 위 치 : 남원시 식정동 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=0.43km, B=25.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,600	500	600	300	500
국 비
시 도 비	500	500	-	-	-
시군구비	2,100	-	600	1,000	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 공사완료(1구간)                           : 2018. 12.

○ 실시설계 용역 시행(2구간)                 : 2018. 10. ~ 2019. 6

○ 공사착수(2구간)                            : 2019. 6.

□ 향후계획

○ 실시설계 용역 완료                        : 2019. 7월 ~

○ 공사 완료                                 : 2020. 6.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

배촌선 농어촌도로 확포장공사

담당자

건설과 박상현(☎620-6533)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 도로 폭이 협소하고 선형이 불량한 구간을 개선함으로써 교통소통을 원활히 하여 쾌적하고 안전한 도로 환경조성에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2021(3개년)

○ 위 치 : 남원시 주천면 배덕리, 송치리 일원

○ 규 모 : 도로 확포장 L=3.56km, B=8.0m

- 덕촌 ~ 웅치 : 도로개설 L=2.76㎞, B=8m

- 중송 ~ 장안교차로 : 도로 확포장 L=0.8km, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,500	0	0	400	5,100
국 비
시 도 비
시군구비	5,500	0	0	400	5,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계 용역 시행                        : 2019. 1. ~ 6.

○ 배촌선(중송) 공사 발주                     : 2019. 7.

□ 향후계획

○ 용지보상 및 행정절차 이행 추진             : 2019. 7. ~ 9.

○ 공사 착공                                  : 2019. 7. ~ 2020. 12.

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 △ 감	비 고
사 업 량	L=2.2km, B=8m	L=3.56km, B=8m	증 L=1.36km, B=8m
사 업 비	4,000백만원	5,500백만원	증 1,500백만원

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

공영주차장 조성사업

담당자

교통과 양진석(☎620-6577)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주차장 조성을 통한 원활한 교통소통으로 시민의 안전사고 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년

○ 위 치 : 동충동, 죽항동, 광한루 주변

○ 규 모 : 주차면 125면 내외(4,490㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,800	-			3,800
국 비	1,900	-			1,900
시 도 비
시군구비	1,900	-			1,900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 주차장 수급실태조사 및 주차환경개선 기본계획 수립	: 2018. 9.

○ 토지승락서 징수 및 사업신청	: 2019. 3.

□ 향후계획

○ 실시설계용역 완료	: 2019. 7.

○ 보상계획 공고 등 용지보상 추진	: 2019. 8.~

10-2. 지방채 발행사업

우리 남원시에서 ‘18년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 남원시에서 ‘18년에 추진한 민간투자사업 현황은 없습니다.