2021년 결산기준

지 방 재 정 공 시

109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 남원시에서 ‘21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
계	149,143	4,342	16,541	36,615	92,161
남원시 복합형 공공도서관 건립	11,800	-	900	6,500	4,400	2023	2020	10
기문가야홍보관 건립	5,500	-	422	1,950	3,128	2023	2020	8
남원미술에듀센터 건립	3,000	-	47	2,000	953	2023	2020	10
한옥자원활용 야간상설공연	242		242	-	-	2021	2020	100
교룡산 국민관광지 활성화사업	8,000	-	241	2,559	5,200	2025	2020	20
이성계장군 전승지 주변 개발사업	7,900	-	179	921	6,800	2025	2020	20
오리정 버선밭 연계 관광지화 사업	6,800	-	495	1,505	4,800	2025	2020	20
2020 한복문화 주간행사	200	200	-	-	-	2021	2020	100
2020 한복문화 거점사업	200	200	-	-	-	2021	2020	100
전북대 남원캠퍼스 유치에 따른 설립	2,500	99	984	1,417		2022	2020	100
남원 육아종합지원센터	8,000	1,200	1,000	2,800	3,000	2023	2020	20
남원 일반산단 하·폐수처리수 재이용시설 설치사업	3,118	-	101	580	2437	2026	2020	10
추어식품산업 클러스터 육성사업	5,000	-	1,200	1,550	2,250	2025	2021	20
지리산허브밸리 고도화	6,000	-	1,950	1,150	2,900	2025	2020	10
지리산 바래봉 눈꽃 동화축제	310	80	130	100	-	2022	2020	70
함파우 지방정원 조성사업	6,516	484	223	2,909	2,900	2023	2020	30
안전한 보행환경 조성사업	4,000	2,079	1,800	121	-	2022	2020	100
서부권 남북 연결도로 개설사업	37,100	-	-	-	37,100	2029	2020	0
도시재생활성화	14,640	-	1,500	1,000	12,140	2024	2020	30
왕정공원 숲속야영장 조성	2,400	-	40	2,360	-	2024	2020	5
어린이과학 체험공간 확충	2,000	-	20	1,980	-	2022	2021	60
춘향문화예술회관 리모델링	5,200	-	4,987	213	-	2022	2020	100
스마트 남원하수처리장 사업	4,074	-	-	2,037	2,037	2023	2021	20
스마트 관망관리 인프라 구축 사업	5,159		80	2,963	2,116	2023	2021	3%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2021년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘21년말 기준으로 작성

10-2. 지방채 발행사업

우리 남원시에서 ‘21년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 남원시에서 ‘21년에 추진한 민간투자사업 현황은 없습니다.