개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

남원시 복합형 공공도서관 건립

담당자

문화예술과 오미자(☎620-6181)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세대가 공감하고 지역주민의 행복과 삶의 기반이 되는 문화시설 확충

○ 시민들의 정보이용, 독서문화활동 및 평생교육을 통해 삶의 만족도 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2023. (3년)

○ 위 치 : 남원시 금동 343-8외 2필지

○ 규 모 : 건축면적 1,083.79㎡, 연면적 3,417.78㎡(지하1층/ 지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,800백만원(국비 5,900,  시비 5,900)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	11,800		900	6,500	4,400
국 비	5,900		900	2,800	2,200
시 도 비
시군구비	5,900			3,700	2,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 도서관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 : 2020. 4. ~ 11.

○ 건축 설계공모                            : 2021. 4. ~ 2021. 7.

○ 기본 및 실시설계                             : 2021. 8. 2. ~ 2022. 2. 27.

○ 조달청 입찰(건축공사 7,635백만원)          : 2022. 7. 29.(개찰)

□ 향후계획

○ 공사계약 및 착공                              : 2022. 08.

○ 디자인 가구(인테리어) 제작 및 설치 용역 시행   : 2022. 10.

○ 공공도서관 준공                               : 2023. 12.

□ 사업변경 내역 : 없음

사업명

기문가야 홍보관 건립

담당자

문화예술과 백옥종(☎620-6158)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화유산의 체계적인 보존관리를 선도함과 동시에 관광자원화의 발판 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021.~2023.(3년)

○ 위 치 : 남원 유곡리와 두락리 고분군 일원

○ 규 모 : 부지면적 6,000㎡, 연면적 500㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원(균특 2,200, 도비 1,100, 시비 2,200)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,500		422	1,950	3,128
균 이	2,200		55	700	1,445
도 비	1,100		28	350	722
시 비	2,200		339	900	961
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  8%)

○ 홍보관 부지 매장문화재 발굴조사               : 2022.4.05.

○ 홍보관 부지 토지매입                          : 2022.4.13.

○ 도시관리계획(용도지역, 문화시설)결정 용역 완료 : 2022.5.20.

○ 홍보관 건축설계 공모                          : 2022.5.26.

□ 향후계획

○ 전시물 제작·설치용역 추진                     : 2022.08.

○ 홍보관 건립공사 착공                          : 2022.하반기.

○ 홍보관 건립공사 준공 및 개관                  : 2023.하반기.

사업명

남원 미술 에듀센터 건립

담당자

문화예술과 유치석(☎620-5661)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미술 중심의 인문학 강좌, 가족 단위 시각예술 관련 체험 활동으로 지역

미술 교육 저변을 확대하고, 시민들에게 미술 체험 기회 제공

○ 자연 미술 테마의 교육 및 체험으로 남원의 자연 유산 재발견 및 홍보

효과 기대

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021~2022년

○ 사업위치 : 남원시 어현동 774(887㎡), 775(758㎡)

○ 총사업비 : 3,000백만원(균이 1,350, 도비 675, 시비 975)

○ 주요시설 : 교육·체험실, 실감미디어전시실, 어린이아뜰리에, 수유실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원(시비 3,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000		47	2,000	953
국 비
시 도 비
시군구비	3,000		47	2,000	953

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

◦ 기본 및 실시설계 용역 계약              : ΄21. 9. 6.

◦ 담당자-용역사 실시설계 협의             : ΄21. 10. 29. ~ ΄22. 5. 9.

※΄21.10.28(1차), ΄21.12.8(2차), ΄22.1.6(3차), ΄22.3.24(4차), ΄22.5.9(5차)

□ 향후계획

◦ 공사 발주                                       : ΄22.  8.

◦ 실내 인테리어 시공사 선정(협상에 의한 계약)      : ΄22.  8. ~ 9.

◦ 남원 미술 에듀센터 중장기 운영 계획 보고        : ΄22. 10.

◦ 남원 미술 에듀센터 준공                         : ΄23.  3.

◦ 남원 미술 에듀센터 개관                         : ΄23.  5.  2.예정

사업명

2021년 한옥자원활용 야간상설공연

담당자

문화예술과 이혜선(☎620-6167)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남원의 대표 문화역사 자원을 활용한 공연예술 활성화로 관광상품 개발
및 지역 이미지 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 5. 8. ~ 9. 25.(18회) / 매주 토요일 20:00~

○ 위 치 : 안숙선명창의여정 특설무대

○ 규 모 : 창극 공연(판소리 ‘춘향가’의 기원에 대한 현대판 재해석)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 242백만원(국비 94, 도비 25, 시비 123)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	242		242
국 비	94		94
시 도 비	25		25
시군구비	123		123
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021 한옥자원활용 야간상설공연 공모사업 신청 : ‘20. 11.

○ 공연 프로그램 계획 및 사전연습 : ’21. 1. ~ 4.

○ 야간상설공연 운영 : ’21. 5. ~ 9.

□ 향후계획

○ 창극 공연 콘텐츠 발굴 및 확대 운영 : ’22. 9. ~ 10.

○ 2023년도 한옥자원활용 야간상설공연 공모(전북문화관광재단) : ‘22. 11.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

교룡산 국민관광지 활성화사업

담당자

관광과 이한올(☎620-6186)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교룡산성의 역사문화와 자연환경을 활용한 특화된 관광자원을 만들고 교룡산국민관광지와 인근 남원관광지와의 연계협력을 통해 남원시의 대표 관광도시 도약

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2025년(5개년)

○ 위 치 : 전라북도 남원시 산곡동 교룡산 국민관광지 일원

○ 규 모 : 13,000㎡(3,932평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원(국비 4,000, 도비 2,000, 시비 2,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,000		241	2,559	5,200
국 비	4,000		106	1,294	2,600
시 도 비	2,000		106	594	1,300
시군구비	2,000		29	671	1,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

ㅇ 남원 관광종합개발계획 수립 완료                  : `19. 12.

ㅇ 지방재정투자심사(전북도) 완료	: `20. 07. 08.

ㅇ 교룡산 국민관광지 기본계획 용역 완료             : `20. 08.

ㅇ 교룡산 국민관광지 활성화사업 실시설계용역 완료   : `20. 11. ~ `21. 09.

ㅇ 교룡산국민관광지 활성화사업(총괄분)	: `21. 12. ~ `23. 7.

ㅇ 교룡산국민관광지 활성화사업(1차분)	: `21. 12. ~ `22. 9.

ㅇ 교룡산국민관광지 건축기획 용역                   : `22. 3. ~ 6.

ㅇ 교룡산국민관광지 활성화사업(경관조명) 전기공사    : `22. 5. ~ `23. 9.

□ 향후계획

ㅇ 복합쉼터 실시설계용역 추진                    : `22. 6. ~ 12.

ㅇ 복합쉼터 공사발주 및 추진                     : `22. 12. ~ `23. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

이성계장군 전승지 주변 개발사업

담당자

관광과 이한올(☎620-6186)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관광산업 활성화를 위해 이성계장군 전승지의 대표 관광자원을 연계·개발하여 지리산권역 관광지로 조성이 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2025년(5개년)

○ 위 치 : 전라북도 남원시 운봉읍 화수리 344-2번지 일원

○ 규 모 : 100,000㎡(30,303평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,900백만원(국비 4,000, 시도비 1,900, 시비 2,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,900		179	921	6,800
국 비	4,000		90	510	3,400
시 도 비	1,900		89	111	1,700
시군구비	2,000			300	1,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

ㅇ 지방재정 투자심사	: 2020. 07.

ㅇ 중기지방재정계획 반영	: 2020. 11.

ㅇ 기본 및 실시설계용역 완료	: 2021. 01. ~ 12.

ㅇ 삼산마을 솔밭공원 정비사업 시행	: ‘21. 12.

ㅇ 서어나무숲 정비사업 시행                           : ‘22. 4. 6.

□ 향후계획

ㅇ 시설공사 시행	: 2023. 01. ~ 2023. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

오리정 버선밭 연계 관광지화 사업

담당자

관광과 이한올(☎620-6186)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오리정 및 버선밭 주변에 테마공원 조성과 상징물 설치 등을 통해 광한루원과 함께 춘향전 관련 관광자원화 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2025년(5개년)

○ 위 치 : 전라북도 남원시 사매면 월평리 27-1번지 일원

○ 규 모 : 150,000㎡(45,454평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,800백만원(국비 3,500, 도비 1,550, 시비 1,750)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,800		495	1,505	4,800
국 비	3,500		190	910	2,400
시 도 비	1,550		189	161	1,200
시군구비	1,750		116	434	1,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

ㅇ 지방재정 투자심사	: 2020. 07.

ㅇ 중기지방재정계획 반영	: 2020. 11.

ㅇ 전라북도 지정문화재(오리정) 현상변경 허가 심의 : 2021. 12.

ㅇ 기본 및 실시설계용역 완료	: 2020. 11. ~ 2022. 01.

ㅇ 버선밭 정비사업 시행                           : ‘21. 11. 17.

ㅇ 원가심사 및 일상감사 완료                      : ‘22. 4. ~ 5.

ㅇ 오리정 정비공사 시행                           : ‘22. 4. 21.

ㅇ 오리정 테마공원 조성사업 시행                  : ‘22. 5. 16.

□ 향후계획

ㅇ 금의환향길 조성사업 및 오리정길 정비사업 추진        : `23. 1. ~ 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

2020 한복문화 주간행사

담당자

관광과 이석선(☎620-6187)

□ 사업목적 및 필요성

○ 예촌을 찾는 ‘한복’체험 수요에 맞춰 조성한 한복전문콘텐츠관 – 화인당의

전국적 마케팅을 위한 전문기관 연계 행사 기획

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 8. ～ 2021. 5.

○ 위 치 : 광한루원, 남원예촌 일원

○ 규 모 : 광한정인 한복 패션쇼 외 5개 프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 200백만원(국비 100, 시도비 50, 시비 50)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자(2020년)	2021년	2022년	2023년 이후
계	200	200
국 비	100	100
시 도 비	50	50
시군구비	50	50
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 보조금 교부결정 : 2020. 11. 25.

○ 한복문화주간 주간행사 추진 : 2020. 3. ~ 5.

- 광한정인 패션쇼, 한복도시홍보 영상물 제작, 사진공모전, 한복주간행사 홍보

- 시민참여기획프로그램 ‘남원예촌이랑께’, 행사영상제작 유튜브 홍보

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

2020 한복문화 지역거점사업

담당자

관광과 이석선(☎620-6187)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한옥자원과 연계한 2단계 韓-스타일 자원-‘한복’의 거점 도시 구축을

위한 기반 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 8. ～ 2021. 5.

○ 위 치 : 광한루원, 남원예촌 일원

○ 규 모 : 광한정인 전시외 7개 거점 프로그램 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 200백만원(국비 100, 시도비 50, 시비 50)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자(2020년)	2021년	2022년	2023년 이후
계	200	200
국 비	100	100
시 도 비	50	50
시군구비	50	50
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 보조금 교부결정 : 2020. 11. 25.

○ 한복문화주간 주간행사 추진 : 2020. 3. ~ 2021. 5.

- 광한정인 전시, 한복입기 체험, 한복소재 이용 경관조성

- 지역축제 자원과 연계한 한복문화 확산 프로그램

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

전북대 남원캠퍼스 유치에 따른 설립

담당자

교육체육과 박중연(☎620-5604)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남원시 전략산업(목칠공예, 화장품뷰티) 전문인력 양성을 위한 전북대학교 지역산업학과 활성화 및 체계적 산업인재양성 체계 마련을 위한 전문학습공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 10월 ~ 2022년 5월

○ 위 치 : 남원시 요천로 1281(남원시 평생학습관 앞)

○ 규 모 : 연면적 907.24㎡(강의실 8개소, 사무실 4개소, 도서실)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,401백만원(시비 2,401)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,401		984	1,417
국 비
시 도 비
시군구비	2,401	99	984	1,417
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 생활SOC 복합화 공모사업 선정                       : ‘19. 10.

○ 공유재산 관리계획 수립 및 의회 변경승인(평생학습관)  : '20. 10. 5.

○ 2021년 중기지방재정 계획 반영(남원시 평생학습관)     : '20. 12.

○ 기본 및 실시설계 완료                                : '21. 6. 18.

○ 공사 착공(건축, 전기통신, 소방)                       : ’21. 8. 23.

○ 건축공사 준공	: ’22. 4. 18.

○ 건축물 사용승인	: ’22. 5. 16.

○ 준공식	: ’22. 6. 22.

□ 향후계획

○ 건축물 유지관리                                      : ’22. 6. 22. ~

□ 사업변경 내역

○해당없음

사업명

남원시 육아종합지원센터 건립

담당자

여성가족과 조성도(☎620-6219)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어린이집 및 가정양육 지원 등을 포괄하는 육아지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022

○ 위 치 : 조산동 295-2, 295-3번지

○ 규 모 : 연면적 1,594㎡ / 지하1층, 지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,000	1,200	1,000	2,800	3,000
국 비	1,000		300	700
시군구비	7,000	1,200	700	2,100	3,000

□ 추진상황

○ 공사 중지                                                : 2021. 12.

○ 공사 재착공                                              : 2022. 8.

□ 향후계획

○ 공사 준공                                                : 2023. 8.

○ 개원                                                     : 2024. 1.

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : (당초) 2020 ~ 2022     (변경) 2020 ~ 2023

○ 규    모 : (당초) 2,000㎡ 지상3층  (변경) 1,594㎡ 지하1층 지상3층

사업명

남원 일반산업단지 하·폐수처리수 재이용시설 설치사업

담당자

기업지원과

이주열(☎620-6653)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남원 일반산업단지 공공폐수처리시설에서 배출되는 하·폐수처리수를 재       이용하여 수돗물 사용량 절감, 물의 순환이용, 하천의 수질개선에 기여하여       지역주민의 생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2026년

○ 위 치 : 남원시 사매면 월평리 1109

○ 규 모 : 하·폐수처리수 재이용시설(Q=325㎥/일)

┏ 1단계(Q=65㎥/일) - 2021 ~ 2023년(2년)

┗ 2~4단계(Q=260㎥/일) - 2023 ~ 2026년(4년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,118백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,118		101	580	2,437
국 비	2,183		101	375	1,707
시군구비	935			205	730

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 하·폐수처리수 재이용시설 실시설계용역 완료            : 2021. 10. 29

○ 행정절차 진행중(재원협의-전북지방환경청)

□ 향후계획

○ 하·폐수처리수 재이용시설 설치사업 착수                : 2022. 08.

○ 하·폐수처리수 재이용시설 설치사업(1단계) 준공         : 2023년

○ 하·폐수처리수 재이용시설 설치사업(2~4단계) 진행        : 2023년 이후

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

추어식품산업 클러스터 육성사업

담당자

농촌활력과 양미경(☎620-6683)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남원 추어식품산업 활성화를 통한 지역경제 성장동력 기반 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 남원시 일원

○ 규 모 : 5개 전략분야 12개 세부사업

- 유통마케팅고도화 : 브랜드 구축, 채널발굴 및 유통활성화, 통합 홍보마케팅

- 관광고도화 : 추어 관광고도화를 위한 컨텐츠 개발 및 보급

- 상품개발 및 사업화 : 추어 기능성 검증 및 표준화, 제품개발, 맞춤 R&D 지원

- 혁신체계 및 네트워크 활성화 : 추어산업 역량강화, 품질관리 현장컨설팅

- 사업단 경영시스템 고도화 : 사업단 운영, 세부사업 컨설팅 및 마스터플랜 수립

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000		1,200	1,550	2,250
국 비	-
시 도 비	3,150		900	900	1,350
시군구비	1,850		300	650	900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 사업단 직원 채용                                 : `22. 2. 18. ~ 3. 8.

○ 사업단 운영 및 고유번호증 발급(농업인상생플랫폼 1층) : ‘22. 3. 10.

○ (사)남원추어식품클러스터사업단 창립총회 개최      : ‘22. 4. 12.

○ 법인설립 등기 및 사업자 등록 완료                 : ‘22. 7. 8.

○ 시장성 조사 및 추어 기능성 검증 용역 계약          : ‘22. 7. 20.

□ 향후계획

○ 추어 소재를 활용한 상품개발 추진                  : ‘22. 10. ~

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음.

사업명

지리산 허브밸리 고도화

담당자

원예산업과 노치호(☎620-6253)

□ 사업목적 및 필요성

○ 감성적이고 자연미가 넘치는 시설조성을 통하여 허브밸리만의 차별화된

매력창출 공간 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 남원시 운봉읍 바래봉길 211

○ 규 모 : 복합토피아관 리모델링, 오헤브정원 리뉴얼

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,000		1,950	1,150	2,900
국 비
시 도 비	4,275		1,350	750	2,175
시군구비	1,725		600	400	725
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본구상 및 추진계획 수립                       : 2020. 03.

○ 총괄계획가 위촉 및 전문가 자문회의(8회)          : 2021. 03. ~ 08.

○ 기본 및 실시설계 용역 착수                      : 2022. 01.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 용역 완료                      : 2022. 09.

○ 조경 및 실내건축 공사 착공                      : 2022. 10.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

지리산 바래봉 눈꽃 동화축제

담당자

원예산업과 노치호(☎620-6253)

□ 사업목적 및 필요성

○ 겨울 축제 이슈창출을 통한 지역 관광 홍보 마케팅 및 동절기 방문객 유치       등 겨울철 지역관광 활성화 및 소득창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년

○ 위 치 : 남원시 운봉읍 바래봉길 211

○ 규 모 : 겨울정원조경전시, 식물전시체험, 식물체험 및 화상라이브 강좌

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 310백만원(도비 175, 시비 135)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	310	80	130	100
국 비
시 도 비	175	40	85	50
시군구비	135	40	45	50
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 기본구상 및 추진계획 수립                     : 2021. 11.

○ 행사관계자 협의 및 실행준비                    : 2021. 12. ~ 2022. 01.

○ 안전관리 심의 및 코로나 대책 점검             : 2022. 01.

○ 행사진행                                      : 2022. 02.

□ 향후계획

○ 2022년 사업평가 및 전문가 회의                : 2022. 08.

○ 2023년 공모사업 준비 및 발표                  : 2022. 10.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

함파우 지방정원 조성사업

담당자

산림녹지과 송현덕(☎620-6447)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유원지로 지정 고시되었으나 장기미집행 시설로 남아있는 유휴지를 주변

관광지와 연계한 역사·문화·예술이 접목된 명품정원 조성

○ 숲과 지형을 최대한 활용 꽃과 숲이 어우러진 대규모 꽃단지 조성으로

침체된 지역 경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년~2023년

○ 위 치 : 남원시 노암동 산13번지 일원

○ 규 모 : 11.3ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,516백만원(국비 2991, 시비 3,525)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,516	484	223	2,909	2,900
국 비
시 도 비	2,991	242	59	1,240	1,450
시군구비	3,525	242	164	1,669	1,450
지 방 채
민간자본
기 타

※ 2021년 예산액 2,533백만원 중 2,257백만원 명시이월, 53백만원 사고이월

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 기본 및 실시설계용역 등 완료               : ‘20. 9. 3. ~ ‘22. 4. 17.

- 문화재 지표·표본·시굴조사, 산림조사, 재해영향평가 용역 완료

○ 도시관리계획결정(변경)승인고시              : ‘21. 10. 1.

○ 실시계획인가신청 및 관련부서 협의          : ‘21. 12. 20.

- 협의완료 : 문화예술과, 건설과, 안전재난과, 건축과, 상수도사업소, 농정과 등

- 환경영향평가 협의회 심의                   : ‘22. 4. 27.~ ‘22. 6. 16.

- 환경영향평가 용역 시행                     : ‘22. 5. 19.~ ‘22.11. 14.

□ 향후계획

○ 환경영향평가 완료 및 전북지방환경청 재협의 : ‘22. 10. ~ 11월.

○ 원가심사(전라북도) 및 발주                 : ‘22. 11월.

○ 사업 시행                                  : ‘22. 11. ~ 2023. 12월

사업명

안전한 보행환경 조성사업

담당자

도시과 정보천(☎620-6463)

□ 사업목적 및 필요성

○ 보행자들이 안전하고 편리한 보행 동선이 확보되지 않아 교통안전 확보가       미흡하여 교통사고 위험에 상시 노출되어 보행환경 개선이 시급함.

○ 도심 상가지역 불법 노상주정차로 인한 교통사고 예방 및 교통사고 위험성       감소에 기여.

○ 교통약자(장애인, 노약자, 임산부, 학생등)들의 보행 안전성과 편의성, 쾌적성을 확보.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2022(4년)

○ 위 치 : 남원시 동충동, 죽항동 일원

○ 규 모 : 인도개설 L=1.4km, B=2.0m, 교통정온화 시설 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원(국비 600, 시비 3,400)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,000	2,079	1,800	121
국 비	600	300	300
시 도 비
시군구비	3,400	1,779	1,500	121
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공모사업선정(행안부)                              : ‘18.10.25

○ 기본 및 실시설계 추진(행안부 설계자문 병행 추진)  : ‘19. 03. ~ 12.

○ 전선지중화 사업 확정                             : ‘19. 12. 04.

○ (2구간)공사 착수                                  : ‘20. 05.

○ (2구간)한전·통신 전선 지중화 추진                 : ‘20. 12. ~ ‘21. 05.

○ (1구간)공사 착수                                  : ‘21. 05.

○ (1구간)한전·통신 전선 지중화 추진                 : ‘21. 05. ~ ‘22. 05.

○ (2구간)공사 준공                                  : ‘21. 11.

○ (1구간)공사 준공                                  : ‘22. 07.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

서부권 남북 연결 도로 개설사업

담당자

도시과 양진석(☎620-6462)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개발이 둔화된 서부권(신정, 금동, 송동)지역 연결도로 확충으로 지역경제       활성화 및 지역균형발전 도모

○ 관내 순환도로 개설로 교통류를 외곽으로 처리하고 도심으로의 접근성을       향상시켜 지역발전 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2029(7년)

○ 위 치 : 남원시 신정동(남원역) ~ 송동면 장국리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=2,400m, B=25m, 교량2개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 37,100백만원(시비 37,100)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	37,100				37,100
국 비
시 도 비
시군구비	37,100				37,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 향후계획

○ 편입토지·지장물 감정평가 실시 및 협의요청      : ‘22 .06. ~ ‘23. 12.

○ 실시설계용역 추진                              : ‘23. 01. ~ ‘24. 06.

○ 각종 제반 용역 추진                            : ‘23. 12. ~ ‘24. 06.

- 소규모환경영향평가, 사전재해영향검토, 교통안전진단 등

○ 사업 발주                                      : ‘24. 09.

○ 전체 준공                                      : ‘29. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

도시재생 활성화

담당자

도시과 이영호(☎620-6472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원도심 재생을 통한 관광인프라 구축, 구도심 활성화 및 공모대응을 통한 도시재생사업 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2024

○ 위 치 : 남원시 원도심 일원

○ 규 모 : 정주환경조성 3개소, 구도심 거점재생 3개소, 도시재생사업 공모신청을 위한 토지매입

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,640백만원(시비 14,640)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	14,640		1,500	1,000	12,140
국 비
시 도 비
시군구비	14,640		1,500	1,000	12,140
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 청년 정주환경 조성사업(1개소) 완료                : `21. 11. 29.

○ 거점재생사업(1개소) 완료                          : `21. 02. 14.

○ 도시재생사업 공모대응을 위한 토지매입 추진 중    : `21. 04. ~ 현재

□ 향후계획

○ 사업추진을 위한 토지매입 완료                    : `23. 12.

○ 정주환경 조성사업 및 거점재생사업 완료           : `24. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

춘향문화예술회관 리모델링

담당자

관광시설사업소

최학열(☎620-5722)

□ 사업목적 및 필요성

○ 향문화예술회관의 리모델링에 따른 공연환경개선

- 무대기계교체 및 무대확장으로 공연안전확보 및 공연환경 개선

- 객석교체 및 재배치로 관람환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 2월 ~ 2022년 2월

○ 위 치 : 남원시 양림길 43 춘향문화예술회관

○ 규 모 : 춘향문화예술회관 대공연장 무대시설 및 객석 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,200백만원(도비 2,000, 시비 3,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,200	5,200	4,987	213
국 비
시 도 비	2,000	2,000	1,918	82
시군구비	3,200	3,200	3,069	131
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 춘향문화예술회관 리모델링 실시설계 (2021. 2월 / 50%)

○ 춘향문화예술회관 리모델링 공사발주 (2021. 5월 / 96%)

○ 춘향문화예술회관 리모델링 공사완료 (2022. 2월 / 100%)

□ 향후계획

○ 남원시민을 위한 공연문화예술에 중심

○ 예술회관 환경 개선하여 쾌적한 환경을 조성하여 시민에 제공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

어린이과학체험공간 확충

담당자

관광시설사업소 손형관(☎620-8988)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남원의 지역문화 특수성을 살려 어린이 및 저학년 학생들이 이용할 수        있는 과학관을 확충하고 나아가 젊은층을 유입할 수 있는 교육 인프라를       구축하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 5. 01. ~ 2022. 12. 31.

○ 위 치 : 남원시 광한서로 12외 4(경외상가 5, 6, 7동)

○ 규 모 : 실내공간 576㎡ 전시관 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원(국비 1,000, 시비 1,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,000		20	1,980
국 비	1,000		20	980
시 도 비
시군구비	1,000			1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 착공 : ′22. 1. 03.

○ 준공(예정일) : ′22. 9. 30.

□ 향후계획

○ 2022년 10월중 개관 예정

○ 남원다움관 및 생활형 SOC사업과 연계하여  프로그램 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

스마트 남원하수처리장 구축

담당자

환경사업소 이청수(☎620-5825)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수처리 과정에 대한 ICT 기반의 실시간 모니터링, 원격 제어관리, 지능화 등 스마트 하수도 관리체계 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2023년(2개년)

○ 위 치 : 남원하수처리장

○ 규 모 : 스마트 하수처리장 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,074백만원(국비 2,037, 도비 1,018, 시비 1,019)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,074			2,037	2,037
국 비	2,037			1,018.5	1,018.5
시 도 비	1,018			509	509
시군구비	1,019			509.5	509.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 실시설계 용역 착수      : ‘21. 12월

○ 환경부 협의체 회의      : ‘22. 04월

□ 향후계획

○ 환경부 재원협의 및 실시설계 용역 완료 : ’22. 08월 ~ 10월

○ 공사 착공 및 준공                     : ‘22. 10월 ~ ’23. 12월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

스마트 관망관리 인프라 구축 사업

담당자

상수도사업소 방극진(☎620-6875)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남원시는 수돗물 사고 발생 시 미흡한 대응 및 적수사고 재발방지 대책으로 ICT를 활용한 실시간 수량․수질 감시 및 신속대응이 가능한 스마트 관망관리 인프라 구축이 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2023

○ 위 치 : 남원시 급수구역

○ 규 모 : 재염소 투입 설비 12개소, 정밀여과장치 14개소, 스마트 미터링 710전, 소규모 유량·수압감시 시스템 13개소, 다항목 수질계측기 9개소 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,159백만원(국비 3,611, 시비 1,548)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,159		80	2,963	2,116
국 비	3,611		80	2,963	568
시 도 비
시군구비	1,548				1,548
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 스마트 관망관리 기본계획 수립 용역 추진(환경부)    : `20. 01. ~ `21. 02.

○ 실시설계용역 착수	: `21. 03. 22.

○ 선진지 벤치마킹

- 전주, 정읍(수자원공사 금강유역본부·정읍권지사)	: `21. 05. 12.

- 세종(스마트 워터 시티 사업)	: `21. 08. 18.

- 광주(스마트 미터링 관련)	: `21. 09. 16.

- 대구(달성군 스마트 관망관리사업, 국가 물산업 클러스터)	: `21. 10. 07.

○ 배수지별 관말부 잔류염소 측정·분석	: `21. 08.~10.

○ 환경부 협의 및 실시설계 추진	: `22. 01.~06.

► 우리 시에 적합한 기술별 설치대상, 규모, 수량 조정에 따른 환경부 협의

□ 향후계획

○ 실시설계용역 추진	: `22. 07.~08.

○ 원가심사 및 공사 발주	: `22. 08.~09.

○ 기술별 사업 추진	: `22. 09.~

► 재염소 투입 설비, 다항목 수질 계측기, 정밀여과장치, 스마트미터링 등

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분			당 초		변 경		증 △감
			수 량	사업비	수 량	사업비	수 량	사업비
합 계				4,732		5,159		증 427
실시간 수압계			12개	40	10개	33	△ 2개	△ 7
스마트 관로 인식체계			600개소	117	1,000개소	140	증400개소	증 23
워터코디·닥터		워터코디	3개조	21	1개조	7	△ 2개조	△ 14
		워터닥터	3개조	36	1개조	26	△ 2개조	△ 10
스마트미터링			462전	144	710전	406	증 248전	증 262
소규모 유량·수압 감시 시스템			5개소	430	13개소	983	증8개소	증 553
재염소 투입 설비			8개소	1,695	12개소	1,591	증 4개소	△ 104
다항목 수질계측기			10개소	527	9개소	466	△ 1개소	△ 61
자동드레인			6개소	622	-	-	△ 6개소	△ 622
관세척			8개소	554	-	-	△ 8개소	△ 554
정밀여과장치			6개소	546	14개소	1,037	증 8개소	증 491
운영시스템 개량			-	-	1식	255	-	증 255
부대비용	실시설계		-	-	1식	114	-	증 114
	건설사업관리		-	-	1식	101	-	증 101